		제348회 도의회 정례회 2023. 11. 7. ~ 11. 20.

- 2023년 행정사무감사 -

주요업무 추진상황 보고

	건설본부

		Ⅰ. 기본현황 □ 기구 및 기능 □ 예산 현황 Ⅱ. 주요업무 추진상황 □ 총 평 □ 분야별 추진실적 및 계획 Ⅲ. 도의회 관련 처리상황 □ 2022년도 행정사무 처분요구 처리상황 Ⅳ. 참고사항 □ 당면 현안상황 □ 사업별 추진 내역 □ 간부명단

보 고 순 서

Ⅰ. 기본 현황

□ 기구 및 기능

① 기 구 : 5과, 2사무소, 24팀

											본 부 장
행정 관리과					도로 건설과				공공 건축과				시설유지 관리과					하천 개발과			동부 사무소					서부 사무소
행정경리					도로1				대형건축				시설유지 관리					지역개발			서무					서무
계약					도로2				건축사업				품질관리					하천1			보수1					보수1
					도로보상				건축지원									하천2			보수2					보수2
																		하천보상			구조물 관리					구조물 관리
																					단속					단속

<정․현원 현황>

( 2023. 9. 30. 字 )

구 분		계	일 반 직(정원/현원)						비고
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계		115/111	1/1	7/7	26/29	43/33	28/34	10/7	-
본부		68/66	1/1	5/5	15/18	25/21	14/18	8/3	-
	행정관리과	13/13	1/1	1/1	2/2	5/8	3/1	1/0	-
	도로건설과	15/16	-	1/1	3/4	7/4	3/6	1/1	-
	공공건축과	17/17	-	1/1	4/5	7/7	3/3	2/1	-
	시설유지관리과	8/6	-	1/1	2/3	1/0	1/1	3/1	-
	하천개발과	15/14	-	1/1	4/4	5/2	4/7	1/0	-
동부사무소		24/22	-	1/1	5/5	9/4	7/9	2/3	-
서부사무소		23/23	-	1/1	6/6	9/8	7/7	0/1	-

※ 공무직(76명) : 행정실무 3, 시험□검사실무 1, 도로보수원 56, 과적단속요원 16

② 주요기능

	- 행정관리과
	❍ 조직 · 예산 · 청사관리 및 직원 후생 · 복지 ❍ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매
	- 도로건설과
	❍ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍ 국가지원지방도, 지방도 확 · 포장사업 시행 및 보상업무
	- 공공건축과
	❍ 공공 건축사업 시행 및 기술지원 ❍ 건축현장 관리 · 감독업무
	- 시설유지관리과
	❍ 道 공공건축물 유지관리 및 보수 · 보강사업 ❍ 건설공사 자재 품질검사 및 현장 품질 · 안전점검
	- 하천개발과
	❍ 지방하천 정비 및 재해복구 · 보상업무 ❍ 지역개발 기반시설 사업
	- 동부□서부사무소
	❍ 지방도 및 위임국도 유지관리 · 보수사업 ❍ 자연 재해대책 수립 · 시행 및 운행제한 위반차량 단속

□ 예산 현황

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 1,615백만원 - 수수료 150, 과태료 180, 그외수입 45, 교부세 1,200, 지난년도수입 40 ∙ [세 출 예 산] 38,961백만원 - 사업예산 25,942, 행정운영경비 12,620, 이자상환 399

❍ 재배정 예산 사업 :			367,989백만원					(단위 : 백만원)
도로 확･포장	공공건축	시설 유지관리		하천정비	재해복구		지역개발		도로유지 관리
156,489	82,145	103		71,319	0		800		57,133

※ 재해복구 및 지역개발사업(2건)은 이월 예산으로 사업 추진 (이월액 : 37,018백만원)

Ⅱ. 주요업무 추진상황

□ 총   평

안전하고 신속한 건설사업 추진으로 도민 중심의 건설행정 구현

지역건설업체의 수주율 및 하도급율 제고를 통한 지역경제 활성화

체계적인 현장관리 및 관리감독 철저로 안전사고 제로화 추진

□ 주요성과로는

사업분야

주요업무 추진성과

□ 도 로 건 설

이호~양곡 국지도 확포장공사 등 44지구 추진 / 1,139억원 집행

도로보상 1,983건 / 780억원 보상 완료

□ 공 공 건 축

충남미술관 건립공사 등 25건, 351억원 집행

철저한 공정관리로 고품질 공공건축물 건립

□ 시설 유지관리

공공건축물 유지관리 업무추진 규정 제정 및 매뉴얼 마련으로 안전관리체계 구축

해빙기(32개소) · 우기(32개소) · 폭염기(27개소) 대비 안전점검실시

성토용 흙 · 아스콘 등 품질시험 139건 / 907종목 실시

□ 하천 · 지역개발

중산천 지방하천 정비사업 등 45지구 / 421억원 집행

(하천보상) 1,478건 / 95억원 보상 완료

□ 도로 유지 · 보수

’23년 사업비 241지구 1,224억원 중 636억원 집행(집행률 52%)

이동 · 합동단속 등 7,929건 검차, 190건 적발

□ 아쉬웠던 점은

❍ 공공건설공사 대규모 예산 편성되었으나 각종 민원으로 인한 보상지연 등 행정절차 및 공사추진 지연으로 예산 집행저조

❍ 건설원자재 값 폭등(시멘트, 철근 등)으로 인한 자재수급 지연, 인건비 상승과 건설노조 파업 등에 따른 공사 추진 난항

□ 앞으로

❍ 체계적인 공정관리와 철저한 안전관리로 고품질 건설사업 추진

❍ 지역주민과 적극적으로 소통하여 도민을 중심으로 안전 공공건설사업 조속한 추진과 예산집행률 향상 노력

□ 분야별 추진실적 및 계획

【1】「지역업체 우선·공정 계약」으로 지역상생 도모

충남도 건설산업 활성화를 위한 지역업체 수주율 확대

대가 지급기간 단축, 선금 지급 활성화로 지역경제 활성화 도모

임금체불 방지 및 하도급 질서 확립을 통한 공정한 건설환경 조성

□ 지역건설산업 활성화를 위한 관내업체 우선계약 추진

❍ 입찰 시 지역제한 및 지역의무 공동도급제(최대 49%) 실시

❍ 1인 수의계약(2천만원 이하) 대상, 지역업체 우선계약 추진

❍ 직무성과과제 연계 상반기 지역업체 수주율 83.68% 달성

< 2023년 지역업체 계약 현황 >

(단위:억원)

구 분	합계		지역 내		지역 외		지역업체 계약율
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
총 계	1,942	2,311	1,625	1,670	317	641	83.68%	72.26%
공 사	305	1,176	297	874	8	302	97.38%	74.32%
용 역	399	284	368	151	31	133	92.23%	53.17%
물 품	1,238	851	960	645	278	206	77.54%	75.79%

□ 예산 적극집행으로 지역경제 활성화 도모

❍ 경영난 해소를 위한 선금 지급율 확대(계약금액의 100분의 70 → 80)

❍ 대가 청구 지급기간 단축(5일 이내 → 3일 이내)

□ 하도급 질서 확립·건설근로자 보호로 공정한 건설환경 조성

❍ 임금 체불 방지를 위한 노무비 직접지급제 실시

❍ 표준하도급계약서 사용 의무, 대금직불제·지급보증제 실시로 하도급 보호

앞으로
			□ 지역업체 수주율 확대, 재정 적극집행 등으로 지역경제 활력 제고
도모

【2】지역발전을 선도하는 체계적인 지방도로망 구축

지역 발전의 핵심요소인 교통 인프라 차질없이 구축

안전하고 쾌적한 도로건설을 통한 도민 교통편의 증진

❍ 2023년 도로건설사업 현황 : 총 44개지구 / 158,394백만원(본예산)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	44	158,394	7	23,379	29	131,479	8	3,536
국지도	10	21,465	3	14,922	6	6,257	1	286
지방도	26	126,868	2	8,457	17	115,161	7	3,250
국 도	4	5,117	2	-	2	5,117	-	-
기 타	4	4,944	-	-	4	4,944	-	-

※ 준공지구(공사6, 사후1), 계속지구(설계14, 보상4, 공사11,), 신규지구(설계8)

❍ 도로건설공사 상반기 2개지구 개통1), 하반기 4개지구 차질없이 준공2)

- 하반기 신규설계용역 3개지구3) 발주 등 지역 교통인프라 구축 추진

1) 상반기 개통 : 장평지구(청양), 정산지구(청양)

2) 연내준공 : 이호~양곡(홍성), 청양~신양IC(청양) 규암~청남(부여), 대술~정안(예산)

3) 신규설계용역 : 신계~관정(천안), 당정~남전(서천), 장선~복룡(공주)

❍ 속도감 있는 도로건설사업 추진으로 하반기 예산집행 추진

- 총사업비 158,394백만원 중 113,945백만원 집행 완료(’23.9.30 기준)

- 공사 현장별 집행계획 점검회의(3회) 등 집행 및 공사관리 철저

※ 총사업비 158,394백만원 중 135,000백만원(집행률 85%) 연내 집행예정

앞으로
			• 2023년 하반기 도로건설사업 4개지구 적기개통 • 체계적인 사업관리 통한 신속집행 추진(이월 최소화)

【3】도민과 소통하는 안전한 도로건설공사 추진

지역주민의 의견을 적극수렴하여 이용자 중심의 도로공사 추진

공사현장 안전점검 강화 및 전문적인 건설행정서비스 구축

□ 지역주민 의견청취 및 공사현장 관계자 소통 활성화 추진

❍ 주민설명회·간담회 : 산동~상덕 등 20개 지구(24회, 235명 참석)

* 설계, 공사, 보상 추진 시 지역주민 민원사항 수시 현장 대응

❍ 공사관계자(감리, 현장소장 등) 소통 활성화 및 상시안전점검체계 구축

- 분기별 간담회를 개최하여 공사현장별 사업추진현황 보고, 애로사항 청취 등 발주청과 현장인력 소통 활성화 노력

- 각종 자연재해, 현장 안전관리를 위한 비상연락망(SNS)을 운영하여 상시 보고체계 구축 및 현장상주인력 상시 안전점검

□ 철저한 공사현장 안전관리와 도로건설공사 전문성 강화 추진

❍ 계절별 기상 취약시기 공사현장 사전안전점검(중앙·자체) 실시

- 해빙기 안전점검(3월), 수해예방(6월), 폭염대비(8월) / 8개 지구

* 국토교통부, 대전지방국토관리청, 국토안전관리원 등 계절별 안전점검 실시

❍ 고품질 도로건설공사 추진을 위한 자문위원회 구성·운영

- 설계·공사 기술적 제언 및 자문 위한 기술자문위원회 개최(11회 )

- 공사에 적용할 신기술·특허공법 선정 위한 공법선정위원회 개최(3회)

앞으로
			• 민원사항 적극대응 및 지역주민 의견청취 강화(상시대응) • 무사고 실현을 위한 건설현장 안전관리 지속 추진

【4】합리적이고 신속한 보상행정으로 도민편익 증대

찾아가는 보상 협의로 민원 최소화 및 도민 중심 보상행정 실현

도로·하천사업에 편입되는 사유재산에 대한 객관적이고 공정한 보상

□ 2023년 도로·하천 3/4분기 보상실적

❍ 총 42개 지구 (직접시행 35 / 위탁사업 7 ) / 87,554백만원 집행

(단위 : 백만원)

구 분		’23년 보상계획		’23년 보상실적			’23년 4분기 계획
		건 수	금 액	건 수	금 액	보상 진행률	건 수	금 액
합 계		6,208	108,438	3,450	87,554	81%	2,758	9,930
도로 (26)	자체 (19)	2,372	38,039	1,241	12,196	32%	1,131	4,343
	위탁 (7)	1,498	53,168	743	65,872	124%	755	2,752
하천(16)		2,338	17,231	1,466	9,486	55%	872	2,835

□ 3-ONE 찾아가는 보상서비스를 통한 대민서비스 강화

❍ 사업지구별 평균 4~5회 이상‘찾아가는 보상 상담창구’운영 등 도민 행정편의 극대화를 위해 2023년 9월 기준 198회 현장 방문

* 3-one : 한번의 만남으로(one-time), 소유자의 서랍에서 인감만 꺼내면           (one-action), 보상완료(one-spot)된다는 의미

□ 토지소유자 참여로 권리보호 및 보상액 산정의 공정성 확보

❍ 토지소유자 □ 감정평가사 □ 사업시행자 등 8명 이상 16명 이하로 구성되는‘보상협의회’를 운영하고‘토지소유자 감정평가법인 추천제’적극 홍보 등 보상 협의 시 토지소유자 의견 반영

□ 보상업무 전문성 확보 및 적극적인 보상행정 실현

❍ 드론 정사영상 촬영 및 지적 중첩도 활용으로 보상업무 효율성 증대

❍ 보상‘단계별 매뉴얼’수록자료 수시 갱신

❍ 선지정 측량에 따른 편입용지(면적 등) 조기 확정으로 보상 기간 단축

※ 선지정 측량 선행 시 보상기간 최대 1.5 ~ 2개월 소요 / 기존 3개월 이상 소요

앞으로
			• 도민과 상생 소통하는 신속·정확한 보상행정 실현

【5】공공건축 기획업무 강화로 업무효율 향상

건축기획 전문화를 통한 내실있는 건축 행정업무 추진

업무전문성 강화 및 합리적 직무환경 조성을 통한 업무효율 향상

□ 2023년 공공건축사업 : 25건 / 85,258백만원

(단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
25	85,258	7	2,790	13	81,313	5	1,155

【2023년 하반기 공사업무 10건(준공 5건, 공사발주 5건) / 63,343백만원】 (준 공) 대천항 관공선 통합사무실, 수산종자 연구센터, 공주소방서 비상대기 숙소 등 (공사발주) 충남미술관 및 공영주차장, 충남광역형 탄소중립연수원, 안면도 지방정원가든센터 등
대천항 관공선 통합사무실	수산종자 연구센터	충남미술관 및 공영주차장	충남광역형 탄소중립연수원

□ 합리적인 사업계획 수립을 위한 의뢰부서 기획업무 지원

❍ 최근 관련법령 개정 등에 따른 행정절차 대폭 강화로 의뢰부서의 사업추진 어려움에 따른 기획업무 지원

❍ 예산·규모·디자인 등 사전 업무협의를 통한 신속한 건축행정 구현

□ 직무교육 강화 및 조직문화 개선을 통한 업무효율 향상 추진

❍ 분야별 직무교육 및 직무 동아리 활동을 통한 업무역량 강화

※ ① 2023 코리아빌드위크 견학, ② 2023 건축분야 공무원 워크숍, ③ 건설사

❍ 즐겁고 활기찬 소통문화 조성 등 조직문화 개선으로 업무능률 향상

- 업무 애로사항 청취 및 건강한 조직문화 선도

앞으로
			• 철저한 안전□품질□공정관리를 통한 우수 공공건축물 조성 • 전문성 강화 및 업무환경 개선을 통한 업무효율 향상

【6】공공건축물 통합 유지관리 및 건설현장 품질·안전 관리 강화

道 공공건축물 유지관리 체계 일원화로 적기에 보수·보강 추진, 건축물 내구성 향상 및 안전관리 강화 기틀 마련

건설 현장별 품질·안전점검 실시하여 안전한 건설 현장 조성

□ 道 공공건축물 유지관리 업무 강화로 건축물 내구성․안전 향상

❍ 업무추진 규정 제정(4월), 매뉴얼 작성(5월) 등 유지관리 체계 마련

※ ’23년 유지관리 대상 공공건축물 : 10개소 94동 (연도별 확대 추진)

❍ ’23 유지관리 대상 공공건축물 실태조사(4~5월), 우기철 안전점검(7월)

- 보건환경연구원 옥상방수 등 4개소(12억원) 보수․보강공사 추진 중

- 축산기술연구소 등 4개소 방수 ․ 시설개선공사 ’24년 예산확보 추진

⇨ 업무성과 분석, 실태조사(1회/년) ․ 안전점검(2회/년) 및 유지관리사업 확대

□ 건설현장 안전확보 및 품질향상 위한 안전점검 실시(4회/년)

❍ 해빙기(3월), 우기(6월), 폭염(8월) 대비 건설 현장별 품질․안전 점검 추진

- 총 91개 현장 점검 추진, 18개 현장 29개 지적사항* 조치완료

* 근로자 쉼터 설치 미흡, 현장관리 및 서류구비 미흡 등

❍ 중대산업재해 대응, 건설본부 소관 건설현장 안전점검 추진(2회/년)

* 8월, 15개 현장 점검완료(중대산업재해 대상 50억원 이상, 타 기관 중복점검 제외)

❍ 품질시험(149건 964종목), 기성․준공검사(4개소) 실시로 건설공사 품질향상

앞으로
			• 공공건축물 실태조사 및 ’24년 보수·보강계획 수립(11~12월) • 동절기, 하반기 중대산업재해 대비 건설현장 안전점검(11월)

【7】재해에 안전하고 자연과 어우러진 하천정비사업 추진

재해에 대비하고 자연환경과 조화를 이루는 지방하천 정비사업 추진

집중호우로 인한 제방 유실·범람 등 피해지역 재해복구사업 추진

□ 2023년 하천정비사업 : 38개지구 / 71,319백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	38	71,319	6	14,741	28	56,125	4	453
지방하천	35	71,319	3	14,741	28	56,125	4	453
재해복구	3	-	3	-	-	-	-	-

※ 재해복구사업 이월예산으로 사업 추진

□ 친환경 지방하천 정비사업 신속 추진

❍ ’23년 사업비 713억원 중 421억원 집행(집행률 59.0%)

- 상반기 신규 2건1), 설계완료 82), 공사계속 10건3)

1) 신규: 간치천(공사), 남성천(설계)

2) 설계 : 와룡천, 용요천, 칠산천, 도마천, 진산천, 유등천, 청지천, 왕대천

3) 공사 : 병천천, 광기천, 주교천, 장재천, 신양천, 석림천, 장승천, 중산천, 화산천, 명천천

- 하반기 준공 3건1), 착공 1건2)

1) 준공 : 중산천, 화산천, 명천천

2) 착공 : 도마천(공사)

□ 지방하천 재해복구사업 추진

❍ 온양천(98%)·금곡천(97%)·약봉천(71%)  재해복구사업 추진

- 금년 내 공사 준공을 목표로 사업 적극 추진

※ (10월 준공) 금곡천, 온양천 / (12월 준공) 약봉천

앞으로
			• 연내 계획 공정률 달성 및 설계 완료지구는 신속 보상 추진 • 주변 경관과 조화된 친환경 하천 및 재해에 안전한 하천정비 추진

【8】지역경제 활성화를 위한 지역개발사업 추진

지역 간 연계기능 및 지역경제 활성화 도모

산업지역 교통 여건 개선으로 도로 이용자 편의 도모

□ 2023년 지역개발사업 : 4지구 / 800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	사업량 (km)	사 업 비				비고
		합 계	기시행	2023년	장 차
계	40.16	71,746	37,152	800	33,794
태안기업도시 연결도로 개설공사	0.61	36,646	36,646	-	-	준공(’23. 5.)
음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사	1.90	30,000	506	-	29,494	설계 중
내포~삽교호 자전거도로 개설공사	36.4	3,000		100	2,900	설계 중
행정저수지 생태탐방로 연장사업	1.25	2,100		700	1,400	설계 중

※ 태안기업도시·음봉일반산단 이월예산으로 사업 추진

□ 태안 기업도시 연결도로 개설공사

❍ 태안기업도시 연결도로 개설공사(0.61km)  준공 완료(’23. 5.)

□ 음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사 설계

❍ 음봉 일반산업단지 진입도로(L=1.9km, B=32m, 4차로→8차로)

- 기본 및 실시설계 추진 중 24년도 완료 예정

□ 내포~삽교호 자전거도로 개설공사 설계

❍ 내포~삽교호 자전거도로(L=36.4km B=3.0~6.0m 자전거도로 정비)

- 실시설계 추진 후(’23.4.~12.) 24년도 공사 추진

□ 행정저수지 생태탐방로 연장사업

❍ 행정저수지 생태탐방로 연장(탐방로 L=1.25km, 편의시설)

- 실시설계 추진 후(’23.8.~12.) 24년도 공사 추진

앞으로
			• 원활한 사업 추진을 위해 관련부서와 신속히 협의 • 연내 계획 공정률 달성 및 설계 완료지구는 신속 보상 추진

【9】도민 중심의 안전하고 편리한 도로 유지관리 추진

노후․파손된 도로시설물 적기에 정비하여 이용자 편의 제공

철저한 자연재해 사전대비·대응으로 도민의 재산과 생명 보호

□ 2023년 도로 유지·보수 사업 : 241지구 / 112,409백만원

(단위: 백만원)

구 분	합 계		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	241	122,409	63	33,469	178	88,940
자체사업	122	22,475	16	944	106	21,531
재배정사업	106	61,483	40	29,717	66	31,766
위임국도	13	38,451	7	2,808	6	35,643

❍ 2023년 사업비 1,224억원 중 636억원 집행(집행률 52%)

- 준   공 : 광금도로 선형개량공사 등 109건

- 추진 중 : 현대도로 선형개량공사 등 132건

□ 재해복구 사업 신속 추진 및 선제적 대응

❍ 여름철 집중호우(2023. 7)에 따른 도로 응급복구 추진

- 국도 40호(보령.성주), 지방도 613호(부여.홍산), 지방도 799호(공주.탄천) 등 수해 전지구 응급복구 완료 및 복구예산 확보(25억원) 완료

- 침수우려지역 재난관리기금 추가확보(내포지하차도 19억원, 통로BOX 6억원)

- 실시설계(2023. 11.) 완료 및 조속한 공사추진으로 우기전 마무리

❍ 여름철 재해대책 추진 및 겨울철(2023. 11.~24.3.) 재해대책 준비 철저

- 급경사지·산사태 우려지역 등 재해 취약시설 상시점검 추진

- 유관기관 협조체계 구축 및 장비·인력·자재 사전확보

․ 제설자재 사전확보 : 소금  3,219톤, 염화캴슘 383톤 등

․ 제설장비 운영 : 모래살포기 70대, 제설기 72대 등

앞으로
			□ 연내 계획된 재해복구 및 도로 유지· 보수사업 완벽히 마무리 □ 상시·비상근무체계 유지 및 재해 발생 시 신속히 대응

【10】도로파손 방지를 위한 운행제한 위반차량 강력단속

도로 파손방지 등 원활한 도로 유지관리를 위한 위반차량 단속 강화    체납 과태료 집중 관리 및 징수활동 강화

❍ 원활한 도로 유지·관리를 위한 단속 강화

- 도내 지방도·국지도·위임국도 63개 노선 수시 이동단속

- 주요 과적 근원지(대형공사장, 토취장 등) 및 위험교량 주변 노선 단속 철저

< 최근 3년간 단속현황>

(단위 : 대)

구 분	검 차 대 수			적 발 대 수
	2021년	2022년	2023년 9월	2021년	2022년	2023년 9월
합 계	10,120	7,224	7,929	417	265	190
동부사무소	6,265	5,349	3,994	143	133	84
서부사무소	3,855	1,875	3,935	274	132	106

❍ 과적행위 근절을 위한 유관기관 합동단속 추진

- 국토관리사무소, 시·군 및 경찰서 등 유관기관 합동단속 실시

※ 2023년 동·서부 합동단속 : 총 24회 (검차 441대 / 적발 19대)

❍ 근무환경 개선을 위한 이동검문소 개량사업 추진

- 단속 시 차량 진·출입차로 확보, 계측대와 차도 분리(가드레일        설치 등)를 통한 단속원의 안전확보 및 업무능률 향상

※ 이동검문소 설치 현황 : 총 12개소 [동부 8 / 서부 4 중 보령 2(공사중)]

※ 2024년 동·서부사무소 각 2개소 이동검문소 신설 추진

❍ 체납 과태료 집중 관리 및 징수활동 강화

- 체납고지서 수시 발송(독촉) 및 전화·문자 등을 통한 징수 활동 강화

- 체납자 재산조회(예금·차량 등)를 통한 압류 적극 추진

※ 압류건수 : 60건(예금 50건, 차량 10건) / 체납액 징수 : 36건, 38,858천원

앞으로
			• 대형공사장 · 위험교량 등 집중단속을 통한 과적 예방활동 강화 • 체납 과태료 징수강화 및 징수불가 체납액 정리

Ⅲ. 도의회 관련 처리상황

□ 2022년도 행정사무감사 처분요구 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
	7	7	-	-	-
시정요구	-	-	-	-	-
처리요구	2	2	-	-	-
제안사항	5	5	-	-	-

< 완료사항 >

① 운행제한 위반차량 단속 철저 및 과태료 미수납액 징수 대책 마련 (처리요구)

❍ 운행제한 위반차량 단속 강화에 대한 적극적인 조치로

- 과적 발생 근원지, 위험 교량 지역 등 취약지역 수시 이동단속 실시

- 국토관리사무소, 경찰서 등 유관기관 간 월 1회 이상 합동단속 실시

- 연중 대형공사장, 골재채취장 등 해당업체 방문 과적예방 홍보

- 노후 장비(차량, 측정기) 교체로 단속 실적 저해요인 제거 및
이동검문소 개량사업 추진으로 위반(과적)차량 단속 강화

❍ 체납액 징수 강화에 대한 적극적인 조치로

- 차량 압류(재산권 제한)에도 재산처분 이전까지 체납자의 고의 과태료 미납 문제점 보완을 위해 전자예금압류시스템을 적극 활용

- 전자예금압류시스템 사용자 교육 2회 실시(’22. 1. 7. / 5. 20.)

< 체납액 징수강화 실적 >

구분	2021년(A)		2022년(B)		증가율(B/A, %)
	건수	수납액 (천원)	건수	수납액 (천원)	건수 기준	금액 기준
합계	36	26,521	56	41,386	159%	168%
동부사무소	14	7,890	25	15,839	179%	201%
서부사무소	22	18,631	31	25,547	141%	137%

② 장기간 내용연수 초과된 도로보수장비 관리 철저(처리요구)

- 2023년 도로보수용 장비 관리 운영계획 수립(’23년 1월)

- 매월 도로보수용 장비 점검 실시(차량·건설기계)

- 수시로 내용연수 초과 대상 물품 관리전환 조회 후 불용처리 진행

- 한정된 예산의 효율적 사용을 위해 사용빈도가 높고, 내용연수가
초과된 순으로 장비 교체 추진 中

□ 향후 사용 가치가 손실된 물품은 즉시 불용 처리 하고, 교체가 필요한 물품의 경우 차기 예산에 반영될 수 있도록 적극 대응하겠음.

③ 폭설 등 매뉴얼 재정비 및 동절기 공사정지 관리 강화(제안사항)

- 자체적 겨울철 도로 제설대책을 수립하여 단계별 비상근무 및 제설작업을 시행하고 있으며, 대규모 피해발생이 우려되는 경우, ｢풍수해 현장조치 행동매뉴얼｣에 따라 재난에 적극 대응 中

□ 폭설 등 기상 악화에 도민의 생명과 재산을 지킬 수 있도록 폭설대책 매뉴얼을 재정비하고, 동절기 기온 강하로 인한 건설공사 품질 저하 및 부실시공 방지를 위해 공사정지 관리 철저히 하겠음.

④ 친환경 제설재 사용 및 상습결빙지역 안전 대책 마련(제안사항)

- 환경오염예방과 도로시설물 등 부식방지를 위해 매년 친환경제설재 사용을 확대 시행 中 (’20년 199톤, ’21년 709톤, ’22년 1,203톤)

□ 향후 예산 범위 내에서 사용량을 늘리도록 노력하겠음.

- 현재 도내 20개 구간의 자동염수분사장치를 설치․운용하고 있으며, 1개소를 추가적으로 설치할 계획

□ 앞으로도 상습 결빙지역에 동시설을 확충해 나갈 수 있도록
예산확보 등 최선의 노력을 다 하겠음.

⑤ 안전한 도로교통환경을 위한 포토홀 저감 대책 마련(제안사항)

- 스마트 도로유지관리시스템 우선순위에 따라 체계적인
포장·유지관리를 시행하고, 아스콘 포장 시에는 철저한 시공·품질 관리를 통해 포트홀이 발생되지 않도록 노력

□ 중차량 통행량이 많아 포트홀 발생이 잦은 구간은 순찰을 강화하고 신속히 보수하여 도로 이용자의 불편이 최소화되도록 노력하겠음.

⑥ 적극적인 민원해결 및 소통하는 조직문화 구축 필요(제안사항)

- 민원 해결을 위해 보상 협의 기간 중 수시적으로 사업지구를

방문하여 현장 협의를 실시하는 등 도민 편의 제공 및 의견 수렴

- 공사 착수 전 주민설명회를 개최하여 관계공무원, 지역의원,

시공사, 지역주민 등 사업 이해자 간 의견 소통 및 협의 추진

- 매주 간부회의 및 주무팀장 회의를 통해 주 □ 월간 업무보고를

진행하여 부서별 진행 사업에 대한 업무 공유 및 문제점을 파악하는

등 소통하는 조직문화 구축

⑦ 수의계약 대상 금액 상향 및 지역업체 활성화 방안 마련(제안사항)

- ʼ22년 충청남도 종합청렴도는 하락(2→3등급)했으나, 공사·용역분야의 하락폭은 미미(공사 0.05점, 용역 0.1점)하고, 민·관 수요를 적극 반영하여 1인 수의계약 대상금액 상향(1,000→2,000만원) 추진 완료(’23.03.22.)

- 청렴도 상향 방안으로 1인 수의계약 건수 총량제 도입(’23.01.01.~)

< ‘19~22년 공공기관 종합 청렴도 평가 결과  >

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	증감
종합	2등급	3등급	2등급	3등급	△1등급
용역	9.54	9.53	9.59	9.49	△0.1
공사	5.74	4.75	9.32	9.27	△0.05

□ 앞으로 지역경제 활성화를 위해 지역제한이 가능한 범위 내
최대한 지역제한 계약을 체결하겠음.

Ⅳ. 참고사항

□ 당면 현안상황

【1】지방도 도로망 확충을 위한 도로사업 추진 여건 조성

행정절차 이행, 관계기관 협의지연 등으로 인해 사업추진이 지난한 신규 도로사업(국지도·지방도) 조속히 추진 필요

❍ 2023년도 도로건설사업 대규모 예산 편성으로 그 동안 지지부진했던 국지도·지방도 도로사업 추진 여건 마련

- 2023년 도로건설사업 신규착공 : 5개지구(국지도1, 지방도 4)

❍ 환경·재해영향평가 등 각종 행정절차 지연으로 일부사업추진 지난, 향후 관계기관협의 등 적극대응 통해 조속추진

- ’23년 연말 공사착공 행정절차 이행, ’24년 상반기 공사발주

❍ 설계지구의 조속한 행정절차 이행, 보상 등을 통하여 사업

추진여건 마련 및 지역 도로망 확충으로 도민 편의증대 노력

【2】2027 하계세계대학경기대회 충남국제테니스장 건립 대응

’27 하계세계대학경기대회 테니스 종목 충남도 배정에  따라 국제대회 규격에 부합하는 테니스장 건립 필요

❍ 타당성조사 및 기본계획 용역(道 체육진흥과, ’23. 7. ~ 12.) 등 사전 행정절차 이행 후 ’24년 중 건설본부로 사업의뢰 예정

❍ 국제대학스포츠연맹(FISU) 승인 및 사전대회 등을 위해 ’26. 12월 (대회개막 ’27. 8.) 시설완공 목표

⇨ 적정 공사비·공사기간 확보토록 기획단계부터 협업 추진

□ 사업별 추진 내역

【1】 분야별 사업추진 내역

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		359	457.45	439,424
도 로	계	44	214.63	158,394	도로건설과
	국 지 도	10	89.83	21,465
	지 방 도	26	115.71	126,868
	국 도	4	4.41	5,117
	기 타	4	4.68	4,944
공공건축		25	-	85,258	공공건축과
시설유지관리		4	-	1,244	시설유지관리과
지방하천정비		38	187.47	71,319	하천개발과
재해복구		3	15.2	-
지역개발		4	40.15	800
도로유지관리		140	-	68,198	동부사무소
		101	-	54,211	서부사무소

【2】도로 확·포장사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 9월 기준)

총 괄		’23년 준공지구		계 속 지 구		’23년 신규지구
◀ 44지구 / 158,394 ▶		◀ 7지구 / 23,379 ▶		◀ 29지구 / 131,479 ▶		◀ 8지구 / 3,536 ▶
국지도 10 / 21,465		국지도 3 / 14,922		국지도 6 / 6,257		국지도 1 / 286
지방도 26 / 126,868		지방도 2 / 8,457		지방도 17 / 115,161		지방도 7 / 3,250
국 도 4 / 5,117		국 도 2 / -		국 도 2 / 5,117		국 도 - / -
기 타 4 / 4,944		기 타 - / -		기 타 4 / 4,944		기 타 - / -

사 업 명			위치	사업량	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
					전 체	기시행	2023년	장 차
총 계				44지구 (214.63㎞)	1,822,058	400,706	158,394	1,263,059
국 지 도				10지구 (89.83km)	611,485	209,906	21,465	380,115
준공	공사	이호~양곡 (국지96호)	홍성 서부	4.85km	27,367	23,465	3,902	-	’18.09. ~’23.10.	99	공사
		청양~신양IC (국지70호)	청양 청양	16.2km	61,133	50,138	10,995	-	’17.05. ~’23.11.	85	공사
	사후	선장~염치 사후환경 (국지70호)	아산 선장	11.34km	132	107	25	-	’20.10. ~’23.07.	100	사후 준공
계속	설계	성환~입장(국지70호)	천안 성환	10.3km	111,800	3,334	714	107,752	’20.~’29.	-	설계
		진산~금산 (국지68호)	금산 진산	10.0km	60,816	7,845	286	52,685	’20.~’28.	-	설계
	보상	임천~강경 (국지68호)	부여 임천	9.88km	49,615	6,166	1,914	41,535	’21.~’29.	-	보상
		장척~목현 (국지96호)	홍성 은하	3.67km	34,578	1,278	1,914	31,386	’21.~’29.	1	보상
	공사	당진~서산 (국지70호)	당진 합덕	19.1km	186,476	116,054	715	69,708	’19.04. ~’28.03.	10	공사
		우성~이인 (국지96호)	공주 우성	0.89km	29,468	1,519	714	27,235	’21.~’28.	1	공사
신규	설계	충북도계~탑원 (국지57호)	천안 병천	3.60km	50,100	-	286	49,814	’23.~’30.	-	설계
지 방 도				26지구 (115.71km)	1,135,080	169,299	126,868	839,013
준공	공사	대술~정안 (지618호)	예산 대술	4.80km	23,401	18,147	5,254	-	’19.07. ~’23.11.	95	공사
		규암~청남 (지625호)	부여 규암	2.51km	30,025	26,822	3,203	-	’18.03. ~’23.09.	95	공사
계속	설계	산동~상덕 (지624호)	아산 음봉	7.74km	128,659	3,438	3,000	122,221	’18.~’30.	-	설계
		서면~비인 (지624호)	서천 비인	5.09km	29,100	1,140	4,750	23,210	’20.~’27.	-	설계
		노화~평촌 (지619호)	예산 음봉	3.38km	34,723	440	1,500	32,783	’20.~’29.	-	설계
		동해~부곡 (지629호)	공주 유구	7.23km	44,021	920	1,000	42,101	’20.~’29.	-	설계
		광시~운곡 (지604호)	청양 운곡	6.74km	46,490	1,071	700	44,719	’20.~’29.	-	설계
		복수~진산 (지635호)	금산 복수	4.28km	107,100	1,746	1,000	104,354	’20.~’30.	-	보상
		왕암도로 (지643호)	논산 가야곡	1.0km	15,440	50	3,000	12,390	’20.~’25.	-	설계
		두마~노성 (지643호)	논산 상월	9.25km	116,590	13,242	12,400	90,948	’18.~’30.	-	보상
		밀두~대음 (지623호)	아산 인주	3.58km	49,170	1,000	16,000	32,170	’18.~’27.	-	보상
계속	보상	기지시~한진 (지619호)	당진 기지시	9.36km	143,171	37,698	30,000	75,473	’17.~’30.	-	보상
	공사	삭선~원북 (지603호)	태안 원북	6.08km	46,514	14,560	14,600	17,354	’17.~’27.	1	공사
		화성~장곡 (지609호)	청양 화성	2.4km	13,306	1,400	3,000	8,906	’18.~’25.	1	공사
		구룡~용두 (지610호)	청양 남양	1.3km	10,795	1,285	3,000	6,510	’18.~’25.	1	공사
		고암~역재 (지609호)	홍성 홍성	1.24km	11,000	300	4,000	6,700	’21.~’25.	1	공사
		어천~공주(4차) (지625호)	공주 우성	3.95km	48,900	24,116	6,211	18,573	’20.12. ~’26.12.	28	공사
		무창포IC~웅천 (지606호)	보령 웅천	1.4km	15,626	9,965	4,000	1,661	’20.06 ~’25.05.	34	공사
		오천우회 (지610호)	보령 오천	3.98km	22,449	11,959	7,000	3,490	’20.10. ~’27.04.	66	공사
신규	설계	무창포IC~웅천2 (지606호)	보령 웅천	1.3km	8,400	-	500	7,900	’23.~’29.	-	설계
		대봉~흥산 (지606호)	청양 남양	4.6km	19,400	-	500	18,900	’23.~’29.	-	설계
		홍동우회 (지609호)	홍성 홍동	1.2km	8,500	-	500	8,000	’23.~’27.	-	설계
		신계~관정 (지6691호)	천안 목천	3.4km	22,100	-	500	21,600	’23.~’28.	-	발주중
		당정~남전 (지617호)	서천 종천	5.5km	16,500	-	500	16,000	’23.~’28.	-	발주중
		장선~복룡 (지643호)	공주 이인	4.0km	21,000	-	500	20,600	’23.~’28.	-	발주중
		인주~염치 (지617호)	아산 인주	10.4km	102,700	-	250	102,450	’23.~’28.	-	타당성 조사
국도				4지구 (4.41km)	50,405	12,883	5,117	32,405
준공	공사	장평지구 (국도39호)	청양 장평	1.4km	5,500	5,040	-	460	’19.12. ~’23.08.	100	준공
		정산지구 (국도39호)	청양 정산	1.0km	8,000	4,705	-	3,295	’20.08. ~’23.08.	100	준공
계속	설계	합곡지구 (국도29호)	부여 장암	1.39km	18,000	488	150	17,362	’21.~’25.	-	설계
	공사	원청사거리 (국도77호)	태안 남	0.89km	18,905	2,650	4,967	11,288	’20.07. ~’24.11.	25	공사
기타				4지구 (4.68km)	25,088	8,618	4,944	11,526
		효제리~위라리 (국도39호)	청양 운곡	0.75km	3,000	1,300	1,000	700	’21.~’24.	-	설계
		보산원도로 (지623호)	천안 광덕	0.7km	3,000	795	750	1,455	’17.~’26.	-	설계
		웅천산단진입도로 (지606호)	보령 웅천	1.0km	9,305	5,860	3,194	251	’20.06. ~’24.07.	46	공사
		반계도로 (지634호)	태안 원북	1.25km	9,783	663	-	9,120	’17.~’26.	-	공사

【3】공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 9월 기준)

총 괄		‘23년도 준공사업		계속사업		‘23년도 신규사업
◀ 25건 / 85,258 ▶		◀ 7건 / 2,790 ▶		◀ 13건 / 81,313 ▶		◀ 5건 / 1,155 ▶

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
합계					551,022	164,9123	85,258	300,851
구분	공정	연번	소계	7건	16,194	13,404	2,790	0
준공	공사	1	당진 합덕119 안전센터 증축공사	지상1층 62㎡ 내·외부 환경개선	865	865	0	0	’21.07.～ ’23.05.	100	준공
		2	아산지역 제설 전진 기지 신축공사	지상1층 400㎡	525	25	500	0	’22.05.～ ’23.09.	75	공사중
		3	대천항 관공선 통합 사무실 건립공사	지상2층 1,370㎡	4,988	2,725	2,263	0	’20.08.～ ’23.09.	100	공사중
		4	수산종자 연구센터 건립공사	지상3층 1,995㎡	7,214	7,214	0	0	’20.09.～ ’23.09.	100	준공
		5	공주 소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 432㎡	939	939	0	0	’21.03.～ ’23.07.	100	준공
		6	공주 소방서 비상대기소 증축공사	증축 191㎡	637	637	0	0	’22.04.～ ’23.10.	90	공사중
		7	청양119구조구급센터 증축공사	증축 지상2층 275㎡	1,026	999	27	0	’22.02.～ ’23.12.	55	공사중

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
구분	공정	연번	소계	13건	511,921	151,508	81,313	279,099
계속	공사	8	충남 스포츠센터 건립공사	지하1층 지상2층 13,344㎡	53,117	31,861	16,756	4,500	’18.08.～ ’24.04.	70	공사중
		9	소방 복합시설 건립공사	지하1층 지상4층 17,042㎡	79,023	62,895	8,065	8,062	’17.10.～ ’24.03.	50	공사중
		10	충남 육아종합 지원센터 건립공사	지하2층 지상3층 3,459㎡	15,126	7,643	2,687	4,796	’20.10.～ ’24.04.	30	공사중
		11	충남 사회적 경제 혁신타운 건립공사	지하1층 지상4층 7,333㎡	28,780	12,440	11,870	4,470	’21.05.～ ’25.01.	10	공사중
		12	당진 소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	9,864	4,432	5,432	-	’21.08.～ ’24.09.	5	공사중
	설계	13	충남국제 전시 컨벤션센터 건립공사	지하1층 지상4층 52,223㎡	160,300	5,869	1,505	152,926	’20.10.～27.12.	0	실시 설계, 공사 발주중
		14	금산 소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	9,871	415	4,827	4,629	’21.01.～ ’24.12.	80	설계중
		15	충남 장애인 가족 힐링센터	지하1층 지상2층 6,550㎡	26,765	5,894	979	19,892	’21.07.～ ’25.03.	60	설계중
		16	충남 미술관 건립공사	지하2층 지상4층 26,680㎡	79,993	9,800	7,784	62,409	’21.04.～ ’26.11.	95	설계중
		17	안면도 지방정원 가든센터 건립공사	지상2층 1,982㎡	13,500	4,509	8,991	0	’21.06.～ ’25.03..	95	설계중

계속	설계	18	충남 광역형 탄소중립 연수원 조성사업	신축 1,844㎡ 리모델링 301㎡	19,800	4,950	8,950	5,900	’22.01.～ ’25.1.	90	설계중
		19	충청권통일플러스센터신축사업	신축 지하1층 지상3층 2,300㎡	10,000	800	3,200	6,000	‘22.12.~ ’25.12.	55	설계중
		20	공주소방서동학사 119안전 센터 건립공사	신축 지상3층 1,100㎡	5,782	-	267	5,515	’22.09.～ ’25.01.	85	설계중

<신규지구>

사 업 명				사업량	사업비				의뢰 예정	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
구분	공정	연번	소계	5건	22,907	0	1,155	21,752
신규	-	21	광역 해양자원 순환센터 건립공사	지상2층 4,800㎡	15,000	0	0	15,000	‘23. 12.	-	-
		22	동물위생 시험소 당진지소 신축사업	지상2층 1,200㎡	5,200	0	428	4,772	’23.03.～ ’25.06.	30	설계중
		23	축산기술 전문교육관 건립공사	지상2층 650㎡	1,980	0	0	1,980	‘23. 10.	-	-
		24	충남연구원 태양광 발전시설 설치사업	태양광발전설비 136kW	249	0	249	0	‘23. 05.	100	설계완료
		25	건설본부경관녹화조성사업	경관개선 1,710㎡	478	0	478	0	‘23. 06.	100%

【4】시설유지관리사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

총 괄		준공사업		계속사업		‘23년도 신규사업
◀ 4건 / 1,244 ▶		◀ 0건 / 0 ▶		◀ 0건 / 0 ▶		◀ 4건 / 1,244 ▶

사 업 명				사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
					전체	기시행	2023년	장차
합계				4건	1,244	-	1,244	-
신규사업	소계			2건	1,072	-	1,072	-
	자체	1	건설본부 청사 개·보수 공사	본관동 및 시험동 (환경개선)	873	-	873	-	’23. 6. ~‘23. 3.	76	설계
		2	충남 보건환경연구원 옥상 방수공사	본관동 옥상 (A=2,074㎡)	199	-	199	-	’23. 6. ~‘23. 10.	62	공사
	소계			1건	172	-	172	-
	재배정	1	충남 적정기술공유센터 BF본인증	BF본인증 획득	102	-	102	-	’23. 6. ~‘23. 1.	34	용역
		2	충남 노인회관 기능보강 공사	주차장 336㎡, 옥외 59㎡ 등	70		70		’23. 9. ~‘23. 12.	22	설계

【5】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

총 괄		’23년 준공사업		계 속 사 업		‘23년 신규사업
◀ 38건 / 71,319 ▶		◀ 6건 / 14,741 ▶		◀ 28건 / 56,125 ▶		◀ 4건 / 453 ▶
지방하천 35 / 71,319		지방하천 3 / 14,741		지방하천 28 / 56,125		지방하천 4 / 453
재해복구 3 / -		재해복구 3 /		재해복구 / -		재해복구 / -

<총  괄>

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비				비고
			계	기시행	2023년	장차
합 계	38지구	187.47	839,751	195,302	71,319	573,130
지방하천 정비사업	35지구	172.27	766,382	121,933	71,319	573,130	준공 3, 계속 28, 신규 4
지방하천 재해복구	3지구	15.2	73,369	73,369	-	-	준공 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
계	35지구			167.73	776,996	121,733	71,319	583,944
준공사업	소계 (3지구)			151.66	664,663	116,789	14,741	485,353
	중산천	공주	금흥	1.4	20,239	12,898	7,601	-260	’20. 10. ~’23. 12.	78	준공
	화산천	서천	기산 화양	4.3	38,748	32,585	6,163	-	’18. 3. ~’23. 12.	94	준공
	명천천	서산	성연	1.1	3,047	2,070	977	-	’21. 3. ~’23. 12.	46	공사
계속사업	소계 (28지구)			144.86	602,629	69,236	56,125	485,613
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	1.5	23,170	4,944	8,345	9,881	’21. 8. ~’24. 7.	43	공사
	장승천	청양	청양	4.7	14,301	8,976	4,180	1,145	’20. 12. ~’24. 8.	42	공사
	주교천	부여	세도	6.7	23,972	5,540	8,650	9,782	’20. 12. ~’24. 11.	33	공사
	신양천	논산	연무	8.6	27,084	4,080	8,000	15,004	’21. 8. ~’24. 11.	22	공사
	병천천	천안	병천	7.3	35,940	16,474	9,500	9,966	’20. 7. ~’25. 1.	42	공사
	광기천	천안	병천	6.8	29,007	10,960	9,900	8,147	’20. 7. ~’25. 1.	47	공사
	간치천	보령	주산 웅천	8.3	33,649	2,404	2,216	29,029	’23. 8. ~’26. 7.	-	공사
	석림천	서산	석림	0.5	710	471	-	239	’20. 12. ~’23. 12.	-	정지
	용요천	태안	근흥	6.5	45,278	1,349	1,892	42,037	’19.~’25.	-	설계 (보상)
	도마천	서천	문산 시초	9.4	23,851	1,200	1	22,650	’19.~’25.	-	설계 (보상)
	칠산천	부여	임천	11.0	25,373	1,602	750	23,021	’20.~’25.	-	설계 (보상)
	진산천	금산	진산	4.9	7,420	945	750	5,725	’20.~’27.	-	설계 (보상)
	유등천	금산	복수	6.1	14,323	1,296	-	13,027	‘18. ~’26.	-	설계
	와룡천	홍성	갈산 결성	4.46	35,070	1,050	-	34,020	’19.~’28.	-	설계
	왕대천	계룡	두마	3.4	6,497	568	-	5,929	’19.~’26.	-	설계
	청지천	서산	장홍 석림	5.9	29,431	1,118	1,941	26,372	’20.~’27.	-	설계
	판교천	서천	종천 서천	4.4	14,376	754	-	13,622	’20.~’25.	-	설계
	왕암천	논산	가야곡	8.9	23,370	1,124	-	22,246	’20.~’25.	-	설계
	오봉천	당진	송악 신평	6.0	23,699	1,091	-	22,608	’20.~’25.	-	설계
	둔포천	아산	둔포	4.5	40,222	843	-	39,379	’21.~’26.	-	설계
	초대천	당신	신평	6.3	37,394	1,410	-	35,984	’21.~’26.	-	설계
	양촌천	논산	양촌	3.4	15,832	803	-	15,029	’21.~’26.	-	설계
	판정천	천안	입장	3.4	8,598	603	-	7,995	’21.~’26.	-	설계
	솔리천	서천	장항	1.3	4,997	901	-	4,096	’22.~’27.	-	설계
	도곡천	계룡	엄사	2.5	15,086	835	-	14,251	’22. ~’27.	-	설계
	성연천	서산	성연	2.2	14,039	1,036	-	13,003	’22.~’27.	-	설계
	구룡천	천안	신방	1.9	18,665	781	-	17,884	’22.~’27.	-	설계
	삽교천	홍성	홍동	5.5	34,445	1,022	-	33,423	’22.~’27.	-	설계
신규사업	소계 (4지구)			14.57	89,163	-	453	88,710
	남성천	부여	임천	2.1	12,696	-	450	12,246	’23.~’28.	-	설계
	유구천	공주	유구	3.1	28,517	-	1	28,516	’23.~’28.	-
	갈두천	태안	원북	6.87	27,845	-	1	27,844	’23.~’28.	-
	읍내천	청양	정산	2.5	20,105	-	1	20,104	’23.~’28.	-

<지방하천 재해복구사업>

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
계	3지구			15.2	73,369	73,369	-	-
준공사업	금곡천	아산	배방	2.7	11,895	11,895	-	-	’21.08. ~’23.10.	97	준공
	약봉천	아산	송악	5.7	24,711	24,711	-	-	’21.07. ~’23.12.	71	준공
	온양천	아산	송악	6.8	36,763	36,763	-	-	’21.07. ~’23.10.	98	준공

【6】지역개발사업 현황

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

총 괄		’23년도 준공사업		계 속 사 업		’23년도 신규사업
◀ 4건 / 800 ▶		◀ 1건 / - ▶		◀ 1건 / - ▶		◀ 2 / 800 ▶

연번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2023년	장차
합 계		4지구		40.15	71,746	37,152	800	33,794
준공사업	태안 기업 도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	L=0.6	36,646	36,646	-	-	’20.02. ~’23.05.	100	준공
계속사업	음봉 일반산업단지 진입도로 개설공사	아산	음봉	L=1.9 (4→8차로)	30,000	506	-	29,494	’22.12.~ ’24.12.	-	설계
신규사업	내포~ 삽교호 자전거도로 정비사업	예산	당진,아산	L= 36.4km	3,000	-	100	2,900	’23.04. ~’23.12.	-	설계
	행정 저수지 생태 탐방로 연장사업	금산	행정	L= 1.25km	2,100	-	700	1,400	’23.07.~ ’23.11.	-	설계

【7】도로 유지관리사업 현황

<동부․서부사무소>

<단위: 백만원, 2023. 9. 30. 기준>

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		동부		서부		합계		동부		서부
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	241	122,409	63	33,469	49	26,720	14	6,749	178	88,940	91	41,478	87	47,462
자체사업	122	22,475	16	944	15	704	1	240	106	21,531	58	10,690	48	10,841
재배정사업	106	61,483	40	29,717	30	23,901	10	5,816	66	31,766	29	13,232	37	18,534
위임국도	13	38,451	7	2,808	4	2,115	3	693	6	35,643	4	17,556	2	18,087

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

<동부사무소 / 계속지구>

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(계속지구)			49개 지구			26,720
계속지구계속지구	소계	자 체 사 업	15개 지구			704
	자체사업	지방도635호 백암리 급경사지 정비사업	금산	복수	A=11,500㎡	53	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 공주지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	공주 전노선		1식	6	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 논산지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	논산 전노선		1식	29	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 천안지구 지방도 유지관리사업 실시설계 용역	천안 전노선		1식	7	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 금산지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	금산 전노선		1식	5	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 서천지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	서천 전노선		1식	5	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 청양지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	청양 전노선		1식	6	22.12.~23.05.	100	완료
		2023년 부여지구 지방도 유지관리사업 실시설계용역	부여 전노선		1식	6	22.12.~23.05.	100	완료
		[서천]국지도68호 원수도로 유턴차로 및 배수로 설치공사	서천	장항	1식	219	22.11.~23.12.	80	공사중
		2022년 비점오염저감시설 유지관리용역	전노선		1식	16	22.11.~23.07.	100	완료
		[금산]흑암교 보수공사	금산	남이	L=0.08km	35	22.12.~23.03.	100	완료
		지방도629호선 풍세터널 조명시설 교체공사 실시설계용역	천안	풍세	1식	9	22.11.~23.01.	100	완료
		황산대교 등 8개교 보수보강공사 실시설계용역	전노선		1식	14	22.12.~23.06.	100	완료
		덕목터널 외 11개소 청소용역	전노선		1식	26	22.12.~23.03.	100	완료
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		L=1,085km	268	22.12.~23.03.	100	완료
	소계	재배정사업	30개 지구			23,901
	재배정사업재배정사업	지방도617호 남전도로 인도설치공사	서천	마서	L=1.80km	1,206	22.04.~24.12.	20	공사중
		천안 오목도로 외 1개소 인도설치공사	천안	성거	L=0.40km	131	22.07.~23.03.	100	완료
		금산 복수도로 인도설치공사	금산	복수	L=0.30km	95	22.05.~23.05.	100	완료
		충청남도 도 경계표지판 정비공사	전노선		1식	37	22.12.~23.01.	100	완료
		[금산]지방도601호, 국지도68호선 마을주민 보호구역 정비사업	금산	제원	1식	218	22.11.~23.05.	100	완료
		[금산]지방도601호 평촌도로 마을주민 보호구역 정비사업	금산	부리	1식	182	22.12.~23.12.	60	용역중
		지방도635호 건천1지구 등 2개소 급경사지 정비사업 실시설계 용역	금산	남이	1식	31	22.12.~23.04.	100	완료
		지방도606호 용마도로 갓길정비공사	청양	용마	L=0.95km	201	22.09.~23.12.	90	공사중
		지방도645호 청양 탄정도로 회전교차로	청양	대치	1식	409	22.05.~23.11.	90	공사중
		국지도96호 청양 중묵도로 교차로개선	청양	비봉	1식	264	22.09.~23.12.	70	용역중
		지방도697호 KTX공주역 진입도로 선형개량	공주	이인	1식	2,858	19.01.~23.09.	100	완료
		지방도799호 덕지도로 선형개량	공주	탄천	L=0.40km	336	22.08.~23.06.	100	완료
		지방도645호 청양 광금도로 선형개량	청양	대치	L=0.58km	795	22.12.~23.05.	100	완료
		지방도697호 모촌도로 위험도로 개량공사	논산	양촌	L=0.70km	570	21.10.~24.12.	15	용역중
		지방도799호 부여 현내도로 선형개량	부여	석성	L=0.70km	1,798	21.11.~23.12.	80	공사중
		지방도606호 청양 봉우티고개 오르막차로	청양	남양	L=1.77km	2,474	21.04∼24.12.	60	공사중
		지방도606호 대봉도로 외 5개소 재해복구공사	청양		1식	85	22.12∼23.05.	100	완료
		지방도610호 대봉도로 수로준설 재해복구공사	청양	남양	1식	41	22.12∼23.04.	100	완료
		지방도723호선 부여지구 재해복구사업	부여	은산	L=0.30km	248	21.03∼23.06.	100	완료
		[금산]지방도601호 개선복구사업	금산	제원	1식	853	22.11∼23.11.	90	공사중
		지방도799호 우곤도로 위험도로 선형개량공사	논산	성동	L=1.85km	882	17.09∼23.12.	90	공사중
		석막도로 선형개량공사	금산	진산	L=1.05km	1,862	20.12∼24.10.	60	공사중
		천을도로 선형개량공사	금산	군북	L=1.16km	932	20.12∼24.10.	60	공사중
		노성도로 선형개량공사	논산	노성	L=0.71km	3,170	21.07∼24.07.	60	공사중
		지방도697호 주내사거리 회전교차로 설치공사	논산	상월	1식	508	21.01∼24.07.	20	공사중
		광암교 재가설공사	청양	운곡	1개소	1,380	22.07.~23.12.	90	공사중
		상일교 재가설공사	서천	판교	L=0.03km	1,321	22.12.~24.12.	40	공사중
		일양교 등 2개교 보수보강공사	금산, 서천		1식	339	22.11.~23.06.	100	완료
		정안교 내진성능보강공사	공주	정안	1식	428	22.11.~23.03.	100	완료
		도로안전시설확충 등	전노선		1식	247	22.11.~23.12.	80	추진중
	소계	위 임 국 도	4개 지구			2,115
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	1,628	22.12.~23.12.	80	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	401	22.12.~23.09.	100	완료
		도로병목지점개선	국도13호		1개소	56	22.12.~23.12.	80	공사중
		위험도로개선	국도29호		1개소	30	22.12.~23.09.	100	완료

<동부사무소 / 신규지구>

(단위 : 백만원, ’23년 9. 30. 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
계(신규지구)			91개 지구			41,478
신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	58개 지구			10,690
	자체사업	천안지역 포장도 보수공사	천안		L=2.35km	660	23.04.~23.06.	100	완료
		국지도23호 망향도로 배수로 정비공사	천안	성거	1식	23	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도693호 동남구 차선도색 공사	천안	성환	L=8.4km	71	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도623, 691호 동남구 차선도색 공사	천안	광덕	L=16.3km	108	23.01.~23.06.	100	완료
		[천안]지방도623호 매당교차로 개선공사	천안	광덕	1식	50	23.02.~23.12.	80	용역중
		천안지역 도로 유지보수 단가계약	천안		1식	40	23.03.~23.10.	100	완료
		지방도691,697호 계룡지구 배수로정비공사	공주	계룡	L=0.10km	68	23.03.~23.06.	100	완료
		지방도604,629호 사곡지구 배수로정비공사	공주	사곡	L=0.15km	107	23.03.~23.06.	100	완료
		지방도604호 덕학지구 배수로정비공사	공주	의당	L=0.10km	53	23.03.~23.06.	100	완료
		지방도629호 동해지구 배수로정비공사	공주	유구	L=0.10km	24	23.03.~23.06.	100	완료
		2023년 공주지구 차선도색공사	공주		L=17.97km	153	23.06.~23.06.	100	완료
		논산지역 포장도 보수공사	논산		L=5.92km	700	23.05.~23.08.	100	완료
		지방도643호 도로정비공사	논산	가야곡	1식	24	23.04.~23.05.	100	완료
		지방도799호 병촌지구 외 1개소 정비공사	논산	병촌	1식	45	23.03.~23.05.	100	완료
		지방도697호 대우지구 외 1개소 정비공사	논산	상월	L=0.15km	45	23.03.~23.05.	100	완료
		지방도697호 반곡지구 외 3개소 정비공사	논산	연산	1식	35	23.03.~23.05.	100	완료
		국지도68호 신화4교 하부 콘크리트 포장공사	논산	연무	L=0.06km	17	23.04.~23.05.	100	완료
		논산지역 도로 유지보수 단가계약	논산		1식	40	23.03.~23.11.	80	공사중
		금산지역 포장도 보수공사	금산		1식	400	23.05.~23.08.	100	완료
		수영도로 배수로 정비공사	금산	복수	L=0.49km	65	23.04.~23.06.	100	완료
		구억도로 배수로 정비공사	금산	제원	L=0.47km	73	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도635호 석막도로 사면정비공사	금산	진산	1식	61	23.01.~23.06.	100	완료
		2023년 금산지구 무인단속카메라 설치	금산	복수	1식	42	23.04.~23.05.	100	완료
		금산지역 도로 유지보수 단가계약	금산		1식	40	23.03.~23.11.	90	공사중
		부여지역 포장도 보수공사	부여		1식	500	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도723호 팔충지구 배수로정비공사	부여	충화	L=0.37km	69	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도799호선 석성지구 배수로정비공사	부여	석성	1식	95	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도606호 전장지구 배수로정비공사	부여	외산	L=0.20km	30	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도625호선 정동지구 배수로정비공사	부여	부여	L=0.10km	20	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도799호선 초촌지구 외 1개소 차선도색공사	부여	초촌	L=2.40km	27	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도723호선 경둔지구 재해복구사업	부여	부여	1식	34	23.05.~23.06.	100	완료
		부여지역 도로 유지보수 단가계약	부여		1식	40	23.03.~23.10.	100	완료
		지방도611호 군사도로 및 지방도617호 화천도로 차선도색공사	서천	서천	1식	33	23.04.~23.05.	100	완료
		국지도68호 창선도로 인도정비공사	서천	장항	L=0.15km	31	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도611호 은곡도로 배수로 정비공사	서천	문산	1식	140	23.05.~23.10.	100	완료
		국지도68호 장암도로 배수로 정비공사	서천	장항	L=0.12km	69	23.05.~23.10.	100	완료
		서천지역 도로 유지보수 단가계약	서천		1식	40	23.03.~23.10.	100	완료
		국지도96호 용천도로 사면정비공사	청양	비봉	1식	159	23.04.~23.06.	100	완료
		지방도723호 관현도로 사면정비공사	청양	장평	1식	19	23.04.~23.05.	100	완료
		지방도645호 중추도로 배수로 정비 및 도로포장공사	청양	장평	1식	26	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도645호 작천도로 배수로정비공사	청양	대치	L=0.10km	34	.23.04.~23.05.	100	완료
		국지도70호 백천도로 배수로정비공사	청양	청양	L=0.14km	29	.23.04.~23.05.	100	완료
		지방도625호 신흥도로 배수로정비공사	청양	목	1식	20	.23.04.~23.05.	100	완료
		청양지역 도로 유지보수 단가계약	청양		1식	40	23.03.~23.11.	90	공사중
		2023년 천안지구 포장도 보수공사(국지도 70호)	천안	성환	L=2.43km	350	23.05.~23.07.	100	완료
		[청양]지방도645호 먹거리종합타운 진입로 개선공사	청양	대치	1식	500	23.05.~23.12.	50	공사중
		하반기 터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	350	23.05.~23.12.	80	공사중
		국유림 토지 보상	공주	정안	1식	150	23.05.~23.12.	70	협의중
									완료
								100
							23.05.~23.10.
						650
					1식
			논산
		하반기 논산 지방도 포장도 보수공사
		응급복구	전노선		1식	501	23.01.~23.12.	80	공사중
		지방도 풀깎기	전노선		L=560km	1,100	23.01.~23.10.	100	완료
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	23.01.~23.12.	80	추진중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	23.01.~23.10.	100	완료
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	600	23.01.~23.12.	80	공사중
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		L=1,085km	800	23.10.~24.03.	60	추진중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		L=1,085km	700	23.10.~24.03.	60	추진중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	200	23.01.~23.12.	90	공사중
		‘23년 비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	60	23.08.~23.12.	70	용역중
	소계	재배정사업	29개 지구			13,232
	재배정사업재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	23.01.~23.12.	70	용역중
		운행방향 유도레인 설치	전노선		5개소	30	23.01.~23.12.	70	공사중
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		9개소	1,300	23.01.~23.12.	80	공사중
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		3개소	200	23.01.~23.12.	80	공사중
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	23.01.~23.05.	100	완료
		도로 표지판(LED) 개선사업	전노선		1식	150	23.01.~23.05.	100	완료
		2023년 서천지구 포장도 보수공사(1공구)	서천		1식	400	23.01.~23.06.	100	완료
		2023년 청양지구 포장도 보수공사	청양		L=2.38km	400	23.01.~23.06.	100	완료
		2023년 공주지구 포장도 보수공사	공주		L=6.88km	950	23.06.~23.09.	100	완료
		마을주민보호구역 정비	부여	구룡	1식	200	23.01.~23.09.	100	완료
		국지도68호 천내도로 인도설치공사	금산	제원	L=0.40km	600	23.01.~23.12.	80	공사중
		지방도799호 증산도로 인도설치공사	부여	석성	L=0.40km	500	23.01.~23.12.	90	공사중
		지방도613호 지현도로 인도설치공사	서천	한산	L=0.30km	75	23.01.~23.10.	90	완료
		지방도607호 신합도로 인도설치공사	서천	서	L=0.25km	750	23.01.~23.12.	70	공사중
		지방도610호 대봉도로 인도설치공사	청양	남양	L=1.10km	600	23.06.~23.12.	80	공사중
		지방도699호 탑동교차로 교차로 개선	부여	석성	1식	370	23.01.~24.12.	80	공사
		지방도723호 황골교차로 외1지구 교차로 개선	부여	양화	1식	100	23.05.~24.12.	10	용역중
		지방도625호 석동교차로 개선	부여	장암	1식	50	23.05.~24.12.	10	용역중
		지방도799호 응평교차로 개선	부여	초촌	1식	50	23.05.~24.12.	10	용역중
		지방도691호 덕평도로 위험도로 개량공사	논산	부적	L=0.27km	100	23.05.~24.12.	15	용역중
		지방도625호 북고도로 선형개량공사 실시설계용역	부여	장암	L=1.23km	100	23.05.~23.12.	80	용역중
		지방도604호 유구도로 선형개량공사 실시설계용역	공주	유구	L=1.20km	600	23.05.~23.12.	80	용역중
		국지도96호 안양도로 위험도로 개량공사 실시설계용역	공주	우성	L=1.00km	600	23.05.~23.12.	80	용역중
		지방도723호 팔충도로 선형개량공사	부여	충화	L=0.20km	800	23.05.∼23.12.	80	용역중
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	1,491	23.01.~23.12.	70	용역중
		황산대교 등 8개교 보수보강공사	전노선		1식	1,525	23.06.~23.12.	70	공사중
		원수삼거리 개선사업	서천	장항	1식	71	23.01.~23.09.	100	완료
		지방도723호 팔충교차로 개선사업	부여	충화	식	500	23.01.~23.12.	90	공사중
		지방도635호 건천1지구 등 2개소 급경사지 정비사업	금산	남이	L=0.80km	600	23.01.~23.12.	80	공사중
	소계	위 임 국 도	4개 지구			17,556
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	11,709	23.01.~23.12.	80	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	5,264	23.01.~23.12.	80	공사중
		도로병목지점개선	국도13호		1개소	360	23.01.~23.12.	80	공사중
		위험도로개선	국도29호		1개소	223	23.01.~23.12.	60	용역중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

<서부사무소 / 계속․신규지구 >

(단위 : 백만원, ’23년 10월 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			101개 지구			54,211
계(계속지구)			14개 지구			6,749
	소계	자체 사업	1개 지구			240
계속지구	자체사업	재해대책	전노선		1식	240	22.12.~23.03.	100	완료
	소계	재배정 사업	10개 지구			5,816
	재배정사업	지방도619호 백석도로 선형개량 공사 용역	당진	순성	1식	80	22.05.~23.11.	90	용역
		23년 도로유지보수공사 실시설계용역	전노선		1식	68	22.12.~23.03.	100	완료
		22년 지방도 인도설치공사(서산양길)	서산	팔봉	L=1.1km	181	22.04.~23.09.	100	공사
		22년 지방도 인도설치공사(당진고대)	당진	고대	L=0.4km	151	22.04.~23.12.	70	공사
		지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	2,109	20.12.~23.10.	98	공사
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.84km	1,843	21.05~23.12.	65	공사
		지방도617호 도화담교 재가설공사	보령	미산	1식	311	22.10.~23.03.	100	완료
		교량 보수보강	전노선		1식	263	21.12.~23.03.	100	완료
		보령 월전도로 교차로 개선공사	보령	남포	1식	16	21.12.~23.03.	100	완료
		자동염수분사장치	전노선		1식	794	21.12.~23.03.	100	완료
	소계	위임 국도	3개 지구			693
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	187	22.01.~23.05.	100	완료
		도로유지보수	전노선		1식	339	22.01.~23.05.	100	완료
		위험도로개선	전노선		1식	167	22.01.~23.06.	100	완료
계(신규지구)			87개 지구			47,462
신규지구신규지구신규지구신규지구	소계	자 체 사 업	48개 지구			10,841
	자체사업	지방도610호 진죽도로 포장도 보수공사	보령	청소	1식	250	23.03.~23.05.	100	완료
		지방도610호 오포도로 포장도 보수공사	보령	오천	1식	330	23.03.~23.05.	100	완료
		지방도606호 수부도로 배수시설 정비공사	보령	웅천	L=0.15km	70	23.03.~23.06.	100	완료
		지방도606호 구룡도로 배수시설 정비공사	보령	웅천	L=0.02km	10	23.03.~23.05.	100	완료
		보령지역 도로 유지보수 단가계약	보령		1식	40	23.01.~23.11.	80	공사
		지방도628호 동암도로 포장도 보수공사	아산	음봉	1식	470	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도628호 냉정도로 외 2개소 배수시설 정비공사	아산	인주	L=0.40km	40	23.01.~23.06.	100	완료
		국지도70호 신동도로 배수시설 정비공사	아산	선장	L=0.30km	70	23.01.~23.06.	35	공사
		지방도624호 도흥도로 진출입로 배수시설 정비공사	아산	인주	L=0.15km	70	23.01.~23.07.	35	공사
		아산지역 도로 유지보수 단가계약	아산		1식	50	23.01.~23.12.	50	공사
		지방도634호 금학도로 포장도 보수공사	서산	팔봉	1식	300	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도634호 양길도로 외 2개소 배수시설 정비공사	서산	팔봉	L=0.20km	60	23.01.~23.06.	100	완료
		국지도96호 창리도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=0.10km	300	23.01.~23.06.	100	완료
		서산지역 도로 유지보수 단가계약	서산		1식	40	23.01.~23.12.	80	공사
		지방도649호 천의도로 포장도 보수공사	당진	정미	1식	150	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도622호 전대도로 포장도 보수공사	당진	송악	1식	340	23.05.~23.10.	100	완료
		지방도615호 광천도로 외 1개소 배수시설 정비공사	당진	순성	L=0.02km	30	23.01.~23.06.	30	공사
		지방도615호 성북도로 배수시설 정비공사	당진	순성	L=0.25km	40	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도615호 진관도로 배수시설 정비공사	당진	고대	L=0.23km	50	23.05.~23.06.	100	완료
		지방도649호 도산도로 배수시설 정비공사	당진	정미	L=0.20km	40	23.05.~23.06.	100	완료
		당진지역 도로 유지보수 단가계약	당진		1식	50	23.01.~23.12.	50	공사
		지방도609호 신경도로 포장도보수공사	홍성	홍북	L=1.50km	220	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도609호 화신도로 포장도보수공사	홍성	홍동	L=1.10km	160	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도619호 천태도로 포장도보수공사	홍성	장곡	L=1.30km	180	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도609호 운월도로 배수시설 정비공사	홍성	홍동	L=0.40km	80	23.01.~23.06.	100	완료
		국지도96호 상송도로 배수시설 정비공사	홍성	장곡	L=0.20km	20	23.01.~23.06.	100	완료
		홍성지역 도로 유지보수 단가계약	홍성		1식	40	23.01.~23.12.	100	완료
		지방도619호 마교도로 외 3개소 배수시설 정비공사	예산	봉산	1식	200	23.03.~23.06.	100	완료
		지방도618호 발연도로 외 3개소 배수 및 616호 포장	예산	예산	1식	290	23.03.~23.06.	100	완료
		국지도70호 대덕도로 외 1개소 배수시설 정비공사	예산	신양	1식	170	23.03.~23.06.	100	완료
		예산지역 도로 유지보수 단가계약	예산		1식	40	23.01.~23.12.	80	공사
		국지도96호 당암도로 포장도 보수공사	태안	남	1식	400	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도634호 어은도로 포장도 보수공사	태안	태안	1식	200	23.01.~23.06.	100	완료
		국지도96호 도황도로 배수시설 정비공사	태안	근흥	1식	20	23.01.~23.06.	100	완료
		지방도603호 내리도로 배수시설 정비공사	태안	이원	1식	40	23.01.~23.06.	100	완료
		태안지역 도로 유지보수 단가계약	태안		1식	40	23.01.~23.12.	80	공사
		지방도 풀깎기	전노선		1식	700	23.01.~23.12.	100	완료
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	23.01.~23.12.	80	추진중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	23.01.~23.12.	90	추진중
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	600	23.01.~23.12.	90	공사
		응급복구	전노선		1식	100	23.01.~23.12.	50	공사
		(서산)국지도70호 문양~탑곡도로 포장도 보수공사	서산		1식	2,000	23.06.~23.12.	80	공사
		아산지역 전진기지(제설창고) 구축사업	아산		1식	491	23.01.~23.12.	50	공사
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	900	23.01.~23.12.	40	추진중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	600	23.01.~23.12.	40	추진중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	100	23.01.~23.12.	100	완료
		비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	120	23.01.~23.12.	80	추진중
	소계	재배정사업	37개 지구			18,534
	재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	23.01.~23.12.	50	용역
		운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	23.01.~23.06.	100	준공
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,200	23.01.~23.12.	80	공사
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		1식	200	23.01.~23.12.	100	완료
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식		23.04.~23.05.	100	완료
						100
		도로 표지판(LED) 개선사업	전노선		1식	150	23.04.~23.05.	100	완료
		지방도 포장도 보수공사	전노선		1식	1,750	23.01.~23.12.	60	공사
		지방도645호 화천리,농은리 마을주민보호구간 정비공사	아산	도고	1식	77	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도619호 홍원리 마을주민보호구역 정비공사	홍성	홍동	1식	74	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도610호 정전리 마을주민보호구간 정비공사	보령	청소	1식	149	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도610호 관창도로 인도설치공사	보령	주교	L=0.36km	500	23.06.~23.09.	5	공사
		지방도623호 수철도로 인도설치공사	아산	배방	L=0.60km	175	23.01.~23.12.	100	완료
		지방도634호 양길도로 인도설치공사	서산	팔봉	1식	50	23.01.~23.12.	100	완료
		지방도619호 반촌도로 인도설치공사	당진	송악	L=0.58km	600	23.06.~23.11.	80	공사
		지방도616호 봉서도로 인도설치공사	홍성	금마	L=0.13km	300	23.01.~23.12.	100	완료
		지방도616호 녹문도로 인도설치공사	예산	신양	L=0.20km	500	23.01.~23.12.	30	공사
		지방도616호 화천도로 인도설치공사	예산	대술	L=0.20km	400	23.01.~23.12.	80	공사
		지방도603호 관리도로 인도설치공사	태안	이원	L=0.40km	300	23.01.~23.12.	30	공사
		지방도619호 백석도로 위험도로 개량공사	당진	순성	1식	500	23.07.~24.08.	30	용역
		지방도647호 조금도로 위험도로 개량공사	당진	대호지	1식	400	23.06.~23.12.	20	공사
		지방도634호 고남도로 위험도로 개량공사	서산	성연	1식	200	23.01.~23.12.	20	용역
		지방도 유지보수	전노선		1식	900	23.01.~23.12.	50	공사
		지방도634호 어은교차로 개선공사	태안	원북	1식	400	23.01.~23.12.	20	공사
		지방도615호 순성사거리 교차로 개선공사	당진	순성	1식	200	23.01.~23.12.	50	용역
		국지도96호 산성삼거리 교차로 개선공사	홍성	장곡	1식	200	23.01.~23.12.	60	용역
		지방도647호 오학도로 교차로 개선공사	서산	해미	1식	100	23.01.~23.12.	70	용역
		지방도618호 대천사거리 교차로 개선공사	예산	고덕	1식	200	23.01.~23.12.	50	용역
		지방도603호 내리도로 선형개량공사	태안	이원	1식	400	23.01.~25.12.	30	용역
		지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	1식	750	23.01.~23.12.	98	공사
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	원북	1식	400	23.01.~23.12.	60	공사
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	1,039	23.01.~23.12.	40	추진중
		지방도 교량보수보강	아산,예산		1식	370	23.01.~23.12.	30	공사
		지방도617호 도화담교 재가설공사(2차분)	보령	미산	1개소	2,000	21.12.~24.01.	70	공사
		지방도634호 안산삼거리 교차로 개선공사	태안	원북	1식	400	23.01.~23.12.	20	공사
		당진 정미 승산사거리 교차로 개선공사	당진	정미	1개소	1,100	23.01.~23.12.	20	용역
		자동염수분사장치	전노선		1식	500	23.01.~23.12.	70	공사
		내포지하차도 침수예방사업	홍성 예산	홍북 삽교	1식	1,900	23.09.~23.12.	20	용역
	소계	위 임 국 도	2개 지구			18,087
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	8,185	23.01.~23.12.	80	공사
		도로유지보수	전노선		1식	9,902	23.01.~23.12.	80	공사

※ 지방도 재배정 및 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

【8】2023년 보상추진 실적

2023년 보상추진 실적(도로)

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

연번	합계	사 업 명	‘23년 보상추진 현황							비고
			‘23보상계획(A)		’23년 보상실적(B)		’23년 4분기 보상계획(C)		계획대비 보상 추진율(%)
			건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
	합계	18건	2,371	38,003	1,240	12,160	1,131	4,343	32%
1	도로	청양 ∼ 신양	88	349	3	14	85	335	4%
2		삭선 ~ 원북	780	8,577	702	8,062	78	515	94%
3		고암 ~ 역재	351	3,327	269	2,684	82	643	81%
4		화성 ∼ 장곡	388	1,416	111	522	277	894	37%
5		구룡 ∼ 용두	606	1,307	109	565	497	742	43%
6		우성~이인	4	41	-	-	4	41	-
7		대술 ∼ 정안	44	213	6	29	38	184	14%
8		어천 ∼ 공주	13	846	-	-	13	846	-
9		규암 ∼ 청남	8	33	-	-	8	33	-
10		오천우회도로	4	54	2	23	2	31	43%
11		무창포IC∼웅천	80	290	35	224	45	66	77%
12		웅천산단	3	43	1	30	2	13	70%
13		정산지구	2	7	2	7	-	-	100%
14		밀두 ~ 대음	-	16,000	-	-	-	-	-	신규
15		산동~산덕	-	3,000	-	-	-	-	-
16		서면 ~ 비인	-	2,000	-	-	-	-	-
17		왕암도로	-	500	-	-	-	-	-
18		성환~입장	-	-	-	-	-	-	-

2023년 보상추진 실적(하천)

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

연번	합계	사 업 명	‘23년 보상추진 현황							비고
			‘23보상계획(A)		’23년 보상실적(B)		’23년 4분기 보상계획(C)		계획대비 보상 추진율(%)
			건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
	합계	16건	2,338	17,231	1,466	9,486	872	2,835	58%
1	하천	광기천	535	2,298	530	2,267	5	31	99%
2		병천천	332	4,159	330	4,130	2	29	99%
3		명천천	1	16	-	-	1	16	-
4		주교천	496	2,055	105	1,210	391	845	59%
5		장승천	185	279	185	279	-	-	100%
6		중산천	22	405	22	405	-	-	100%
7		금곡천	15	92	1	3	14	89	3%
8		약봉천	43	413	29	275	14	138	67%
9		온양천	27	1,027	15	275	12	752	27%
10		간치천	354	695	147	271	207	424	39%
11		신양천	328	882	102	371	226	511	42%
12		도마천	-	180	-	-	-	-	-	신규
13		용요천	-	1,273	-	-	-	-	-
14		칠산천	-	1,303	-	-	-	-	-
15		와룡천	-	2,154	-	-	-	-	-
16		진산천	-	-	-	-	-	-	-

2023년 보상추진 실적(위탁)

(단위 : 백만원, ’23년 9월 30일 기준)

연번	합계	사 업 명	‘23년 보상추진 현황							비고
			‘23보상계획(A)		’23년 보상실적(B)		’23년 4분기 보상계획(C)		계획대비 보상 추진율(%)
			건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
	합계	7건	1,498	53,168	743	65,872	755	2,752	124%
1	위탁	당진 ~ 서산	1,498	9,098	743	6,436	755	2,752	71%
2		기지시~한진	-	30,000	-	45,836	-	-	-
3		장척~목현	-	1,686	-	2,400	-	-	-
4		금산 ~ 진산	-	-	-	-	-	-	-	신규
5		효제리~위라리	-	484	-	500	-	-	-
6		임천 ~ 강경	-	1,200	-	-	-	-	-
7		두마 ~ 노성	-	10,700	-	10,700	-	-	-

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
건설본부	본부장	지방기술서기관	김병용	2023.07.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	이학규	2023.01.16.
	도로건설과장	지방시설사무관	박중호	2023.01.16.
	공공건축과장	지방시설사무관	나윤주	2023.01.16.
	시설유지관리과장	지방시설사무관	안동수	2023.01.16.
	하천개발과장	지방시설사무관	정성진	2022.01.12.
건설본부 동부사무소	사무소장	지방시설사무관	최양진	2023.07.21.
건설본부 서부사무소	사무소장	지방시설사무관	이재흥	2023.01.16.