		제325회 도의회 정례회 2020. 11. 5. ~ 12. 16.

- 2020년 행정사무감사  -

주요업무 추진상황 보고

	종합건설사업소

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 □ 기구 및 기능 □ 예산현황 Ⅱ. 주요업무 추진상황 □ 총 평 □ 분야별 추진실적 및 계획 Ⅲ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2019년도 행정사무감사결과 처리상황 Ⅳ. 참고사항 □ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황 □ 간부명단

Ⅰ. 기본 현황

□ 기구 및 기능

① 기 구 : 4과 2지소 22팀

								소 장
행정관리과				도로건설과				공공건축과						하천개발과					공주지소				홍성지소
서무팀				시설1팀				건축팀						지역개발팀					서무팀				서무팀
계약팀				시설2팀				건축TF						하천1팀					보수1팀				보수1팀
보상1팀								시험팀						하천2팀					보수2팀				보수2팀
보상2팀																			구조물 관리팀				구조물 관리팀
																			단속팀				단속팀

<정․현원 현황>

부서․지소별		계	일 반 직(정원/현원)
			4급	5급	6급	7급	8급	9급	운영직
합 계		109/103	1/1	6/6	22/23	37/33	31/17	4/15	8/8
본소		56/55	1/1	4/4	12/13	22/23	14/8	3/6	-
	행정관리과	18/18	1/1	1/1	4/4	8/9	4/1	0/2	-
	도로건설과	12/11	-	1/1	2/2	4/4	3/3	2/1	-
	공공건축과	16/16	-	1/1	3/4	7/7	4/3	1/1	-
	하천개발과	10/10	-	1/1	3/3	3/3	3/1	0/2	-
공주지소		27/25	-	1/1	5/5	8/6	9/5	0/4	4/4
홍성지소		26/23	-	1/1	5/5	7/4	8/4	1/5	4/4

※ 공무직(72명) : 도로보수원 53(공주24 홍성29), 행정실무 2, 시험·검사 실무 1, 과적단속요원 16(공주8,홍성8)

② 주요기능

	- 행정관리과
	❍조직, 예산, 청사관리 및 직원후생복지 ❍각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매, 보상업무
	- 도로건설과
	❍지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍국가지원지방도 및 지방도 확‧포장사업 시행
	- 공공건축과
	❍공공 건축물의 신축 및 보수사업 ❍건설공사 자재 및 현장 품질검사 시험
	- 하천개발과
	❍지방하천 집행계획 수립 및 정비사업시행 ❍지역개발 기반시설사업 시행
	- 공주∙홍성지소
	❍지방도∙위임국도 유지관리 및 보수사업 시행 ❍재해대책(풍∙수해) 수립 시행, 과적차량 단속

□ 예산현황

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 12,337백만원 - 세외수입 344, 지방교부세 1,193, 보전수입등 및 내부거래 등 10,800 ∙ [세 출 예 산] 29,387백만원 - 사업예산 17,379, 행정운영경비 12,008

❍ 재배정 예산 사업 : 286,910백만원

(단위 : 백만원)

도로 확･포장	공공건축	하천정비	지역개발	도로유지 관리
124,027	42,268	60,852	10,092	49,671

Ⅱ. 주요업무 추진상황

□ 총   평

	총 평
❖ 충남 건설경기 활성화 및 도민 중심 건설 행정 구현 - 도내 건설업체 계약 및 자재구매를 통한 지역경제 자생력 강화 ❖ 과적차량 단속 및 계도를 통한 도민이 편안한 도로 환경 조성

주요성과

사업분야

주요업무 추진성과

□ 도로건설 사업 분야

체계적인 사업관리를 통한 효율적 예산집행

안전한 도로건설 환경 구축

고품질 도로건설 실현을 위한 기술자문위원회 실시

□ 공공건축 사업 분야

도민이 편리하고 쾌적한 공공건축사업 9개소 준공

품질·안전관리단을 통한 건설현장 안전사고 예방

맞춤형 품질시험에 따른 최고의 행정서비스 제공

□ 하천 지역개발 사업 분야

지방하천 정비사업 추진으로 주민생활안전 기반 조성

신속한 예산 집행으로 도로망 구축에 전력

자연재해 예방과 자연친화형 하천 조성

□ 도로유지 보수 사업 분야

신속한 지방도 유지보수사업 시행 / 225지구

	앞으로
❖ 지역경제 특성을 반영·연계한 미래지향적 건설행정 추진 -「지역경제 우선」지역건설업체 참여율 및 관내자재 사용비율 제고 - 선제적인 도로관리를 통한「신뢰 받는 충청남도 이미지 구축」

□ 분야별 추진실적 및 계획

【1】지역업체와 상생하는 건설공사 계약 추진

지역업체 참여 및 지역 생산자재 공급 확대 지원

임금 직접지급 제도 정착으로 임금체불 사전 예방

❍ 공사발주 시 도내건설업체 우선하는 계약업무 수행

- 금년도 발주 302건/662억원 중, 지역업체 299건/572억원 참여 (99%)

- 하도급 15건/152억원 중, 지역업체 8건/70억원

※ 특허보유 또는 기존 협력사가 있는 경우 도내업체 하도급 계약 어려움

❍ 관급자재 구매 시 도내업체 우선하여 구매

- 총 1,125건/532억원 중 지역업체 952건/481억원 (90.4%)

※ 타지역업체 계약 사유 : 도내생산업체가 없는 경우, 특허․신기술․실용신안 등

❍ 불공정 하도급 개선 추진 및 건전한 하도급 정착 유도

- 하도급관리계획 감독 및 하도급대금 직불 장려

- 주계약자 공동도급 시행 : 3개 지구 (웅천 일반산업단지, 무창포IC~웅천, 병천천 정비사업)

- 공사계약 하도급 실태 점검(‘20. 4. 6. ~ 4. 17.)

※ 하도급 계약 통보 이행, 하도급 대금 직불합의서 또는 지급보증 이행 준수 등

❍ 임금체불 방지를 위한 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’ 추진

- 원수급인 노무비 전용계좌 입금 □ 직불합의 시 하수급인 전용계좌 입금

앞으로
			• 임금 직접지급 제도 활용 체불 없는 대금 지급 • 공사발주 및 관급자재 구매 시 도내업체 참여율 제고

【2】합리적이고 투명한 손실보상 업무 추진

공익사업에 편입되는 사유재산 등에 대한 합리적이고 신속한 보상 추진으로 민원발생 최소화 및 도민편익 증대

[보상실적 :  24지구 / 127,368백만원]

(※ 2018~2020년 현재 기준/ 단위 : 백만원)

지구수	보상 대상(A)		기보상 실적(B)		비율 (%)	미보상현황		비고
	건수	금액	건수	금액		건수	금액
24개	15,033	136,710	13,240	127,368	93	1,793	9,342

※ 향후 신규 보상추진 지구 : 6개 지구(구룡~용두, 화성~장곡, 밀두~대음, 두마~노성, 중산천, 주교천)

❍ 신규 사업지구에 대한 드론영상 등 기초자료를 사전에 확보

- 2019년 하반기 드론 구입, 사업지구 직접 촬영 실시

-‘20년 3개 신규 사업지구 촬영완료(장평지구, 무창포IC~웅천‧웅천산단, 원청사거리)

❍ 손실보상 대상 토지 및 물건의 정확한 현장조사로 민원발생 사전 방지

- 물건 조사 시, 민원인 입회하에 현장 조사 실시(상‧하반기 3회)

⇒ 보상 전반에 대한 기초자료로 보상의 공정성 확보 노력

❍ 도민 편의적 보상협의 추진으로 협의율 제고 노력

- 협의기간 중 현장방문 계약 실시 및 보상상담 진행(상‧하반기 20회)

-	신규 사업에 대한 주민 보상설명회 개최(1회, 코로나-19로 서면 대체)

⇨ 9월말 기준 93% 보상완료, 연말까지 100% 추진 목표

앞으로
			• 신속‧정확한 보상절차 이행으로 토지수용 기간 단축 - 협의보상 및 수용재결, 공탁 처리 등 일련의 행정절차를 체계적으로 수행하여 각종 공익사업의 조속한 추진 도모 ※ 협의불능 토지 등은 재결에 의한 수용 및 공탁으로 목표 보상추진율 달성 노력

【3】지역발전을 선도하는 편리하고 안전한 도로망 구축

원활한 교통인프라 구축으로 지역 간 균형발전 촉진 도모

쾌적하고 안전한 도로환경 구축 및 이용자 중심 도로건설

[도로 확포장 사업 :  33 지구 / 124,027백만원]

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	33	124,027	6	19,836	24	102,405	3	1,786
국지도	5	39,003	1	-	3	38,217	1	786
지방도	21	63,497	3	7,729	16	54,768	2	1,000
기 타	7	21,527	2	12,107	5	9,420	-	-

❍ 도내 지역 간 접근성 향상을 위한 간선도로망 확충

- 총 33지구 : 준공 4, 공사 12, 설계 9, 보상 8

❍ 대규모 도로건설 사업 준공으로 교통불균형 해소 및 균형발전 도모

- (선장~염치) 총사업비 1,570억원, 사업량 L=11.34km B=20.0m

- (충화~구룡) 총사업비 312억원, 사업량 L=5.80km B=10.0m

- (순성~송악) 총사업비 265억원, 사업량 L=5.80km B=10.0m

- (복수~대전, 2차) 총사업비 667억원, 사업량 L=1.04km B=19.5m

❍ 지역특성을 반영한 이용자 중심의 도로 건설

- 지역주민의 안전‧편의를 고려한 주민협의 및 설명회 수시 개최(4회)

⇨ 도로 유휴부지를 활용한 휴게쉼터 조성 등 이용자 중심의 도로 건설

앞으로
			• 철저한 공정관리로 연내 계획사업 마무리 및 예산이월 최소화 • 문화재, 환경영향 등 행정절차 조기이행으로 원활한 공사추진

【4】품질 높은 선도적인 대형 공공건축 프로젝트 추진

충남 특색에 맞는 道 건축문화 자산 조성을 위한 프로젝트 추진

※ 충남컨벤션센터, 충남육아종합지원센터 등 대형건축사업 하반기 순차적 사업 진행

[2020년 건축사업 추진현황 : 24건 / 381,080백만원]

(단위 : 백만원)

총 계		준공사업		공사진행사업		예정사업		비고 (세부내용)
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
24	381,080	9	25,785	11	170,978	4	184,317	붙임

□ 주요 추진실적

□ 축산물융복합검사기반시설 준공으로 안전상 취약하고 업무상 열악한 검사시설의 최신식 구축을 통해 편안한 근무여건 마련

□ 계룡소방서 준공으로 노후화된 청사 환경개선을 통해 도민에게 보다 좋은 소방행정서비스와 긴급재난 대응 기반 구축

□ 흑염소 사육사 준공을 통한 흑염소 개량 및 생산보급 기틀 마련

□ 주요 추진계획

□ 설계공모 공정성 확보를 위한「디지털 활용 공개 심사」추진

- 건축 설계공모 심사위원들의 질의응답 및 토론 등 공개 심사

- 全과정에 대해 유튜브, 페이스북 등을 통한 SNS 동영상 생중계

※ 대천항 관공선 통합사무실, 수산종자연구센터, 충남컨벤션, 육아지원센터 등

□ 공공건축 디자인품질 강화를 위한 설계공모범위 확대 추진

- (기존) 설계비 2억원 → (변경) 설계비 1억원

- 설계의 질을 높임으로써 우수 공공건축 자산 조성

앞으로
			• 공공건축물 완료후 공정별 자체평가 실시 및 개선방안 마련 • 설계품질 제고 및 철저한 공사감독을 통한 공공건축 품질 향상

【5】건설공사 품질‧안전관리 강화

건설공사의 품질향상 및 안전성 강화를 위한 지속적 지도점검

❍ 건설공사 품질 향상을 위한 품질·검사시험 실시

- 성토용 흙, 골재, 아스콘 등 263건 1,190종목(수수료 89백만원)

❍ 각종 시설물 사전 안전점검 실시를 통한 사고 예방

- 건설공사 품질‧안전관리단 구성‧운영(1월)

- 2월 해빙기 점검/ 54개소 점검 실시 ⇨ 13개소 시정조치 완료

- 3월 품질점검/ 23개소 점검 실시 ⇨ 16개소 시정조치 완료

- 4월 안전점검/ 23개소 점검 실시 ⇨ 23개소 시정조치 완료

- 5월 우기대비 현장점검/ 22개소 점검 실시 ⇨ 6개소 시정조치 완료

- 6월 공사착수사업장 및 안전사고사례 전파 등 점검/

22개소 점검 실시 ⇨ 5개소 시정조치 완료

- 7월 우기 및 폭염대비 현장점검/ 22개소 점검 실시 ⇨ 13개소 시정조치 완료

- 8월 품질점검 실시/ 17개소 점검 실시 ⇨ 19개소 시정조치 완료

- 9월 안전점검 실시 / 17개소 점검 실시 ⇨ 4개소 시정조치 완료

❍ 건설현장 근로자 안전의식 고취

- 건설공사장 안전점검 및 근로자 안전관리 교육 실시

(공사현장 작업발판 및 안전난간 설치 확인, 개인보호구 착용 필히 준수)

❍ 건설공사 현장 비산먼지 저감 관리 철저

- 토공작업 시 세륜세차시설 상시 운영 및 작업근로자 마스크 착용 의무화

- 미세먼지 주의보 및 경보 발령 시 비산먼지 다량발생 공정 지양

앞으로
			• 하반기 건설현장 무사고‧무재해 달성 및 안전사고 예방 총력 • 동절기 대비 건설현장 안전관리 강화 및 취약구간 중점 점검

【6】친환경적인 하천정비 추진

지방하천 정비사업 추진으로 주민 생활안전 기반 조성

[하천 사업 : 28지구 / 60,852백만원]                     (단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
28	60,852	5	20,347	19	37,286	4	3,219

❍ 친환경 지방하천 정비사업 추진

- 설계 17개 지구 중 신규 4개 지구 용역착수(′20. 5.), 신규 2개 지구 공사착공(′20. 6.), 11개 지구 설계 중

- 공사 11개 지구 중 하반기 4개 지구 준공, 7개 지구 공사 정상 추진

앞으로
			• 견실 시공 및 품질․안전관리 철저 • 수생태계 보전 및 주변 경관과 조화되는 친환경 하천조성

【7】내포지역 활성화 기반 구축

내포 신도시 접근성 향상으로 지역경제 활성화

[지역개발 사업 : 2지구 / 10,092백만원]                (단위 : 백만원)

연번	지구명	총사업비	기시행	2020년	장차	공사기간	진도 (%)	비고
		89,812	43,711	10,092	36,009
1	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	53,166	36,332	4,992	11,842	‘18. 03 ∼ ’22. 4.	68	공사중
2	태안기업도시 연결도로 개설공사	36,646	7,379	5,100	24,167	‘20. 02 ∼ ’23. 2.	13	공사중

❍ 내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사

- 공사 착공(18.3월), 토지보상 100%, 공정률 68% ➠ 21년 하반기 준공목표

❍ 태안기업도시 연결도로 개설공사

- 공사 착공(20. 2), 공정률 13% ➠ 23년 준공 목표

앞으로
			• 내포 도시첨단산업단지 진입도로 공정율 제고로 내포지역 활성화 기여 • 서산웰빙특구 및 태안기업도시 연결도로 개설로 서해안 거점지역 육성

【8】원활한 도로유지를 위한 체계적 도로 관리

적기 도로유지보수사업 시행으로 원활한 도로환경 유지

재해(설해, 수해 등) 취약구간 중점 관리로 원활한 교통흐름 유지

[도로 유지보수 사업 :  225 지구 / 87,734백만원]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	225	87,734	62	21,204	163	66,530
자체사업	99	19,235	23	4,980	76	14,255
재배정사업	109	49,671	30	14,703	79	34,968
균특사업	-	-	-	-	-	-
위임국도	17	18,828	9	1,521	8	17,307

❍ 지방도 유지․보수사업

- 신규사업 : 부곡도로 포장도 보수공사 등 163지구/66,530백만원

- 계속사업 : 삼가교 재가설공사 등 62지구/21,204백만원

※ 주요공사 : 포장보수, 도로표지판정비, 안전시설, 위험도로개량

❍ 자연재해대책 수립으로 선제적 대응

- 급경사지, 낙석도로 등 취약구간 중점 점검 및 예찰활동 강화(6~9월)

- 설해취약구간 중점관리 및 제설장비 정비와 제설자재 확보(10~11월)

- 재해발생 대비 재해복구를 위한 유관기관 협조체계 구축

※ 겨울철 자연재난 대책기간(’20. 11. 15.~’21. 3. 15.)

앞으로
			• 금년도 시행 중인 도로 유지보수 사업 연내 마무리 추진 • 겨울철 재해대책반 운영 및 기상 상황 수시 대처로 재해대비 철저

【9】운행제한 위반차량 강력 단속

운행제한 위반차량 강력단속 및 과적예방 활동 강화로 도로파손방지 등 효율적인 도로유지 관리

❍ 도로파손 방지 등 유지관리를 위한 과적차량 단속 강화

- 과적 근원지(대형공사장 등) 및 위험교량 노선 수시 이동단속 실시

- 과적단속 효율성 제고를 위한 이동·고정단속 병행실시

※ 고정검문소 : 국지도 68호선(부여군 세도면 청포리) 설치·운영

⇨ 상반기 총 8,574대 검차하여 298대 적발, 과태료 163백만원 부과

❍ 유관기관 간 합동단속 실시

- 관할 지자체, 경찰서, 국토관리사무소 등 유관기관 간 합동단속

⇨ 9월말 18회 실시(24개 기관)하여 465대 검차, 23대 적발

❍ 화물차량 운전자 과적예방 교육 실시

- 과적예방을 위한 화물차량 운전자 교통안전교육 실시

(충청남도교통연수원 교육과정 편성)

2020년	합계(명)	일반화물	개별화물	용달화물	비 고
계획 인원	11,712	6,239	2,434	3,039	편성일 : ‘20.2.24
이수 실적 (‘20.6.1 ~ 9월말)	4,070	1,882	785	1,403	이수율 : 34.8% (부진사유 : 코로나19)

※「화물자동차운수사업법」제59조,「충청남도 교통연수원 설치 및 운영조례」제5조

앞으로
			• 대형공사장, 위험교량, 골재채취장 주변 노선 집중단속 • 유관기관 간 합동단속 및 화물차 운전자 과적예방 교육 실시

Ⅲ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2019년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
계	6	4	2	-
시정요구	-	-	-	-
처리요구	1	-	1	-
제안사항	5	4	1	-

< 완료사항 >

① 과적차량 단속을 위한 강력한 대책 필요(제안요구)

- 대형공사장, 골재채취장, 위험교량 주변 노선 집중단속(연중)

- 관할 시·군, 경찰서, 국토관리사무소 등 유관기관 간 합동단속(월 1회)

- 과적 근원지, 공사장 등 과적 유발업체 방문을 통한 과적예방 홍보(연중)

- 화물차량 운전자 과적예방 교육 실시(충청남도교통연수원 교육과정 편성)

- 과태료 체납자 차량, 예금, 토지 등 재산압류를 통한 재산권 제약으로 체납액 징수·과적인식 개선·과적심리 근절 도모(수시)

② 통계자료 활용으로 적절한 예산 편성 및 배정(제안요구)

- 연초(20년 1월) 도로 유지보수 사업 실시설계 용역 발주 완료하여

- 3월 중 도로 실시설계 용역 완료 및 공사 착공하여 상반기(6월)도로 유지 관리사업 추진 완료

- (앞으로)지역별 행사 및 민원요구사항 등을 고려, 통계자료를 활용하여 우선순위에 따른 보수시행으로 쾌적한 도로환경을 조성하겠음

③ 예산확보를 위한 적극적인 노력 필요

- 사업별 변경 요인 발생 시 담당부서, 중앙부처 등 적극 협의 추진

- 예산 확보 시 보상협의, 민원발생 요인을 고려하여 적절한 사업기간 산정 하여 추가예산 투입 최소화 노력

- 공정별 계획에 따른 예산 확보로 공사기한 내 사업 완료토록 조치

- 보상 및 준공 지구에 대하여 예산 우선 확보 및 투입 조치

④ 부진사업 최소화 노력 필요

- 신속집행 추진관련 점검회의 시 부진사업 최소화 대책 강구(총24회)

⑴국토교통부 주관 : 6회 ⑵충청남도 주관 : 18회

- 도로분야 공사관계자 회의 개최(총4회)

- (앞으로)보상비 조기배정 및 예정공정에 따른 사업비 확보로 이월액 최소화 하고 사업계획 수립 시 연차별 집행계획 수립으로 이월 및 불용액 최소화 노력

< 추진중인 사항 >

① 현장경험과 행정경험이 많은 인력 확보 필요 (처리요구)

- 조직 및 인사과련 부서에 경력자 요구 및 사업소 자체 조직진단 시행

- 능률적인 건설행정 추진을 위한 인원 충원요청(18명)

※ 시설6급(3), 시설7급(9), 공업7급(1), 방통7급(1), 공무직(4)등

- 도로건설과 및 공공건축과 팀 신설 및 인원 증원 요청

- 격무부서 지정으로 직원 인센티브 제공 및 사기진작 기회 마련

② 도내 업체 및 도내에서 생산되는 자재 활용 방안 마련

- 설계 시 지역생산 자재 및 규격을 적용 우선 검토

- 본사, 지사, 공장이 도내에 등록된 업체 생산품 우선 구매

- 20년도 지역생산 자재 구입실적 금액 대비 90.4% 달성

➠ 연말까지 도내생산 제품 우선 구매 적극 추진하여 도내 자재 구매율 90%이상 달성하도록 하겠음.

Ⅳ. 참고사항

□ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황

【1】 분야별 사업추진 총괄 내역

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		312	301.9	324,973
도 로	계	33	164.29	124,027	도로건설과
	국 지 도	5	61.79	39,003
	지 방 도	21	92.16	63,497
	기타도로	7	10.34	21,527
공공건축		24	-	42,268	공공건축과
지방하천정비		28	133.1	60,852	하천개발과
지역개발		2	4.51	10,092
도로유지관리		115	-	50,964	공주지소
		110	-	36,770	홍성지소

【2】도로 확포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2020.9.30. 현재)

총 괄		‘20년 준공지구		계 속 지 구		‘20년 신규지구
◀ 33건 / 124,027백만원 ▶		◀ 6건 / 19,836백만원 ▶		◀ 24건 / 102,405백만원 ▶		◀ 3건 / 1,786백만원 ▶
․국지도 5 / 39,003		․국지도 1 / -		․국지도 3 / 38,217		․국지도 1 / 786
․지방도 21 / 63,497		․지방도 3 / 7,729		․지방도 16 / 54,768		․지방도 2 / 1,000
․기 타 7 / 21,527		․기 타 2 / 12,107		․기 타 5 / 9,420		․기 타 - / -

사 업 명			사업량	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
				전 체	기시행	2020년	장 차
총 계			33지구 (164.29㎞)	1,676,635	589,423	124,027	968,751
국 지 도			5지구 (61.79km)	523,498	272,858	39,003	211,637
준공지구	소 계		1지구 (11.34km)	157,033	157,033	-	-
	1	선장∼염치	연장=11.34km 폭=20.0m	157,033	157,033	-	-	2010.03.03. ～ 2020.07.31.	100	준공
계속지구	소 계		3지구 (40.15km)	252,365	115,325	38,217	98,823
	2	청양～ 신양IC	연장=16.2km 폭=10.0m	52,714	37,094	5,269	10,351	2017.05.29. ∼ 2023.06.25.	46	공사중
	3	이호～양곡	연장=4.85km 폭=10.0m	24,151	18,311	1,874	3,966	2018.09.17. ～ 2023.08.21.	18 (공사중)	공사중
	4	당진～서산	연장=19.1km 폭=17.5m	175,500	59,920	31,074	84,506	2019.04.08. ～ 2027.04.05	1	공사중
신규지구	소 계		1지구 (10.3km)	114,100	500	786	112,814
	5	성환∼입장	연장=10.3km 폭=17.5m	114,100	500	786	112,814	2018～2028	-	대전청 설계중
지 방 도			21지구 (92.16km)	979,340	201,105	63,497	720,304
준공 지구	소 계		3지구 (15.8km)	97,454	89,725	7,729	0
	6	충화～구룡	연장=5.80km 폭=10.0m	31,209	31,209	-	-	2013.12.31. ～ 2020.05.01.	100	준공
	7	순성～송악	연장=5.80km 폭=10.0m	26,561	25,378	1,183	-	2013.11.06. ～ 2020.08.28.	100	준공
	8	국방대 진입도로	연장=4.2km 폭=20.0m	39,684	33,138	6,546	-	2015.12.15. ～ 2020.10.30.	88	공사중
계속지구	소 계		16지구 (67.0km)	733,586	111,150	54,768	573,234
	9	서산～부석	연장=8.40km 폭=21.5m	99,095	76,529	22,566	-	2010.11.16. ～ 2021.05.12.	88	공사중
	10	규암～청남	연장=2.29km 폭= 10.0m	27,320	9,852	6,600	10,868	2018.03.19. ～ 2022.09.17.	35	공사중
	11	대술～정안	연장=4.8km 폭= 9.5～11.7m	21,752	7,013	4,000	10,739	2019.07.22. ～ 2023.07.20	13	공사중
	12	어천～공주 (4차)	연장=3.95km 폭= 10.0m	22,449	3,740	9,462	14,813	2016.～2022.	-	보상중
계속지구	13	오천우회	연장=3.98km 폭= 9.5m	22,449	2,710	3,685	16,054	2016.～2023.	-	보상중
	14	삭선～원북	연장=5.8km 폭= 20.0m	46,514	2,050	2,510	41,954	2017.～2030.	-	보상중
	15	기지시～한진	연장=9.3km 폭= 18.0m	143,004	3,700	245	139,059	2017.～2027.	-	설계중
	16	무창포IC～ 웅천	연장=1.46km 폭=21.75~23.0m	8,200	405	1,410	6,385	2018.～2024.	-	보상중
	17	두마～노성	연장=9.25km 폭=10.0m	116,590	2,000	460	114,130	2018.～2027.	-	설계중
	18	화성～장곡	연장=2.4km 폭=10.0m	13,306	330	505	12,471	2018.～2025.	-	보상중
	19	구룡～용두	연장=1.3km 폭=10.0m	10,795	333	505	9,957	2018.～2025.	-	보상중
	20	밀두～대음	연장=3.58km 폭=18.75m	49,170	805	310	48,055	2018.～2025.	-	설계중
	21	산동～상덕	연장=7.74km 폭=19.5m	128,659	620	2,510	125,529	2018.～2027.	-	설계중
	22	왕암도로	연장=1.0km 폭=10.0m	11,500	300	-	11,200	2019.～2022.	-	설계중
	23	반계도로	연장=1.25km 폭=10.0~19.2m	9,783	663	-	9,120	2017.～2023.	-	보상중
	24	보산원도로	연장=0.5km 폭=9.5m	3,000	100	-	2,900	2017.～2023.	-	설계중
신규지구	소 계		2지구 (9.36km)	148,300	230	1,000	147,070
	25	서면～비인	연장=4.9km 폭=19.5m	41,200	110	500	40,590	2019 ～2027	-	설계중
	26	복수～진산	연장=4.46km 폭=19.5m	107,100	120	500	106,480	2019 ～2029	-	설계중
기타도로사업			7지구 (10.34km)	173,797	115,460	21,527	36,810
준공지구	소 계		2지구 (2.64km)	93,798	81,002	12,107	689
	27	복수～대전 (2차)	연장=1.04km 폭=19.5m	66,751	61,394	5,357	-	2010.12.30. ～ 2020.12.31.	100	준공
	28	신온～창기	연장=1.6km 폭=10～18.5m	27,047	19,608	6,750	689	2016.09.20. ～ 2020.11.30.	92	공사중
계속지구	소 계		5지구 (7.7km)	79,999	34,458	9,420	36,121
	29	안면도 관광지 연결도로	연장=2.9km 폭=27.0m	45,000	33,900	5,000	6,100	2018.03.05. ～ 2021.03.23.	51	공사중
	30	원청사거리	연장=0.89km 폭=3.5～20m	14,075	0	500	13,575	2017. ～ 2023.	1	공사중
	31	웅천산단 진입도로	연장=1.01km 폭=19.7m	7,111	225	1,600	5,286	2020.06.04. ～ 2023.06.03.	-	보상중
	32	정산지구	연장=1.5km 폭=13.0~15.0m	8,190	190	1,320	6,680	2018. ～ 2021.	1	공사중
	33	장평지구	연장=1.4km 폭=16.5~17.4m	5,623	143	1,000	4,480	2019.12.20. ～ 2021.12.31.	5	공사중

【3】공공 건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2020. 9. 30. 현재)

총 괄		준공사업		공사진행사업		예정사업
◀ 24개소 381,080백만원 ▶		◀ 9개소 25,785백만원 ▶		◀ 11개소 170,978백만원▶		◀ 4개소 184,317백만원

사 업 명			사업량	위치	사업비(재배정예산)				사업기간	투자 공정 (진도)	비고
					전체	기시행	2020년	장차
합 계			24개소		381,080	54,302	42,268	284,510
준공사업	연번	소 계	9개소		25,785	25,785	0	0
	1	계룡소방서 청사 신축	지하1층 지상3층 3,608㎡	계룡시 엄사면	9,974	9,974	0	0	2017.07 ~ 2020.08	100%	공사 완료
	2	양념채소연구소 생활관 증축공사	지상3층 350㎡	태안군 남면	940	940	0	0	2019.02 ~ 2020.07	100%	공사 완료
	3	수산자원연구소 귀어학교 기숙사 증축공사	지상2층 558㎡	보령시 신흑동	1,326	1,326	0	0	2018.10. ~ 2020.05	100%	공사 완료
	4	과채연구소 회의실 및 창고 증축공사	지상1층 333㎡	부여군 규암면	690	690	0	0	2019.02 ~ 2020.06	100%	공사 완료
	5	재래흑염소 사육사 신축공사	지상1층 999㎡	청양군 정산면	1,000	1,000	0	0	2018.07 ~ 2020.04	100%	공사 완료
	6	교통연수원 내부개선공사	지상2층 4,664㎡	공주시 금흥동	605	605	0	0	2019.09 ~ 2020.07	100%	공사 완료
	7	축산물융복합 검사기반 증축공사	지하1층 지상3층 3,563㎡	홍성군 금마면	10,000	10,000	0	0	2017.08 ~ 2020.05	100%	공사 완료
	8	성거119 안전센터 증축공사	지상2층 290㎡	천안시 서북구	870	870	0	0	2018.03 ~ 2020.05	100%	공사 완료
	9	공무원교육원 차고지 증축공사	지상1층 249㎡	공주시 금흥동	380	380	0	0	2019.01 ~ 2020.06	100%	공사 완료
공사진행사업	소 계		11개소		170,978	28,517	40,881	101,580
	10	소방복합시설 조성사업	9개동 17,444㎡	청양군 비봉면	79,023	13,000	17,510	48,513	2017.09 ~ 2023.12	-	설계중
	11	충남 지식산업센터 신축공사	지하1층 지상6층 12,486㎡	천안시 불당동	29,346	1,300	6,121	21,925	2018.11 ~ 2021.12	-	착 공 준비중
	12	충남 공감마루 신축공사	지하1층 지상3층 2,920㎡	내포 업무구역 4블럭	10,252	3,629	5,823	800	2018.02 ~ 2020.12	80%	공사중
	13	보령 오천119안전센터 신축공사	지상2층 757㎡	보령시 오천면	1,918	1,918	0	0	2018.10 ~ 2020.12	81%	공사중
	14	홍성지소 청사 증축 및 리모델링	증축100㎡ 리모델링 2,087㎡	홍성군 홍성읍	927	0	927	0	2020.04 ~ 2021.12	5%	공사중
	15	지방도 터널 LED조명 교체공사	터널LED 조명등 630개철거 472개설치	금산군 복수면 샛고개 굴길	350	0	200	150	2020.04 ~ 2020.12	5%	공사중
	16	충남 스포츠센터 조성사업	지하1층 지상2층 13,344㎡	예산군 삽교읍	33,000	4,760	3,000	25,240	2018.08 ~ 2022.10	-	설계중
	17	내포 자연놀이뜰 조성공사	지하1층 지상3층 3,370㎡	내포 신도시 RB5 구역	12,460	3,800	6,000	2,660	2018.11 ~ 2021.07	20%	공사중
	18	직산119 안전센터 신축공사	지상3층 980㎡	천안시 서북구 직산읍	2,402	110	0	2,292	2020.02 ~ 2021.12	-	착 공 준비중
	19	충남교통연수원 후생관동 등 내부개선공사	후생관동1충 역사문화관2층 내부개선	공주시 금흥동	300		300	0	2020.04 ~ 2020.12	45%	공사중
	20	재래흑염소 사육사 증축공사	지상1층 1,318㎡	청양군 정산면	1,000	0	1,000	0	2020.08 ~ 2021.06	-	설계중
예정 사업	소 계		4개소		184,317	0	1,387	182,930
	21	대천항 관공선 통합사무실 건립공사	지상2층 1,370㎡	보령시 신흑동	3,917		87	3,830		-	발주 준비중
	22	육아종합 지원센터	지하1층 지상3층 3,306㎡	예산군 삽교읍RB5구역	13,100	0	1,000	12,100		-	미의뢰
	23	충남 컨벤션센터	지하1층 지상4층 1,900㎡	천안시 서북구 불당동	160,300		0	160,300		-	발주 준비중
	24	수산종자 연구센터	지상3층 2,100㎡	보령시 웅천읍	7,000		300	6,700		-	발주 준비중

【4】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, 2020. 9. 30. 현재)

총 괄		준공지구		계속지구		신규지구
◀ 28건 60,852백만원 ▶		◀ 5건 20,347백만원 ▶		◀ 19건 37,286백만원 ▶		◀ 4건 3,219백만원 ▶

<총  괄>

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비(백만원)				비고
			계	기시행	2020년	장차
합 계	28지구	133.35	627,967	205,310	60,852	361,805
지방하천 정비사업	28지구	133.35	627,967	205,310	60,852	361,805	준공 5, 계속 19, 신규 4

<지방하천 정비사업 세부 내역>

구분	지구명			위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
				시군	읍면		계	기시행	2020년	장차
계	28지구					133.35	627,967	205,310	60,852	361,805
준 공 지 구	연번		소계 (5지구)			46.08	146,161	122,327	20,347	3,487
	1		성환천	천안	부대 성환	10.52	49,731	40,702	9,029	0	2016.05.10.∼ 2020.11.23.	88	준공
	2		정안천	공주	정안 의당	13.54	36,296	32,894	1,948	1,454	2015.09.03.∼ 2020.05.26.	100	준공
	3		금 천	부여	옥산 장암	10.1	32,786	23,312	7,945	1,529	2016.05.10∼ 2020.12.18.	78	준공
	4		웅 천	논산	양촌	4.7	9,784	8,355	1,425	4	2018.01.02∼ 2020.12.16.	86	준공
	5		태안천	태안	태안	7.22	17,564	17,064	0	500	2016.10.25.∼ 2020.09.04.	95	준공
계 속 지 구			소계 (19지구)			72.87	389,430	82,983	37,286	269,161
	6		마곡천	공주	사곡	3.30	13,705	11,068	2,633	4	2017.12.12.∼ 2021.04.06.	93	공사중
	7		신암천	논산	연산	2.20	17,393	13,855	3,313	225	2018.05.18∼ 2021.04.26.	26	공사중
	8		연산천	계룡 논산	엄사 연산	6.79	30,368	18,981	4,565	6,822	2018.03.29.∼ 2022.03.07.	42	공사중
	9		화산천	서천	기산 화양	4.28	35,862	16,054	2,100	17,708	2018.03.29∼ 2023.05.01	53	공사중
	10		도당천	서산	해미 운산	2.73	10,625	5,655	3,800	1,170	2018.07.02.∼ 2021.08.24.	62	공사중
	11		석남천	서산	예천 석남	2.66	20,173	9,310	5,000	5,863	2017.05.19.∼ 2022.08.29.	51	공사중
	12		병천천	천안	병천	8.3	24,778	1,336	2,150	21,292	2017.12.25.∼ 202312.31.	-	공사중
	13		광기천	천안	병천	3.4	29,641	860	2,150	26,631	2018.01.03.∼ 202312.31.	-	공사중
	14		주교천	부여	주교	3.0	25,685	800	2,250	22,635	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	15		명천 석림천	서산	석림	0.9	4,195	800	1,000	2,395	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	16	중산천		공주	금흥	0.72	18,656	400	2,255	16,001	2018.04.23.∼ 2022.12.31.	-	공사중
	17	장승천		청양	청양	3.29	15,901	800	2,250	12,851	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	18	천안천		천안	백석 불당	1.5	20,000	400	2,023	17,577	2019.02.20. 202312.31.	-	공사 발주
	19	신양천		논산	연무	4.3	25,555	546	400	24,609	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	20	와룡천		홍성	갈산 결성	7.5	25,247	700	0	24,547	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	21	도마천		서천	문산	7.3	18,246	300	400	17,546	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	22	용요천		태안	근흥	3.3	23,779	450	397	22,932	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	23	왕대천		계룡	두마	2.7	6,497	168	200	6,129	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	24	간치천		보령	주산	4.7	23,124	500	400	22,224	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
신 규 지 구	소계 (4지구)					14.4	92,376	-	3,219	89,157
	25	판교천		서천	종천 서천	2.6	14,376	0	504	13,872	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	26	청지천		서산	장홍 석림	3.4	29,431	0	905	28,526	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	27	왕암천		논산	가야곡	5.4	24,870	0	905	23,965	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	28	오봉천		당진	송악 신평	3.0	23,699	0	905	22,794	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중

【5】지역개발 사업 현황

(단위 : 백만원, 2020. 9. 30. 현재)

총 괄		준공지구		계속지구		신규지구
◀ 2건 10,092백만원 ▶		◀ - ▶		◀ 2건 10,092백만원 ▶		◀ - ▶

구분	지구명		위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				공사기간	진도 (%)	비고
			시군	읍면		계	기시행	2020년	장차
합 계			2지구		4.51	89,812	43,711	10,092	36,009
계속지구	1	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	홍성 홍성	홍북 홍성	연장=3.90 (폭=20.0m)	53,166	36,332	4,992	11,842	2018.03.02. ～ 2022.02.08.	68	공사중
계속지구	2	태안기업도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.61 (폭=25.0m)	36,646	7,379	5,100	24,167	2020.02.28. ～ 2023.02.11.	13	공사중

【6】도로 유지관리사업 현황

총 괄		계속지구		신규지구
◀ 225지구 87,734백만원 ▶		◀ 62지구 21,204백만원 ▶		◀ 163지구 66,530백만원 ▶
․자체사업 99 / 19,235		․자체사업 23 / 4,980		․자체사업 76 / 14,255
․재배정사업 109 / 49,671		․재배정사업 30 / 14,703		․재배정사업 79 / 34,968
․위임국도 17 / 18,828		․위임국도 9 / 1,521		․위임국도 8 / 17,307

<공주․홍성지소>                                             (단위 : 백만원, 2020. 9. 30. 현재)

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		공주		홍성		합계		공주		홍성
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	225	87,734	62	21,204	37	13,249	25	7,955	163	66,530	78	37,715	85	28,815
자체사업	99	19,235	23	4,980	16	1,607	7	3,373	76	14,255	39	6,533	37	7,722
재배정사업	109	49,671	30	14,703	16	11,456	14	3,247	79	34,968	35	22,313	44	12,655
위임국도	17	18,828	9	1,521	5	186	4	1,335	8	17,307	4	8,869	4	8,438

<공주지소>                                                (단위 : 백만원, 2020. 9. 30. 현재)

사업명				위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
				시･군	읍･면
총 계				115개 지구			50,964
계(신규지구)				78개 지구			37,715
신규지구	소계	자 체 사 업		39개 지구			6,533
	자체사업	1	국지도57호 기로도로 지반조사용역	천안	성거	L=0.8km	50	20.01∼06	100	준공
		2	지693호 장산도로 갓길정비공사	천안	수신	L=0.8km	50	20.01∼06	100	준공
		3	지691호 용원도로 갓길정비공사	천안	성남	L=0.6km	50	20.01∼06	100	준공
		4	지624 상덕도로 배수로정비공사	천안	직산	L=0.4km	50	20.01∼06	100	준공
		5	국지70호 도하도로 배수로 및 도하교 연석정비공사	천안	성환	L=0.15km	50	20.01∼06	100	준공
		6	국지57호 오곡도로 배수로 정비공사	천안	북	L=0.1km	50	20.01∼06	100	준공
		7	덕학리 외1개소 배수로 정비공사	공주	정안	L=0.5km	22	20.01∼06	100	준공
		8	부곡도로 포장도 보수공사	공주	사곡	L=2.5km	200	20.01∼06	100	준공
		9	하대도로 포장도 보수공사	공주	하대	L=0.7km	68	20.01∼06	100	준공
		10	신기도로 배수로 정비공사	논산	양촌	L=0.3km	30	20.01∼04	100	준공
		11	대촌도로 배수로 정비공사	논산	상월	L=0.3km	30	20.01∼04	100	준공
		12	청동도로 배수로 정비공사	논산	연산	L=0.2km	20	20.01∼03	100	준공
		13	산성도로 인도설치공사	논산	상월	L=2.0km	170	20.01∼09	100	준공
		14	구석도로 배수로 정비	금산	구석	L=0.3km	60	20.01∼09	100	준공
		15	서대도로 배수로 정비	금산	서대	L=0.9km	50	20.01∼12	100	준공
		16	역평도로 배수로 정비	금산	남이	L=0.2km	40	20.01∼06	100	준공
		17	예미도로 배수로 정비	금산	부리	L=0.3km	30	20.01∼06	100	준공
		18	교원도로 포장도 보수공사	부여	홍산	L=2.0km	190	20.01∼05	100	준공
		19	상황도로 배수로 정비공사	부여	장암	L=0.05km	10	20.01∼05	100	준공
		20	장항도로 배수로 정비공사	부여	외산	L=0.18km	40	20.01∼06	100	준공
		21	장암도로 차선도색공사	부여	장암	L=1.5km	20	20.01∼05	100	준공
		22	둔덕도로 배수시설 정비	서천	서천	L=0.3km	40	20.01∼06	100	준공
		23	지현도로 포장도 보수공사	서천	지현	L=2.6km	210	20.01∼06	100	준공
		24	동강도로 배수시설 정비공사	청양	동강	L=0.1km	20	20.01∼06	100	준공
		25	금정도로 차선도색공사	청양	남양	L=4.0km	40	20.01∼06	100	준공
		26	중묵도로 포장도 보수공사	청양	비봉	L=1.3km	40	20.01∼06	100	준공
		27	신정도로 보행환경 개선사업	청양	화성	L=0.7km	80	20.01∼06	100	준공
		28	산직도로 배수로 정비사업	논산	양촌	L=0.5km	30	20.07∼12	100	준공
		29	소내 폐기물 처리사업	공주지소		폐기물처리	30	20.01∼06	100	준공
		30	천안, 공주, 논산 포장도 보수공사 실시설계용역	천안, 공주, 논산		실시설계	20	20.01∼06	100	준공
		31	부여,금산,청양,서천 포장도 보수공사 실시설계용역	부여, 금산, 청양, 서천		실시설계	20	20.01∼06	100	준공
		32	국지68호 동산도로 포장도보수	논산	연무	L=0.3km	20	20.01∼06	100	준공
		33	PMS관련 포장도보수	전노선		7개시군	2,243	20.01∼07	100	준공
		34	긴급 지방도 보수공사	전노선		7개시군	300	20.01∼12	50	공사중
		35	제초작업	전노선		7개시군	500	20.01∼10	100	준공
		36	유지보수 자재구입	전노선		7개시군	340	20.01∼12	-	-
		37	터널 및 교량관리	전노선		7개시군	200	20.01∼06	-	-
		38	도로안전시설물(소방안전)	전노선		7개시군	593	20.01∼12	-	-
		39	재해대책추진	전노선		7개시군	527	20.01∼12	-	-
	소계	재 배 정 사 업		35개 지구			22,313
	재 배 정 사업	40	협소교량 인도설치	전노선		1식	20	20.01∼12	100	준공
		41	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	20.01∼12	30	사업중
		42	도로표지(LED) 개선사업	전노선		1식	150	20.01∼12	100	준공
		43	지방도 표지판정비	전노선		1식	100	20.01∼12	100	준공
		44	마을주민 보호구역 정비사업	전노선		1식	265	20.01∼12	100	준공
		45	교량 안전진단(정밀점검)	전노선		1식	1,177	20.01∼12	70	공사중
		46	KTX 공주역 진입도로 선형개량공사	공주	이인	L=1.7km	2,000	19.08∼21.06	30	중지중
		47	지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,000	20.01∼12	90	공사중
		48	지방도 635호 구례도로 포장	금산	복수	L=2.3km	300	20.01∼12	100	준공
		49	지방도635호 흑암도로 인도설치공사	금산	남이	L=0.2km	200	20.01∼12	100	준공
		50	국지도98호 육곡도로 인도설치공사	논산	가야곡	L=0.8km	500	20.01∼12	80	공사중
		51	국지도70호 매주도로 인도정비공사	천안	성거, 입장	L=2km	200	20.01∼12	100	준공
		52	중묵도로 인도설치공사	청양	중묵	L=0.35km	130	20.01∼12	100	준공
		53	국지도68호 천내도로 인도설치공사	금산	제원	L=0.1km	100	20.01∼12	35	중지중
		54	국지도70호 석곡도로 인도설치공사	천안	직산	L=0.4km	200	20.01∼12	100	준공
		55	지방도 교량유지관리	전노선		1식	2,100	20.01∼12	20	공사중
		56	지방도 교량 내진성능 보강	전노선		1식	1,600	20.01∼12	50	공사중
		57	저곡지구 급경사지 정비공사	금산	제원	1식	3,362	19.01.18∼21.2.27	30	공사중
		58	저석지구 급경사지 정비공사	부여	부여	L=0.1km	1,176	19.12.19. ∼ 21.02.18	30	공사중
		59	가화지구 급경사지 정비공사	부여	충화	L=0.4km	450	20.01∼12	90	공사중
		60	역평지구 급경사지 정비공사	금산	남이	L=0.5km	400	20.01∼12	90	공사중
		61	상가지구 급경사지 정비공사	금산	금성	L=0.5km	400	20.01∼12	90	공사중
		62	건천1지구 급경사지 정비공사	금산	남이	L=0.4km	300	20.01∼12	90	공사중
		63	은곡지구 급경사지 정비공사	서천	문산	L=0.4km	200	20.01∼12	20	공사중
		64	광금지구 급경사지 정비공사	청양	대치	L=0.05km	150	20.01∼12	100	준공
		65	교통사고 잦은 곳 개선사업	논산	광석	교차로개선	690	20.01∼12	40	공사중
		66	우곤도로 선형개량사업	논산	성동	L=1.85km	2,835	17.09.-22.04	30	중지중
		67	양전도로 선형개량사업	금산	금성	L=0.64km	586	18.05.25-21.05.09	30	공사중
		68	주항도로 선형개량사업	서천	서	L=1.03km	612	18.11.08. -21. 6.	30	공사중
		69	석막도로 선형개량사업	금산	진산	L=0.7km	400	20.03.23. -20.12	-	설계중
		70	천을도로 선형개량사업	금산	군북	L=1.0km	400	19.12.06. -20.12.	-	설계중
		71	한성도로 배수로정비공사	서천	마서	L=0.5km	100	20.7~20.12	-	설계중
		72	천내도로 선형개량공사	금산	제원	1식	120	20.7~20.12	-	보상협의중
		73	용천도로교차로개선	청양	비봉	L=0.5km	20	20.7~20.12	-	설계중
		74	용마도로 갓길정비공사	청양	남양	L=1.5km	50	20.7~20.12	100	완료
	소계	위 임 국 도		4개 지구			8,869
	위임국도	75	도로 안전환경개선	전노선		1식	5,749	20.01∼12	52	공사중
		76	도로 유지보수	전노선		1식	2,340	20.01∼12	52	공사중
		77	도로 병목지점 개선	전노선		1식	664	20.01∼12	52	공사중
		78	국도유지운영	전노선		1식	116	20.01∼12	52	공사중
계(계속지구)				37개 지구			13,249
계속지구	소계	이 월 사 업		16개 지구			1,607
	자체 예 산	79	[부여]지방도651호 정동2교차로 교통안전시설 정비사업	부여	부여	1식	38	19.12∼20.12	100	준공
		80	[부여]지방도651호 정동2교차로 교통안전시설 정비사업(전기)	부여	부여	1식	33	19.12∼20.06	100	준공
		81	지방도601호선 천을도로 선형개량공사 실시설계용역	금산	군북	1식	43	19.12∼20.12	10	중지중
		82	[공주]안양리 외1개소 배수시설 정비공사	공주	우성	1식	28	19.12∼20.12	100	준공
		83	삼가교 재가설공사	금산	진산	1식	900	19.12∼21.2	30	공사중
		84	상황도로 포장도 보수공사	부여	상황	L=1.3km	40	19.12∼20.06	100	준공
		85	송정도로 포장도 보수공사	부여	송정	L=1.3km	110	19.12∼20.06	100	준공
		86	서천지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	서천		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		87	청양지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	청양		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		88	부여지구 도로 유지관리사업 실시설계용역	부여		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		89	금산지구 도로 유지관리사업 실시설계용역	금산		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		90	천안지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	천안		1식	18	19.12∼20.01	100	완료
		91	공주지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	공주		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		92	논산지구 지방도유지관리사업 실시설계용역	논산		1식	16	19.12∼20.01	100	완료
		93	사동교 내진성능보강공사	부여		1식	286	19.11∼ 20.03	100	완료
		94	지691호 방호울타리정비사업	공주		1식	15	19.11∼ 20.01	100	완료
	소계	이 월 사 업		16개 지구			11,456
	재배정사업	95	노성도로 선형개량	논산		L=0.7km	98	19.04∼20.12	10	명시
		96	매당도로 인도설치공사	천안	광덕	L=1.0km	563	19.02∼20.09	100	명시
		97	가야곡도로 인도설치공사	논산	가야곡	L=0.8km	389	20.01.∼20.12	50	명시
		98	KTX 공주역 진입도로 선형개량	공주	이인	L=3.0km	9	19.08∼21.06	100	명시
		99	제원대교 인도교 설치공사	금산	제원	L=0.36km	22	20.01.∼20.12	100	명시
		100	지방도 교량 내진성능 보강 (구만교, 제원대교)	금산, 부여		1식	887	19.02∼20.09	100	명시
		101	매주도로 인도설치공사	천안	성환	L=0.35km	509	19.08∼20.09	100	사고
		102	호계도로 인도설치공사	공주	사곡	L=0.69km	333	19.12∼20.07	100	사고
		103	광금도로 선형개량공사	청양	대치	L=0.58km	322	19.12∼21.12	20	사고
		104	서천화력발전소 주진입도로 확포장	서천	서, 문산	L=1.0km	1,000	19.12∼20.11	30	사고
		105	신천도로 인도설치공사	금산	남일	L=0.46km	238	19.12∼20.09	80	사고
		106	강경천교 등 5개교 보수보강공사	공주지소 관내		1식	278	19.01∼20.12	100	사고
		107	저곡지구 급경사지 정비사업	금산	천내	1식	3,483	19.01∼21.6	30	명시+ 사고
		108	우곤도로 선형개량사업	논산	성동	L=1.85km	1,750	16.03∼20.12	30	명시+ 사고
		109	주항도로 선형개량사업	서천	서	L=1.06km	300	16.03∼20.12	30	명시+ 사고
		110	양전도로 선형개량사업	금산	금성	L=0.94km	1,275	16.03∼20.12	30	명시+ 사고
	소계	이 월 사 업		5개 지구			186
	위임국도	111	도로 안전환경개선	전노선		1식	16	19.01∼12	100	준공
		112	도로 유지보수	전노선		1식	46	19.01∼12	100	준공
		113	도로 구조물기능개선	전노선		1식	17	19.01∼12	100	준공
		114	도로 병목지점 개선	전노선		1식	103	19.01∼12	20	공사중
		115	위험도로 개선	전노선		1식	4	19.01∼12	100	이관

<홍성지소>                                            (단위 : 백만원, 2020. 9. 30. 현재)

사업명				위 치			사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
				시･군	읍･면
총 계				110개 지구				36,770
계(계속지구)				25개 지구				7,955
계속지구	소계	자 체 사 업(이월)		7개 지구				3,373
	자체사업	1	지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원		L=0.87km	69	19.11∼22.12	0	용역중
		2	서원교 재가설공사	아산	염치		1개소	556	20.04-21.04	30	공사중
		3	신창교 재가설공사	서산	해미		1개소	800	20.08-21.08	5	공사중
		4	용현교 재가설공사	서산	운산		1개소	800	20.08-21.08	5	공사중
		5	신원교 내진보강공사	예산	예산		1개소	383	19.11-20.01	100	준공
		6	삼송교 재가설공사	서산	해미		1개소	547	19.11-20.12	60	공사중
		7	검암교 외 2개교 내진보강공사	홍성지소			3개소	218	19.12-20.06	100	준공
	소계	재배정 사업(이월)		14개 지구				3,247
	재배정사업	8	지방도647호 용장도로 인도설치공사	서산	운산		L=0.3km	40	19.03∼20.11	30	공사중
		9	황교도로 선형개량공사	보령	웅천		L=0.24km	143	19.12∼20.12	10	공사중
		10	마교도로 선형개량공사	예산	봉산		L=0.66km	604	17.02∼20.12	90	공사중
		11	지방도 교량유지관리(수당교외 6개교)	홍성지소			1식	406	19.02-20.12	95	공사중
		12	2020년 홍성지소 인도설치공사 실시설계용역	홍성지소			1식	101	19.12-20.3.	100	준공
		13	지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원		L=0.84km	31	19.03∼22.12	0	용역중
		14	지방도로 접속도로 교차지점개선(신창도로)	서산	운산		1식	67	19.03∼20.06	100	준공
		15	지방도615호 삼봉도로 인도설치공사	당진	석문		L=400m	93	19.12-20.10	90	공사중
		16	지방도649호 천의도로 인도설치공사	당진	정미		L=500m	202	20.01-20.08	100	공사중
		17	대운산교 내진보강공사	당진	정미		1개소	81	19.08-20.01	100	준공
		18	칠성암삼거리 회전교차로 설치공사	예산	신양		1개소	444	19.06-20.12	50	공사중
		19	송악동화지구 급경사지 정비사업	아산	송악		L=112m	186	18.04∼20.04	100	준공
		20	지방도610호 장곡지구 급경사지 정비공사	보령	청소		L=120m	733	18.12∼20.12	30	공사중
		21	지방도634호 반계도로 오르막차로 설치공사(보상비)	태안	반계리		1식	116	18.12∼20.12	95	보상중
	소계		위 임 국 도(이월)	4개 지구				1,335
	위임국도	22	도로안전 및 환경개선	전노선			1식	12	19.01-20.12	100	준공
		23	도로유지보수	전노선			1식	6	19.01-20.12	100	준공
		24	도로구조물 기능개선	전노선			1식	136	19.01-20.12	100	준공
		25	위험도로개선	전노선			1식	1,181	19.01-20.12	70	공사중
계(신규지구)				85개 지구				28,815
신규지구	소계	자 체 사 업		37개 지구				7,722
	자체사업	26	지방도617호 평라도로 포장도 보수공사	보령	미산		L=2.0km	200	20.01∼20.06	100	준공
		27	지방도606호 수부도로 포장도 보수공사	보령	웅천		L=1.5km	150	20.01∼20.06	100	준공
		28	지방도610호 성연도로 포장도 보수공사	보령	청소		L=2.0km	200	20.01∼20.06	100	준공
		29	지방도610호 신산도로 포장도 보수공사	보령	청라		L=1.0km	100	20.01∼20.06	100	준공
		30	국지도70호 쌍룡도로 포장도 보수공사	아산	음봉		L=2.0km	140	20.01∼06	100	준공
		31	지방도616호 송악도로 포장도 보수공사	아산	송악		L=2.0km	140	20.01∼06	100	준공
		32	지방도624호 탕정도로 배수로정비	아산	탕정		1개소	250	20.01∼12	100	준공
		33	지방도623호 현대자동차교차로 개선사업	아산	인주		1개소	100	20.01∼06	100	준공
		34	지방도628호 도로구역 변경용역	아산	영인면		L=2.0km	20	20.01∼12	90	용역중
		35	국지도70호 갈산도로 포장도 보수공사	서산	운산		L=2.0km	200	20.01∼20.06	100	준공
		36	운산면 배수로 정비	서산	운산		4개소	150	20.01∼20.10	90	공사중
		37	지방도649호 부산도로 포장도 보수공사	서산	운산		1개소	100	20.01∼20.05	100	준공
		38	지방도649호 명천교차로 개선사업	서산	성연		1개소	200	20.01∼20.09	100	준공
		39	지방도647호 천의도로 포장도 보수공사	당진	정미		L=1.0km	150	20.01∼20.06	100	준공
		40	지방도647호 천의도로 갓길포장공사	당진	정미		L=1.0km	50	20.01∼20.06	100	준공
		41	지방도615호 장항도로 포장도 보수공사	당진	고대		L=2.0km	250	20.01∼20.06	100	준공
		42	국지도70호 송산도로 정비공사	당진	우강		L=0.1km	150	20.01∼20.06	100	준공
		43	지방도647호 장정도로 포장보수공사	당진	대호지		L=1km	50	20.01∼20.06	100	준공
		44	국지도96호 단아래사거리 교차로 개선공사	홍성	광천		1개소	250	20.01∼20.06	100	준공
		45	국지도96호 광리도로 포장도 보수공사	홍성	서부		L=1.0km	200	20.01∼06	100	준공
		46	지방도609호 봉신도로 방음벽 설치공사	홍성	홍성		1개소	200	20.01∼12	-	사업변경
		47	지방도619호 노화도로 포장도 보수공사	예산	응봉		L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		48	국지도70호 가지도로 포장도 보수공사	예산	신양		L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		49	지방도616호 배수로정비	예산	신양		2개소	50	20.01∼06	100	준공
		50	지방도619호 상중도로 포장도 보수공사	예산	대흥		L=2.0km	200	20.01∼06	100	준공
		51	국지도96호 근흥도로 포장도 보수공사	태안	근흥		L=2.0km	200	20.01∼20.06	100	준공
		52	지방도634호 황촌도로 포장도 보수공사	태안	원북		L=2.0km	200	20.01∼20.05	100	준공
		53	지방도603호 관리도로 포장도 보수공사	태안	이원		L=2.0km	200	20.01∼20.06	100	준공
		54	태안도로 배수로정비	태안	근흥		1개소	50	20.01∼20.06	100	준공
		55	안전시설 정비사업(소방안전교부세)	전노선			1식	600	20.01∼12	80	추진중
		56	긴급도로보수공사	전노선			1식	150	20.01∼12	90	추진중
		57	지방도 제설 및 제초용역	전노선			1식	500	20.01∼12	90	추진중
		58	도로유지보수 자재구입	전노선			1식	340	20.01∼12	80	추진중
		59	도로유지보수 폐기물처리	전노선			1식	50	20.01∼12	50	추진중
		60	재해대책추진	전노선			1식	527	20.01∼12	70	추진중
		61	터널 및 교량관리	전노선			1식	100	20.01∼20.12	80	추진중
		62	청사유지관리	홍성지소			1개소	905	20.01∼21.12	-	10월 착공
	소계	재배정사업		44개 지구				12,655
	재배정사업	63	도로대장 유지관리	전노선			1식	20	20.01∼20.06	100	준공
		64	협소교량 인도설치	서산 당진		해미 우강	L=37m L=22m	180	20.01∼20.12	100	준공
		65	지방도 표지판정비	전노선			1식	100	20.01∼20.06	100	준공
		66	지방도로 접속도로 교차지점 개선	아산		배방	1개소	104	20.01∼12	100	준공
		67	지방도 교량안전진단	전노선			19개소	407	20.01∼20.12	90	용역중
		68	도로표지(LED) 개선사업	전노선			1식	150	20.01∼20.07	100	준공
		69	지방도변 마을주민 보호구역 정비사업	아산,당진,예산			3개소	120	20.01∼07	100	준공
		70	운행방향 유도레인 설치	전노선			1식	30	20.01∼06	100	준공
		71	터널 재난방송 중계기 설치				1식	150	20.01∼20.06	100	준공
		72	지방도603호 포지도로 개선사업	태안		이원	L=0.84km	500	20.01∼22.12	0	용역중
		73	지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선			1식	1,000	20.01∼12	90	추진중
		74	로드킬 방지 시설	전노선			1식	100	20.01∼12	100	준공
		75	국지도96호(태안, 서산) 포장도 보수	태안 서산		근흥 부석	L=10.0km	1,000	20.01∼20.06	100	준공
		76	AB방조제 측구설치공사	서산		부석	L=3.0km	300	20.01∼20.07	100	준공
		77	지방도624호 산동사거리 개선공사	아산		음봉	1개소	250	20.01∼12	90	공사중
		78	지방도610호 영보리 도로선형개량공사	보령		오천	L=0.48km	670	20.01~20.12	10	공사중
		79	지방도610호 은포리 접속도로 개선공사	보령		주교	1개소	200	20.01∼20.12	0	용역중
		80	지방도606호 대천도로 인도설치공사	보령		웅천	L=0.4km	100	20.01∼20.10	70	공사중
		81	지방도610호 성연도로 인도설치공사	보령	청소		L=0.4km	400	20.01∼20.12	10	공사중
		82	지방도623호 선창도로 인도설치공사	아산	선장		L=0.8km	300	20.01∼12	10	공사중
		83	지방도647호 용장도로 인도설치공사	서산	운산		L=0.3km	200	20.01∼20.11	30	공사중
		84	지방도634호 고남도로 인도설치공사	서산	성연		L=0.2km	150	20.01∼20.07	100	준공
		85	지방도615호 삼봉초도로 인도설치공사	당진	석문		L=0.3km	150	20.06∼20.10	60	공사중
		86	지방도616호 덕정도로 인도설치공사	홍성	금마		L=0.2km	100	20.01∼07	100	준공
		87	지방도616호 죽림도로 인도설치공사	홍성	금마		L=1.3km	210	20.01∼07	100	준공
		88	지방도609호 봉림도로 인도설치공사	예산	봉산		L=0.5km	300	20.01∼12	30	공사중
		89	지방도618호 신원도로 인도설치공사	예산	오가		L=1.0km	540	20.01∼12	-	변경 협의중
		90	지방도634호 방갈도로 인도설치공사	태안	원북		L=0.2km	150	20.04∼20.06	100	준공
		91	서원교 재가설공사	아산	염치		1개소	600	20.04∼21.04	30	공사중
		92	삼송교 재가설공사	서산	해미		1개소	600	19.11∼20.12	60	공사중
		93	문봉교 보수보강공사	당진	면천		1개소	200	20.06∼20.09	100	준공
		94	지방도 교량유지관리	선인교,창리교 종현교,강월교			4개소	542	20.06∼20.10	95	공사중
		95	송악강장 1지구 급경사지 정비공사	아산	송악		1개소	200	20.07∼20.09	100	준공
		96	송악강장 2지구 급경사지 정비공사	아산	송악		1개소	200	20.07∼20.10	100	준공
		97	고산지구 급경사지 정비공사	서산	운산		1개소	150	20.07∼20.10	95	공사중
		98	화봉지구 급경사지 정비공사	홍성	은하		1개소	300	20.01∼20.10	95	공사중
		99	지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원		L=0.87km	697	20.01∼22.12.	0	용역중
		100	지역교통 안전환경개선사업	아산, 홍성			2개소	400	20.01-20.12.	60	추진중
		101	국지도70호 음암도로 포장도 보수공사	홍성지소			L=0.8km	500	20.07∼20.11	0	용역중
		102	국지도96호 용신도로 선형개량공사	태안	근흥		L=0.3km	35	20.07~20.12	0	용역중
		103	지방도609호 운월도로 선형개량공사 실시설계용역	홍성	홍동		L=0.4km	120	20.08~20.12.	30	추진중
		104	지방도616호 강장도로 교차로 개선공사	아산	강장		1개소	100	20.09~20.12	30	공사중
		105	지방도 인도설치공사(지방도623호 금곡초교 인도설치공사)	아산	금곡		1개소	100	20.09~20.12	30	공사중
											준공
										100
									20.08~20.09
								30
							1식
				아산,예산	장복, 송악
			재해사전 예방 및 응급복구 지원(자연재난)
		106
	소계	위 임 국 도		4개 지구				8,438
	위임국도	107	도로안전 및 환경개선	전노선			1식	4,187	20.01∼12	70	추진중
		108	도로유지보수	전노선			1식	3,057	20.01∼12	70	추진중
		109	도로병목지점개선	전노선			1식	694	20.01∼12	70	추진중
		110	위험도로개선	전노선			1식	500	20.01∼12	70	추진중

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
종합건설사업소	소 장	지방기술서기관	김응백	2020.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	최평근	2020.07.01.
	도로건설과장	지방시설사무관	김진수	2018.06.30.
	공공건축과장	지방시설사무관	김재균	2020.07.01.
	하천개발과장	지방시설사무관	이재원	2020.07.01.
공주지소	지 소 장	지방시설사무관	전상근	2020.02.24.
홍성지소	지 소 장	지방시설사무관	원종성	2020.07.01.