		제334회 도의회 임시회 2022. 1. 18. ~ 1. 27.

- 2022년 -

주요업무 계획 보고(Ⅴ)

《안전건설소방위원회》

	충청남도

《종합건설사업소》

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2022 업무여건과 운영방향 Ⅲ. 2022 주요업무 추진계획 Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2021년도 행정사무감사결과 처리상황 □ 제11대 도정질문, 5분발언 등 추진상황 Ⅴ. 참고사항 □ 2022년부터 달라지는 제도･시책 □ 각종 위원회 및 기관․단체 현황 □ 주요 사업별 예산확보 현황 □ 2021년도 간주예산 편성 결과 □ 간부명단

Ⅰ. 기  본  현  황

□ 기구 및 기능

【1】기 구

								소 장
행정관리과				도로건설과				공공건축과						하천개발과					공주지소				홍성지소
행정경리팀				도로1팀				대형건축팀						지역개발팀					서무팀				서무팀
계약팀				도로2팀				건축사업팀						하천1팀					보수1팀				보수1팀
				도로보상팀				건축지원팀						하천2팀					보수2팀				보수2팀
								품질관리팀						하천보상팀					구조물 관리팀				구조물 관리팀
																			단속팀				단속팀

【2】정․현원 현황

(2022. 01. 01. 기준)

담당관별		계	일반직 (정원/현원)
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계		114/104	1/1	6/4	25/29	37/31	36/20	9/19
본소		61/58	1/1	4/2	14/17	19/15	16/11	7/12
	행정관리과	13/11	1/1	1/0	2/2	5/4	3/3	1/1
	도로건설과	15/16	-	1/1	3/4	4/3	5/3	2/5
	공공건축과	21/19	-	1/1	5/6	7/6	5/1	3/5
	하천개발과	12/12	-	1/0	4/5	3/2	3/4	1/1
공주지소		27/22	-	1/1	5/6	8/7	12/4	1/4
홍성지소		26/24	-	1/1	6/6	10/9	8/5	1/3

※ 공무직(70명) : 도로보수원 52, 사무보조 4, 과적단속요원 14

【3】 주요기능

	- 행정관리과
	❍ 조직, 예산, 청사관리 및 직원후생복지 ❍ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매
	- 도로건설과
	❍ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍ 국가지원지방도 및 지방도 확‧포장사업 시행
	- 공공건축과
	❍ 공공 건축물의 신축 및 보수사업 ❍ 건설공사 자재 품질검사 및 현장 안전점검
	- 하천개발과
	❍ 지방하천 정비사업 시행 및 집행계획 수립 ❍ 지역개발 기반시설사업 시행 ❍ 지방하천 재해복구사업 추진
	- 공주·홍성지소
	❍ 지방도∙위임국도 유지관리 및 보수사업 시행 ❍ 자연 재해대책 수립 시행, 운행제한 위반 차량 단속

□ 2022년도 예산규모

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 13,772백만원 - 수수료 100, 과태료 210, 지난년도 수입 30, 소방안전교부세 1,432, 예수금 12,000 ∙ [세 출 예 산] 29,898백만원 - 사업예산 18,295, 행정운영경비 11,603

❍ 재배정 예산 사업 : 349,809백만원

(단위 : 백만원)

도로 확･포장	공공건축	하천정비	지역개발	재해복구사업	도로유지 관리
73,579	101,457	52,440	32,623	12,318	77,392

Ⅱ. 2022년도 업무여건과 운영방향

	업 무 여 건
◈ 침체된 지역건설경기 활성화를 위한 역할 요구 ◈ 쾌적하고 풍요로운 생활환경 조성에 대한 기대 상승 ◈ 안전하고 자연친화적인 도로·하천·건축 공사 관심 증대

운 영 방 향

◈ 체계적인 사업관리를 통한 도민 만족도 및 신뢰도 향상

- 설계단계부터 주민참여를 확대하여 주민의견 적극반영

- 전문성과 책임있는 건설사업 추진을 통해 주민편의증진

- ‘찾아가는 보상팀’ 운영을 통해 선진 보상행정 실현

◈ 중대산업재해 예방을 위한 안전·보건업무 조직 운영

-「중대재해처벌법」시행(’22.1.27.)에 따라 안전·보건분야 의무 이행 철저

- 안전관리계획 수립, 안전관리조직 구성, 고위험작업 허가제 시행을       통한 무사고 건설현장 실현

⇨

안전하고 품격있는 건설공사로 ‘더 행복한 충남’ 구현

Ⅲ. 2022년 주요업무 추진계획

□ 지역경제 활성화를 위한 재정집행 지속추진

지역건설업체 참여 증진 및 지역 생산자재 우선 구매

신속한 대가지급을 통한 지역경제 활성화

【1】지역경제 활성화를 위한 건설공사 계약 추진

❍ 지역건설업체를 우선적으로 보호하는 계약업무 수행

- 지역제한입찰 및 지역의무공동도급계약 등의 계약방식을 통한 지역업체 보호

- 직무성과 계약과제와 연계하여 공사 발주 및 관급자재 구매 시

지역업체 참여율 85% 달성

【2】투명한 하도급 문화 정착 유도

❍ 하도급대금 직접 지불 적극 권고 및 지급보증제 실시

❍ 정기적인 하도급 현장점검과 건설업 관련 협회와의 협력을 통한

하도급 관리 철저

【3】재정집행 집중을 통한 지역경제 위축 완화

❍ 집중적인 선금·선고지 집행 등 지역경제 자금흐름 속도 촉진

❍ 조달청(G2B) 나라장터를 통한 신속한 비대면 대가집행

- 대금(선금, 기성금, 준공금) 지급 청구 시 3일내 지급

❍ 회계업무 처리기한 단축(코로나19 대응)에 따른 적극 행정(‘22.6월 限)

❍ 회계업무 처리기한 단축(코로나19 대응)에 따른 적극 행정(‘22. 6限)

□ 전문성과 책임있는 명품 도로건설사업 추진

이용자 중심의 편리하고 자연 친화적인 도로건설

전문적인 건설행정서비스 구현으로 명품 도로건설 실현

□ 2022년 도로사업 : 35지구 / 73,579백만원

(단위: 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	35	73,579	2	6,560	32	61,033	1	5,986
국지도	8	17,957	-	-	7	11,971	1	5,986
지방도	21	38,562	-	-	21	38,562	-	-
기 타	6	17,060	2	6,560	4	10,500	-	-

⇒ 공사중(12), 보상중(6), 설계중(17)

【1】체계적인 사업관리를 통한 효율적인 예산집행 및 이월액 최소화 추진

❍ 현장별 시공계획 사전점검을 통한 효율적인 예산집행 계획수립

- 체계적인 사업관리 및 보상·준공지구 예산 집중 투자

- 공사 관계자 간담회를 통한 시공상황 상시 모니터링 및 시공계획 조정

❍ 집행 부진지구 원인 분석 등 집중 관리를 통한 이월예산 최소화

- 상시 지구 간 사업비 조정을 통한 사업예산 적기 집행

- 행정절차(보상절차) 간소화 및 단축을 통한 조기 집행

2022년 본예산 73,579백만원 대비 70%(51,503백만원) 집행 목표 추진 / 2022년 성과목표

【2】지역주민 만족도 향상을 목표로 주민갈등 최소화 도로건설 추진

❍ 주민설명회 등을 통한 의견수렴으로 주민과 소통하는 건설사업 추진

- 노선 선정, 교차로 설치 시 주민 의견 경청 및 적극 반영

↳ 주민과 사전 소통으로 도로사업 추진에 있어 신뢰구축

※ 복수~진산간 노선 선정시 수차례 주민간담회를 통한 최적한 노선 도출 / 주민갈등 사전제거

❍ 찾아가는 협의 보상 추진으로 주민 행정 편의 및 만족 극대화

- 현장 방문 협의·민원 상담(권리구제) 및 보상설명회 개최

↳ 기존의 일방적 통보방식의 보상공고 및 협의절차 지양

□ 건설현장 안전사고 제로화를 위한 관리체계 강화

철저한 현장관리 및 품질향상으로 안전의식 제고

건설현장 안전사고 사례 전파 등 사고예방 관리

【1】중대재해처벌법 시행에 따른 안전·보건분야 의무 이행 철저

❍ 중대산업재해 예방을 위해 건설사업관리용역 안전관리 전담인력 배치

- 안전관리 건설사업관리기술인 배치기준 조정(상주, 전담)

❍ 소규모 직접 감독 현장 안전·보건 업무 전담 조직 구성 (시공사)

- 공종별 안전 및 보건조치 사전 이행 상황 상시점검 등 집중 감독 실시

【2】무사고 도로건설현장 실현을 위한 안전관리 강화

❍ 계절특성 고려 취약시기(동절기, 하절기) 특별안전점검 실시

- 해빙기, 태풍 및 우기 대비 등 안전 점검 실시 및 대응

❍ 현장 상주인력을 활용한 상시 안전점검체계 구축

- 상주인력(감리, 현장소장) 1일 1회 사업장 안전순찰 실시 후 보고

↳ 상시 보고체계 구축 / SNS활용 – 자연재해대응 단톡방 운영

□ 고품질 도로건설 실현을 위한 공사관계자 역량 강화

정기적 소통의 장 마련을 통한 공사관계자 의견 교류 활성화 추진

지속적 교육을 통한 내부직원 관리 및 감독 역량 강화 추진

【1】현장소통 활성화 및 공정관리 강화를 위한 공사관계자 회의 개최

❍ 분기별 공사관계자(발주청, 시공사, 감리단) 상호교류 활성화로 애로사항

청취 및 상호 협력체계 구축 / 현장 갈등 요인 사전 제거

- 시공사와의 유기적 관계 개선을 통한 안전 시공 추진

【2】공사관계자 직무 역량강화 교육 실시

❍ 실무자 역량강화를 위한 수시 교육 및 직무연찬 실시

- 기술력과 안전관리 지식 제고를 위하여 직무관련 교육* 실시

* 청렴교육·지하안전특별법·중대재해처벌법·지적중첩도 교육 등

□ 공정하고 신뢰받는 보상행정 추진

도로·하천사업에 편입되는 사유재산에 대한 객관적이고 공정한 보상

민원발생 최소화 및 찾아가는 보상협의로 선진보상행정 실현

□ 2022년 도로·하천 보상 : 44지구 / 56,048백만원

(단위: 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

구분		전체보상대상(A)		기존보상실적(B)		금액대비 비율(%)	22년 보상계획 (C=A-B)		비고
		건수	금액	건수	금액		건수	금액
합계		17,645	139,566	9,112	83,518	60	8,553	56,048
도로	23지구 (도로)	11,125	110,147	7,769	74,216	67	3,356	35,931
하천	21지구 (하천)	6,520	29,419	1,343	9,302	32	5,177	20,117

【1】“찾아가는 보상팀”운영을 통한 대민서비스 강화 및 보상률 제고

❍ 직접 사업현장을 찾아가는 보상협의 등으로 도민의 행정편의 극대화

- 협의 기간 중 지속적인 보상지구 방문으로 민원 편의 제공 및 의견반영

- 사업부서 간 긴밀한 협조로 2022년 집행률 98% 달성 추진

※ 2021년 보상 예산액 489억대비 98% 집행추진(479억)

↳ 2021년 보상팀 조직개편(도로·하천보상)에 따른 보상업무 효율성 지속유지

【2】보상인력 전문성 확보를 통한 손실보상 신뢰도 제고

❍ 보상업무 전문지식 함양을 위한 보상실무 매뉴얼 정비 및 전문교육과정 참여

- 실무 매뉴얼 수록자료 개선 및 보완(절차, 제도개선사항, 실무처리 tip 등)

- 국토부 보상실무교육 등 전문교육과정 참여 확대

【3】신속하고 원활한 보상업무 추진을 위한 지속적인 업무개선 추진

❍ 토지보상법 시행령 개정(’21.11.23.)에 따른 토지 및 물건 기본조사서 작성시행

- 보상의 신속성·공정성 확보를 위한 전반적인 기초자료로 활용

❍ 보상기간 단축을 위한 업무개선 아이디어 발굴 활성화(연중, 수시)

- 손실보상관련 제도개선 사항 중앙부처에 적극적 의견개진(연중, 수시)

⇨ 신속하고 원활한 보상추진으로 공사 간접비소송 예방 및 공기단축 지원

□ 탄소중립 공공건축물 건립 및 안전한 공사 현장 조성

“충남형 탄소중립 공공건축물”건립으로 쾌적한 생활환경 조성

안전사고 사전예방으로 중대재해 없는 안전한 공사현장 조성

□ 2022년 공공건축 사업 : 32건 / 101,457백만원

(단위: 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
건	사업비	건	사업비	건	사업비	건	사업비
32	101,457	7	19,897	11	69,451	14	12,109

【1】“충남형 탄소중립 공공건축물 건립” 단계별 추진

❍ 탄소중립을 위한 한 단계 높은 인증 공공건축물 건립 추진

- Zero 에너지 4등급(규정 : 5등급), 신재생에너지 34%(규정 : 32%)

- 충남탄소중립연수원을 목조건축물로 건립하여 탄소중립 및 에너지 효율 1등급 달성 추진  ※ 전국 최초 건립단계 탄소중립건축물 추진

【2】중대재해 없는 근로자 중심의 안전한 공사 현장 조성

❍ ’22년 시행되는 ｢중대재해 처벌법｣에 적극 대응

- 안전관리체계 구축 및 이행을 통한 현장별 위험요인 사전파악 및 대처

- 안전관리계획 수립, 안전관리조직 구성, 고위험작업 허가제 시행 등

❍ 소규모 건축물은 현장 근로자 중심 안전한 공사 현장 조성

- 현장별 사고발생 위험이 있을 경우, 현장 근로자가 사고발생 위험을 제보하여 안전사고 없는 공사 현장 조성

- 우수 제보자 선정하여 도지사 표창을 실시하고, 다른 현장에서 동일한 사례가 발생하지 않도록 현장 관리 철저

【3】공사업무 전문성 향상 및 담당자 역량 강화

❍ 공사업무 담당자 교육을 통한 전문성 확보

❍ 지식동아리 활동을 통한 현장 실무능력 배양

□ 정확하고 철저한 품질관리로 안전한 건설공사 추진

품질관리계획 및 품질시험계획 수립 현장의 품질시험 대행을 통한      도내 건설현장 품질향상 기여

공사 현장별 품질·안전점검을 통한 안전한 건설현장 조성

【1】품질 및 검사시험을 통한 공종별 품질관리 실시

❍ 품질시험계획 수립대상(건설기술진흥법 제55조, 시행령 제89조)

- 총공사비 5억원 이상 토목공사

- 총공사비 2억원 이상 전문공사

- 연면적 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사

❍ 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등 총 20분야 104종목 품질시험 실시

- 충청남도 건설공사 품질시험 종목 및 수수료 공고(2월)

❍ 설계서에 명시된 품질과 규격에 맞도록 공종별 품질시험 실시

❍ 품질시험 정밀성 향상을 위한 품질 시험기기 교정검사 실시

- 20종 52기기 교정검사 실시(4월)

⇨ 철저한 품질관리를 통한 건설공사 품질 및 안전성 확보

【2】품질·안전점검을 통한 품질확보 및 안전한 건설현장 조성

❍ 품질‧안전관리단 구성 및 운영으로 체계적인 안전사고 예방 시스템 구축

- 종합건설사업소장을 단장으로 2개 반 편성 운영(건축, 토목)

❍ 품질·안전관리단 분기별 점검을 통한 안전사고 방지 및 품질관리 강화
- 총공사비 10억 이상, 공정률 10% 이상의 건설공사 현장 점검

- 건설공사 현장의 품질확보 및 인명사고 제로화를 위한 품질‧안전관리 실태 점검

⇨ 취약 시기별 품질·안전점검을 통한 품질 향상 및 안전사고 예방 강화

□ 자연과 어우러진 하천정비사업 추진

자연환경과 조화를 이루는 지방하천 정비사업 추진

집중호우로 인한 제방유실 및 범람 등 피해지역 재해복구사업 추진

□ 2022년 하천 사업 : 36지구 / 85,063백만원

(단위: 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	36	85,063	3	2,477	29	80,186	4	2,400
지방하천	33	52,440	3	2,477	26	47,563	4	2,400
재해복구	3	32,623	-	-	3	32,623	-	-

※ 재해복구사업 : 금곡천, 약봉천, 온양천

【1】신속한 사업 추진으로 예산 조기 집행 및 재정집행률 향상

❍ (공사지구) 신속한 공사 추진으로 예산 조기 집행 및 재정집행률 향상

❍ (설계지구) 지역주민과 소통을 강화하여 공사 중 민원발생 최소화 및 신규지구 설계용역 조기 발주 추진(3월 중)

【2】자연 친화적인 하천정비 및 재해복구사업 추진

❍ 기후변화에 따른 자연재해 대비 견실하고 안전한 하천정비 추진

❍ 친환경 자재사용을 통하여 자연과 조화로운 하천 생태계 조성

❍ 자연재해로 인한 추가피해 방지 및 주민 안전 확보

【3】신뢰받는 건설 행정 구현 및 안전사고 예방 노력

❍ 하천사업 설계단계부터 주민참여 확대로 도민 신뢰도 향상

❍ 공법선정위원회를 통한 투명하고 효율적인 자재 및 공법 선정

❍ 안전사고 예방을 위한 점검 및 교육 강화로 사고 발생률 ZERO화

□ 태안기업도시 연결도로 개설공사 추진

태안기업도시와 서산웰빙특구를 연결하는 도로개설로 지역간 연계기능 확보

관광자원 활성화와 접근성 향상으로 지역 균형발전 기여

□ 2022년 지역개발사업 : 1지구 / 12,318백만원

(단위: 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

구 분	사업량 (km)	사 업 비				비고
		합 계	기시행	2022년	장 차
계	0.61	36,646	24,328	12,318	-
태안기업도시 연결도로 개설공사	0.61	36,646	24,328	12,318	-

□ 태안 기업도시 연계기능 강화로 지역경제 활성화

❍ 서산웰빙특구 및 태안기업도시 연결도로 개설로 서해안 지역발전 및 관광 활성화(현재 공정률 50%)

* 공사발주(’19. 11.), 공사 착공(’20. 2.) → 준공(’23. 2. 예정)

⇨ ‘22년 하반기 조기 준공을 위해 역점 추진

도민이 안심하고 통행할 수 있는 도로 유지관리 추진

선제적 도로 유지보수 체계 확립, 도로이용 불편사항 최소화

설해 및 수해 등 자연재해 취약구간 중점 관리 추진

□ 2022년 도로 유지보수 사업 : 199지구 / 94,453백만원

(단위: 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

구 분	합 계		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	199	94,453	50	35,222	149	59,231
자체사업	94	17,061	12	1,254	82	15,807
재배정사업	96	63,370	35	32,903	61	30,467
위임국도	9	14,022	3	1,065	6	12,957

❍ 도로 유지보수 사업의 조기 발주 및 철저한 품질 관리 추진

- 위험도로 구조개선, 포장 보수, 안전시설 정비 등

❍ 교량 및 터널 등 시설물의 주기적인 안전점검 및 적기 보수보강 추진

【1】자연재해대책 수립 및 추진

❍ 겨울철(’21.11.15. ~ ’22.03.15.) 재해대책

- 제설장비‧인력 관리 철저, 제설자재 적정 확보 및 비상근무 추진

- 친환경 제설재 사용으로 환경오염 예방 및 도로시설물 부식 방지

- 결빙취약구간 및 살얼음 우려 구간 사전 염화칼슘 살포로 교통사고 예방

❍ 여름철(’22.05.15. ~ ’22.10.15.) 재해대책

- 급경사지, 산사태 우려지역 등 재해 취약시설 상시점검 추진

- 응급복구 장비‧인력‧자재의 사전확보 및 유관기관 협조체계 구축

【2】선제적 도로정비를 통한 안전한 도로환경 조성

❍ 도로 순찰 강화 및 유지보수 추진

- 노면보수 : 노면 평탄성 유지(포트홀 보수 등) 및 차선도색 등

- 도로안전시설 : 교통사고 위험구간 안전시설 선제적 정비 등

❍ 스마트 도로유지관리 시스템 도입으로 포장도 노후 정도에 따른

우선순위 결정 및 보수공사 추진 등 체계적인 포장도 유지관리

운행제한 위반차량 강력 단속

도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

대형공사장 등 과적 근원지 과적예방을 위한 사전계도 실시

운행제한 위반 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

【1】도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

❍ 주요 과적발생 근원지(대형공사장 등), 위험교량 주변 노선 집중단속

- 도내 지방도, 국지도, 위임국도 62개 노선 수시 이동단속

❍ 휴일, 조간, 야간 불시 이동단속 : 민원발생 및 필요시

(2021. 12. 31. 기준)

구분	검 차 대 수			적 발 대 수
	2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
합계	11,977	11,279	10,124	472	430	417
고정식	1,585	1,223	0	3	8	0
이동식	10,392	10,056	10,124	469	422	417

【2】유관기관 간 합동단속 강화

❍ 국토관리사무소, 시군, 경찰서 등 유관기관 간 합동단속 실시

❍ 단속기관 간 단속업무 공유 및 공조단속

※ 2021년 합동단속 실적 : 검차 333대 / 적발 14대

【3】대형공사장 등 과적 근원지 방문을 통한 과적예방 사전계도

❍ 대형공사장 등 과적 유발업체 방문 과적예방 협조

❍ 대형 화물차량 운전자 과적예방 홍보물 배포

【4】운행제한 위반 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

❍ 과태료 체납자 재산조회 및 압류조치

- 재산조회 : 차량, 예금, 토지 등 / 수시

- 압류조치 : 재산 발견 즉시

- 징수활동 강화 : 문자, 전화, 방문을 통한 납부독촉 / 수시

※ 고액체납자(체납금액 100만원 이상) 주소지 방문 징수 및 전자예금압류 추진

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2021년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

(단위 : 건)

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
	5	3	2	-
시정요구	-	-	-	-
처리요구	1	-	1	-
제안사항	4	3	1	-

< 완료사항 >

① 안전한 교통환경을 위해 포트홀 저감 방안 모색(제안사항)

- 아스콘 포장 시 철저한 시공‧품질 관리로 포트홀 발생 최소화

- 스마트 도로유지관리시스템을 활용하여 포장도 노후 정도에 따른 우선순위 결정 및 보수공사 추진 등 체계적인 포장 유지관리

- 중차량 통행량이 많아 포트홀 발생이 잦은 구간 내 도로관리청 안내 표지판을 추가 설치하여 포트홀 발생 시 정확한 민원 접수 및 신속한 처리 도모

② 지역건설산업 활성화 및 수주율 향상 필요(제안사항)

- 지역제한입찰 및 지역의무공동도급(49%) 의무화를 지속적으로 추진하여 지역업체 참여율 제고

- 사업담당자 및 계약업무담당자 회의를 개최하여 신규집행사업 현황 파악, 지역업체 하도급 제고 및 지역업체 생산품 우선 사용 권장

- 입찰공고 시 하도급사 및 자재구입, 건설장비 사용 등 지역업체 사용 적극 권장 명시

- 지역건설산업 활성화를 위한 도의회 및 유관기관, 건설협회 등 협력체계 구축, 입찰공고 시 지역업체 참여 명문화 추진

- 관급자재 구매 시 연간 소요수량 분석을 통한 지역자재 구매 노력

③ 건설장비 요소수 품귀현상 해소화(제안사항)

- 요소수 필요수량 확보완료

※ 현재 시중 주유소에서 요소수 상시 구매 가능

- 매주 단위로 요소수 및 제설자재 잔량 확인 등 관리 철저

< 요소수 확보 현황>

(단위 : L / 기준일 : 2022. 1. 1.)

구분	전체 장비대수	요소수 사용장비대수	필요량* (①)	확보량 (②)	여유량 (②-①)	여유율(%)	비고
제설 장비	54	14	630	1,710	1,080	171

⇨ 제설대책기간** 필요 수량 초과 확보 완료(271%)

* 요소수 필요량 : 평균 운행일수(15일)*3L(1대 1일)*14대=630L

** 제설대책기간 : ’21.11.15. ~ ’22.3.15.(4개월)

< 추진중인 사항 >

① 운행제한 위반차량 단속 및 체납액 징수 철저(처리 요구사항)

❍ 과태료 체납자 재산조회 및 압류조치

- 재산조회 : 차량, 예금, 토지 등 / 수시

- 압류조치 : 재산 발견 즉시

- 징수활동 강화 : 문자, 전화, 방문을 통한 납부독촉 / 수시

※ 고액 체납자(체납금액 100만원 이상) 주소지 방문 징수 및 체납자 전자예금압류 추진(차량 압류 문제점 보완)

② 노후 교량‧도로 주기적인 점검을 통해 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(제안사항)

- ’21년 정밀안전점검(38개소) 및 정밀안전진단(12개소) 결과를 토대로 ’22년 교량 보수보강 추진

- ’22년 교량 정밀안전점검(42개소) 및 정밀안전진단(2개소)을 추진,선제적 재난대응 및 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

□ 제11대 5분발언 및 MOU체결 추진상황

【2-1】	5분발언 추진상황

< 총  괄 >

(단위 : 건)

연도별	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
계	1	0	1	0
2021	1	-	1	-
2020	0	-	-	-
2019	0	-	-	-
2018	0	-	-	-

< 추진중인 사항 >

① 빌바오 효과를 아십니까?(제329회 여운영 의원)

□ 빌바오 효과

❍ 한 도시의 건축물이 그 지역에 미치는 영향이나 현상으로, 도시의 세계적 건축물이 도시경쟁력을 높이는 효과를 나타내는 말로 사용됨

□ 충남미술관 사업개요

❍ 위    치 : 홍성군 홍북읍 도청대로 577(내포신도시 문화시설부지)

❍ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 26,680㎡(미술관 및 공영주차장)

❍ 사업기간 : 2021. 04. ~ 2024. 12.

❍ 총사업비 : 93,300백만원[국비 13,500 / 도비 79,800(부지매입비 13,300 포함)]

□ 추진상황

❍ ’21. 07. 19.  설계공모 작품 심사 및 당선자 결정

- 당선자 : ㈜디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소(서울)

- 공동응모자 : U.N.Studio(네덜란드)

- 작품설명 : 예술과 첨단기술을 새롭게 경험하고 지역사회와 함께 활기찬 미래문화를 창조하는 ‘문화 허브’개념으로 제안되어‘빌바오 효과’를 거둘 수 있는 작품을 선정함

□ 향후계획

❍ ’22. 02. : 기본 및 실시설계 추진

❍ ’25. 05. : 공사준공(예정)

【2-2】	MOU 체결 추진상황

< 총  괄 >

협약명	대상	협약일	협약내용	비고 (만료 등)
계	1건
운행제한차량 단속 상호협업	1건	2019. 5. 24.	과적차량 단속공조 등

< 추진중인 사항 >

① 운행제한 차량 단속 상호협업을 위한 업무협약

❍ 협약기관 : 공주지소 / 대전지방국토관리청 논산국토관리사무소

❍ 그동안 추진상황

- 협약체결 : 2019. 5. 24.(금)  ※ 논산국토관리사무소 대회의실

- 합동단속 : 14회(검차 333대, 적발 14대)

- 인적교류 : 4회(1분기당 단속원 2명 상호교류)

Ⅴ. 참 고 사 항

□ 2022년부터 달라지는 제도․시책

【1】중대재해처벌법 시행 (’22.1.27. 시행)

❍ 안전·보건 확보 의무 위반으로 발생한 중대산업재해·중대시민재해에 대한 사업주와 경영책임자 및 법인 등 처벌을 규정

❍ 중대재해 예방에 대한 사업주와 경영책임자등의 경각심을 제고하고 사업 또는 사업장에서 종사자의 생명과 신체를 보호하기 위한 안전보건관리체계를 구축

※ 산업안전보건법과 중대재해처벌법 비교

구분	산업안전보건법	중대재해처벌법(중대산업재해)
의무 주체	사업주(법인사업주+개인사업주)	개인사업주, 경영책임자 등
보호 대상	근로자, 수급인의 근로자, 법정특고 (택배기사, 보험설계사 등 시행령 제67조에 해당하는 9개 직종)	근로자, 노무제공자, 수급인, 수급인의 근로자 및 노무제공자
적용 범위	전 사업장 적용(안전보건관리체제는 50인 이상 적용)	5인 미만 사업장 적용제외 (50인 미만 사업장은 3년 후 시행)
재해 정의	중대재해: 산업재해 중 ① 사망자 1명 이상 ② 3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 이상 ③ 부상자 또는 직업성 질병자 동시 10명 이상	중대산업재해: 산안법상 산업재해 중 ① 사망자 1명 이상 ② 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상 ③ 동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성질병자 1년 내 3명 이상
의무 내용	사업주의 안전조치 ① 위험기계나 폭발성 물질 등 위험물질 사용시 ② 굴착·발파 등 위험한 작업시 ③ 추락·붕괴 우려 있는 등 위험한 장소에서 작업시 사업주의 보건조치 ① 유해가스나 병원체 등 위험물질 ② 신체에 부담을 주는 등 위험한 작업 ③ 환기·청결 등 적정기준 유지	개인사업주 또는 경영책임자등의 종사자에 대한 안전·보건 확보 의무 ① 안전보건관리체계의 구축·이행 ② 재해 재발방지 대책의 수립·이행 ③ 중앙행정기관 등이 시정 등을 명한 사항 이행 조치 ④ 안전·보건관련 의무이행에 필요한 관리상의 조치
처벌 수준	자연인 (사망) 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 (안전·보건조치위반) 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금 법인 (사망) 10억원 이하 벌금 (안전·보건조치위반) 5천만원 이하 벌금	자연인 (사망) 1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금(병과 가능) (부상·질병) 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 법인 (사망) 50억원 이하 벌금 (부상·질병) 10억원 이하 벌금

□ 각종 위원회 및 기관‧단체 현황

【1】충청남도종합건설사업소 기술자문위원회

❍ 종합건설사업소에서 추진하는 건설공사에 대한 설계 및 시공         검토, 공사 방법 등 기술적 제언 및 자문을 구하기 위함

- 구성 : 총 55명(당연직 7명, 외부위원* 48명)

- (위원장) 종합건설사업소장

(당연직) 행정관리과장, 도로건설과장, 공공건축과장, 하천개발과장, 공주지소장, 홍성지소장

*외부위원(분야별) / 건설분야 6급이상 공무원, 대학의 조교수급 이상 및

기술사 자격을 취득한 자

(2022. 01. 01. 기준)

구분	합계	도로	교통	토질	구조	하천	건축	조경	기계 전기,소방	환경
계	48	9	5	9	9	6	4	1	2	3

□ 주요 사업별 예산확보 현황

【1】분야별 사업추진 내역

(2022. 01. 01. 기준)

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		303	308.78	366,870
도 로	계	35	168.48	73,579	도로건설과
	국 지 도	8	74.63	17,957
	지 방 도	21	87.86	38,562
	기타도로	6	5.99	17,060
공공건축		32	-	101,457	공공건축과
지방하천정비		33	131.49	52,440	하천개발과
재해복구		3	8.2	32,623
지역개발		1	0.61	12,318
도로유지관리 ※ 자체사업 포함		117	-	56,225	공주지소
		82	-	38,228	홍성지소

【2】도로 확포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 01. 01.기준)

총 괄		‘22년 준공지구		계 속 지 구		‘22년 신규지구
35건 / 73,579백만원		2건 / 6,560백만원		31건 / 60,533백만원		2건 / 6,486백만원
․국지도 8 / 17,957		․국지도 0 / -		․국지도 7 / 11,971		․국지도 1 / 5,986
․지방도 21 / 38,562		․지방도 0 / -		․지방도 20 / 38,062		․지방도 1 / 500
․기 타 6 / 17,060		․기 타 2 / 6,560		․기 타 4 / 10,500		․기 타 0 / 0

사 업 명		사업량		사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
				전 체	기시행	2022년	장 차
총 계		35지구 (164.48㎞)		1,511,268	314,632	73,579	1,123,057
국 지 도		8지구 (74.63km)		521,384	197,501	17,957	305,926
계속지구	소 계	7지구 (64.63km)		473,084	197,115	11,971	263,998
	청양～신양IC	연장=16.2km 폭=10.0m		55,223	47,225	2,913	5,085	2017.05.29. ∼ 2023.06.25.	64 (공사중)
	이호～양곡	연장=4.85km 폭=10.0m		25,111	20,185	370	4,556	2018.09.17. ～ 2023.08.21.	57 (공사중)
	당진～서산	연장=19.1km 폭=17.5m		175,500	125,619	1,766	48,115	2019.04.08. ～ 2027.04.05	1 (정지)	보상
	성환∼입장	연장=10.3km 폭=17.5m		99,100	2,928	405	95,767	2018～2028	대전청 설계중
	우성∼이인	연장=0.7km 폭=10.0m		33,957	386	1,505	32,066	2019～2026	대전청 설계중
	장척∼목현	연장=3.67km 폭=17.5m		34,578	386	906	33,286	2019～2027	대전청 설계중
	임천∼강경	연장=9.81km 폭=10.5m		49,615	386	4,106	45,123	2019～2027	대전청 설계중
신규지구	소 계	1지구 (10.0km)		48,300	386	5,986	41,928
	금산~진산	연장=10.0km		48,300	386	5,986	41,928		국토부 설계중 (19)	신규
지 방 도		21지구 (87.86km)		934,198	108,060	38,562	787,576
계속지구	소 계	20지구 (86.86km)		918,758	107,760	38,062	772,936
	규암～청남	연장=2.29km 폭= 10.0m		30,024	23,802	3,518	2,704	2018.03.19. -2022.09.17	81 (공사중)
	대술～정안	연장=4.8km 폭= 9.5～11.7m		22,501	13,430	3,500	5,571	2019.07.22. -2023.07.20	43 (공사중)
	어천～공주 (4차)		연장=3.95km 폭= 10.0m	48,900	18,846	2,400	27,654	2020.12.23. -2026.12.21	5 (공사중)
	오천우회		연장=3.98km 폭= 9.5m	22,449	10,605	2,600	9,244	2020.10.13. -2026.10.09	27 (공사중)
	삭선～원북		연장=5.8km 폭= 20.0m	46,514	7,760	6,500	32,254	2017～2027	보상중
	기지시～한진		연장=9.3km 폭= 18.0m	143,171	14,265	7,000	121,906	2017～2030	보상중
	무창포IC～ 웅천		연장=1.46km 폭=21.75~23.0m	15,626	6,405	2,500	6,721	2020.06.09. ∼2025.05.07	1	보상중
	두마～노성		연장=9.25km 폭=10.0m	103,453	2,549	3,294	97,610	2018～2030	설계중
	화성～장곡		연장=2.4km 폭=10.0m	13,306	900	500	11,906	2018～2024	보상중
	구룡～용두		연장=1.3km 폭=10.0m	10,795	609	500	9,686	2018～2025	보상중
	밀두～대음		연장=3.58km 폭=18.75m	49,170	970	2,000	46,200	2018～2025	설계중
	산동～상덕		연장=7.74km 폭=20.0m	128,659	3,130	500	125,029	2018～2030	설계중
	반계도로		연장=1.25km 폭=10.0~19.2m	9,783	663	0	9,120	2017.～2023.	보상중
	보산원도로		연장=0.5km 폭=9.5m	3,000	145	250	2,605	2017.～2023.	설계중
	서면～비인		연장=4.9km 폭=20.0m	29,100	1,010	400	27,690	2020～2027	설계중
	복수～진산		연장=4.46km 폭=19.5m	107,063	1,721	1,300	104,042	2019～2029	설계중
	광시～운곡		연장=7.0km 폭=10.0m	46,500	290	700	45,510	2020~2029	설계중
계속지구	노화～평촌		연장=3.7km 폭=20.0m	34,723	190	200	34,333	2020~2029	설계예정
	동해～부곡		연장=8.0km 폭=10.0m	44,021	220	200	43,601	2020~2029	설계예정
	고암~역재		연장=1.2km 폭=20.0m	10,000	250	200	9,550	2020～2027	설계예정
신규지구	소 계		1지구 (1.0km)	15,440	300	500	14,640
	왕암도로		연장=1.0km 폭=10.0m	15,440	300	500	14,640	2020~2025	설계중	신규 (65)
기타도로사업			6지구 (5.99km)	55,686	9,071	17,060	29,555
준공지구	소 계		2지구 (2.4km)	13,500	3,340	6,560	3,600
	장평지구		연장=1.4km 폭=15.0~19.5m	5,500	1,435	3,980	85	2019. 12. 20. ~ 2022. 7. 31.	34 (공사중)
	정산지구		연장=1.0km 폭=13.0~15m	8,000	1,905	2,580	3,515	2020.06.04. ~ 2023. 8. 3.	49 (공사중)
계속지구	소 계		4지구 (3.59km)	42,186	5,731	10,500	25,955
	원청사거리		연장=0.89km 폭=3.5～20m	14,075	1,355	6,000	6,720	2020.07. ～ 2023.07.	3 (공사중)	보상
	웅천산단 진입도로		연장=1.01km 폭=19.7m	7,111	2,909	4,000	202	2020.06.04. ～ 2023.06.03.	1 (공사중)	보상
	합곡지구		연장=0.95km 폭=10.0m	18,000	267	400	17,333	2021.02. ～ 2025.12.	설계중
	효제교차로		연장=0.74km 폭=10.0m	3,000	1,200	100	1,700	2021～2023	설계중

【3】공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 01. 01.기준)

총 계		’22년도 준공사업		계 속 사 업		’22년도 신규사업
32건 / 101,457		7건 / 19,897		11건 / 69,451		14건 / 12,109

사 업 명			사업량	사업비				사업기간	공정률 (%)	비고
				전체	기시행	2022년	장차
합계				635,300	73,780	101,457	460,063
준공사업	연번	소계	7건	40,502	17,610	19,897	2,995
	1	충남지식 산업센터 건립공사	지하1층 지상6층 12,486㎡	29,346	15,671	13,675	0	’18.11.～’22.10.	30	공사중
	2	천안서북소방서 다목적훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 411㎡	784	784	0	0	’21.03.～’22.08.	-	공사 준비중
	3	수산종자 연구센터 건립공사	지상3층 2,024㎡	7,220	305	3,920	2,995	’20.09.～’22.12.	-	공사 준비중
	4	공주소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 432㎡	947	0	947	0	’21.03.～’22.09.	-	공사 발주 준비중
	5	태안소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사	지상4층 455㎡	860	0	860	0	’21.03.～’22.09.	-	공사 발주 준비중
	6	계룡소방서 다목적훈련탑 증축공사	지상4층 279㎡	495	0	495	0	’21.03.～’22.08.	-	공사 발주 준비중
	7	당진 합덕119 안전센터 증축공사	지상1층 75㎡	850	850	0	0	’21.09.～’22.08.	-	설계중
계속사업	연번	소계	11건	464,917	53,122	69,451	342,344
	8	충남소방 복합시설 건립공사	10개동 17,042㎡	76,649	15,503	10,000	51,146	’17.10.～’24.03.	1	공사중
	9	충남 스포츠센터 건립공사	지하1층 지상2층 13,344㎡	47,500	15,261	16,600	15,639	’18.08.～’23.04.	14	공사중
	10	대천항 관공선 통합사무실 건립공사	지상2층 1,370㎡	4,878	772	1,952	2,154	’20.08.～’23.01.	-	공사 발주 준비중
	11	충남국제전시 컨벤션센터 건립공사	지하1층 지상4층 51,900㎡	160,300	4,708	16,762	138,830	’20.10.～25.06.	-	설계중
	12	충남 사회적경제 혁신타운 건립공사	지하1층 지상3층 7,500㎡	28,000	12,440	-	15,560	’21.06.～’24.07.	-	설계중
	13	충남 육아종합 지원센터 건립공사	지하2층 지상3층 3,458㎡	13,034	1,000	6,643	5,391	’20.10.～’23.09.	-	설계중
	14	금산소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	7,269	210	415	6,644	’21.01.～’24.12.	-	군관리계획 용역 중
	15	충남 장애인가족 힐링센터	지하1층 지상3층 6,250㎡	26,929	2,130	6,046	18,753	’21.07.～’24.12.	-	설계 공모중
	16	당진소방서 증축공사	지하1층 지상4층 2,300㎡	6,858	394	4,038	2,426	’21.07.～’23.09.	-	설계 공모중
	17	충남미술관 건립공사	지하2층 지상4층 6,680㎡	80,000	-	2,995	77,005	’21.03.～’24.12.	-	설계 준비중
	18	안면도 지방정원 가든센터 건립공사	지상2층 2,035㎡	13,500	704	4,000	8,796	’21.07.～’24.06.	-	설계 준비중

사 업 명			사업량	사업비				의뢰 예정	공정률 (%)	비고
				전체	기시행	2022년	장차
신규사업 신규사업	연번	소 계	14건	129,881	3,048	12,109	114,724
	19	충남광역형 탄소중립 연수원 건립공사	신축 1,550㎡ 리모델링 2,526㎡	19,800	2,450	6,000	11,350	‘22. 01.	-	-
	20	통일 플러스센터 건립공사	신축 2,800㎡	12,200	0	40	12,160	‘22. 01.	-	-
	21	충남 소통협력 공간 조성공사	증축 1,450㎡ 리모델링 4,040㎡	6,000	598	2,701	2,701	‘22. 01.	-	-
	22	청양119구조구급센터 증축공사	증축 200㎡	599	0	599	0	‘22. 01.	-	-
	23	충남도립 요양원 기능보강공사	금속지붕재 설치및방수	280	0	280	0	‘22. 01.	-	-
	24	종건소 홍성지소 지붕교체공사	금속지붕재 설치및방수	203	0	203	0	‘22. 01.	-	-
	25	광역해양자원 순환센터 건립공사	신축 4,800㎡	15,000	0	180	14,820	‘22. 02.	-	-
	26	판교 119안전센터 건립공사	신축 1,100㎡	3,063	0	200	2,863	‘22. 02.	-	-
	27	공주소방서 비상대기소 증축공사	증축 190㎡	606	0	606	0	‘22. 02.	-	-
	28	산불 대응센터 증축공사	증축 180㎡	400	0	400	0	‘22. 02.	-	-
	29	동학사 119안전센터 건립공사	신축 1,100㎡	2,500	0	300	2,200	‘22. 06.	-	-
	30	여성가족 플라자 건립공사	신축 7,650㎡	35,410	0	600	34,810	‘22. 07.	-	-
	31	청소년 진흥원 건립공사	신축 6,511㎡	27,820	0	0	27,820	‘22. 07.	-	-
	32	노동안전 문화회관 건립공사	신축 1,980㎡	6,000	0	0	6,000	‘22. 10.	-	-

【4】지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

총 괄		‘22년 준공사업		계 속 사 업		‘22년 신규사업
36건 / 85,063		3건 / 2,477		29건 / 80,186		4건 / 2,400
지방하천 33 / 52,440		지방하천 3 / 2,477		지방하천 26 / 47,563		지방하천 4 / 2,400
재해복구 3 / 32,623		재해복구 - / -		재해복구 3 / 32,623		재해복구 - / -

<총  괄>

(단위 : 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비				비고
			계	기시행	2022년	장차
합 계	36지구	139.69	786,202	162,583	85,063	538,556
지방하천 정비사업	33지구	131.49	717,925	126,929	52,440	538,556	준공 3, 계속 26, 신규 4
지방하천 재해복구	3지구	8.2	68,277	35,654	32,623	-	계속 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

(단위 : 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2022년	장차
계	33지구			131.49	717,925	126,929	52,440	538,556
준 공 사업	소계 (3지구)			9.9	56,845	54,368	2,477	0
	석남천	서산	예천 석남	2.7	21,371	19,934	1,437	0	’17.05.∼’22.08.	85	공사중
	석림천	서산	석림	0.4	711	278	433	0	’20.12.∼’22.12.	-	공사중
	연산천	계룡 논산	엄사 연산	6.8	34,763	34,156	607	0	’18.03.∼’22.03.	95	공사중
계 속 사 업 계 속 사업	소계 (26지구)			107.58	578,855	72,561	47,563	458,731
	화산천	서천	기산 화양	2.1	38,748	26,251	6,000	6,497	’18.03.∼’23.05.	70	공사중
	병천천	천안	병천	8.6	25,093	6,274	3,200	15,619	’17.12.∼’23.07.	12	공사중
	광기천	천안	병천	3.4	25,823	4,560	3,000	18,263	’18.01.∼’23.11.	14	공사중
	주교천	부여	주교	3.5	23,972	2,520	2,500	18,952	’20.12.∼’24.03.	5	공사중
	명천천	서산	성연	1.1	3,047	774	2,000	273	’21.03.∼’23.03.	2	공사중
	중산천	공주	금흥	0.7	17,271	6,468	3,000	7,803	’20.10.∼’23.03.	28	공사중
	장승천	청양	청양	3.3	14,301	5,072	2,500	6,729	’20.12.∼’23.08.	8	공사중
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	1.5	23,170	1,844	3,000	18,326	’19.02.∼’23.12.	4	공사중
	신양천	논산	연무	4.3	29,199	1,772	2,500	24,927	’19.01.∼’23.12.	2	공사중
	와룡천	홍성	갈산 결성	9.98	25,247	1,676	1,500	22,071	2019.～2023.	-	설계중
	도마천	서천	문산	7.3	23,851	1,233	1,500	21,118	2019.～2025.	-	설계중
	용요천	태안	근흥	3.3	45,278	1,349	1,500	42,429	2019.～2026.	-	설계중
	왕대천	계룡	두마	2.7	6,497	495	1,500	4,502	2019.～2023.	-	설계중
	간치천	보령	주산	4.5	30,623	1,388	1,500	27,735	2019.～2024.	-	설계중
	판교천	서천	종천 서천	2.6	14,376	754	1,500	12,122	2020.～2024.	-	설계중
	청지천	서산	장홍 석림	3.4	29,431	1,005	1,500	26,926	2020.～2024.	-	설계중
	왕암천	논산	가야곡	9.0	24,870	925	1,500	22,445	2020.～2024.	-	설계중
	오봉천	당진	송악 신평	3.0	23,699	1,106	1,500	21,093	2020.～2024.	-	설계중
	칠산천	부여	임천	5.5	25,373	1,392	1,500	22,481	2020.～2024.	-	설계중
	진산천	금산	진산	3.0	7,420	750	1,500	5,170	2020.～2024.	-	설계중
	유등천	금산	복수	6.0	14,323	1,296	1,213	11,814	2018.～2022.	-	설계중 (하천과)
	둔포천	아산	둔포	4.5	40,222	843	250	39,129	2021.∼2025.	-	설계중
	솔리천	서천	장항	1.3	4,997	401	500	4,096	2021.∼2025.	-	기본계획 (하천과)
	초대천	당신	신평	6.3	37,394	1,009	700	35,685	2021.∼2025.	-	설계중
	양촌천	논산	양천	3.4	15,832	802	200	14,830	2021.∼2025.	-	설계중
	판정천	천안	입장	3.3	8,798	602	500	7,696	2021.∼2025.	-	설계중
신규 사업	소계 (4지구)			14.01	82,225	-	2,400	79,825
	도곡천	계룡	엄사	1.87	15,086	-	600	14,486	2022.∼2026	-
	성연천	서산	성연	1.23	14,039	-	600	13,439	2022.∼2026	-
	구룡천	천안	신방	1.41	18,655	-	600	18,055	2022.∼2026	-
	삽교천	홍성	홍동	9.5	34,445	-	600	33,845	2022.∼2026	-

<지방하천 재해복구사업>

(단위 : 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2022년	장차
계	3지구			8.2	68,277	35,654	32,623	-
계속사업	금곡천	아산	배방	1.8	9,045	5,439	3,606	-	’20.11.∼’22.12.	6	공사중
	약봉천	아산	송악	2.9	21,853	13,169	8,684	-	’20.11.∼’22.12.	7	공사중
	온양천	아산	송악	3.5	37,379	17,046	20,333	-	’20.11.∼’22.12.	8	공사중

【5】지역개발사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

총 괄		‘22년도 준공사업		계 속 사 업		‘22년도 신규사업
1건 / 12,318		-		1건 / 12,318백만원		-

연번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				공사기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2022년	장차
합 계		1지구		0.61	36,646	24,328	12,318	0
계속사업	태안 기업도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.6 (폭=25.0m)	36,646	24,328	12,318	0	’20.02.∼’23.02.	50	공사중

【6】도로 유지관리사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

총 괄		계속지구		신규지구
199지구 94,453백만원		50지구 35,222백만원		149지구 59,231백만원
․자체사업 94 / 17,061		․자체사업 12 / 1,254		․자체사업 82 / 15,807
․재배정사업 96 / 63,370		․재배정사업 35 / 32,903		․재배정사업 61 / 30,467
․균특사업 -		․균특사업 -		․균특사업 -
․위임국도 9 / 14,022		․위임국도 3 / 1,065		․위임국도 6 / 12,957

<공주․홍성지소>                                      (단위 : 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		공주		홍성		합계		공주		홍성
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	199	94,453	50	35,222	33	29,017	17	6,205	149	59,231	84	27,208	65	32,023
자체사업	94	17,061	12	1,254	9	1,145	3	109	82	15,807	51	7,940	31	7,867
재배정사업	96	63,370	35	32,903	24	27,872	11	5,031	61	30,467	30	12,421	31	18,046
균특사업	0	0	0	0					0	0
위임국도	9	14,022	3	1,065			3	1,065	6	12,957	3	6,847	3	6,110

<공주지소>                                       (단위 : 백만원, 2022. 01. 01.현재)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			117개 지구			56,225
계(계속지구)			33개 지구			29,017
계속지구	소계	자 체 사 업	9개 지구			1,145
	자체사업	2022년 천안지구 유지관리사업 실시설계용역	천안		1식	33	21.12.~22.02.		용역중
		2022년 공주지구 유지관리사업 실시설계용역	공주		1식	20	21.12.~22.02.		용역중
		2022년 논산지구 유지관리사업 실시설계용역	논산		1식	28	21.12.~22.02.		용역중
		2022년 서천지구 유지관리사업 실시설계용역	서천		1식	26	21.11.~22.01.		용역중
		2022년 청양지구 유지관리사업 실시설계용역	청양		1식	28	21.11.~22.01.		용역중
		2022년 오목도로 외 4개소 인도설치공사 실시설계용역	공주지소		1식	38	21.12.~22.02.		용역중
		서천지구 지방도 위험구간 미끄럼방지시설 설치공사	서천		1식	78	21.12.~22.01.	10	공사중
		교량 및 터널 정비사업	공주지소		1식	844	21.12.~22.12.		발주준비중
		재해대책 추진	공주지소		1식	50	21.11.~22.03.	38	추진중
	소계	재배정 사업	24개 지구			27,872
	재배정사업	KTX공주역 진입지방도 선형개량사업	공주	이인	1식	4,064	19.01.~22.12.	40	공사중
		현내도로 선형개량공사	부여	석성	1식	1,055	21.11.~23.11.	10	공사중
		지방도611호 계동도로 선형개량공사	서천	마서	L=0.4km	439	21.12.~22.08.	10	공사중
		종천도로 선형개량공사	서천	종천	L=0.1km	350	22.03.~22.08.		발주준비중
		둔덕도로 선형개량공사	서천	서천	L=0.1km	400	22.03.~22.08.		발주준비중
		안당도로 위험도로 구조개선공사	서천	마산	1식	674	21.12.~23.12.	10	공사중
		광금도로 선형개량공사	청양	대치	1식	1,674	19.12.~23.02.	50	공사중
		남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사	청양	남양	1식	520	21.04∼22.03.		용역중
		양촌 모촌지구 위험도로 개량공사	논산	양촌	1식	67	21.10.~22.08.		용역중
		갓길정비공사	청양	님양	L=1,6km	233	21.11∼22.05.	10	공사중
		터널방재시설 설치(곡두터널)	공주	정안	1식	70	21.12.∼22.02.		용역중
		계동도로 보행로 개설사업(명품도로)	서천	마서	L=1.4km	289	21.12.~22.06.	10	공사중
		군사도로 확포장공사	서천	서천	L=0.2km	236	21.05.~22.04.	10	공사중
		청양 비봉 중묵도로 위험구간 개선공사	청양	비봉	1식	200	21.01∼22.12.		발주준비중
		웅천교 재가설공사	논산	양촌	1식	600	21.12.~22.04.	80	공사중
		공공시설물 내진보강	공주지소		4개소	1,030	21.11.~22.12.	30	공사중
		지방도 교량안전진단	공주지소		1식	31	22.01.~22.02.	90	공사중
		지방도 7.28~8.11 수해복구 사업	공주지소		1개소	1,325	20.10.~22.12.		용역중
		우곤도로 위험도로 선형개량사업	논산	성동	1식	1,230	17.06.~23.03.	60	공사중
		석막도로 선형개량공사	금산	진산	1식	3,716	20.12.~24.01.	15	공사중
		천을도로 선형개량공사	금산	군북	1식	1,560	20.01.~23.12.	10	공사중
		노성도로 선형개량사업	논산	노성	1식	3,074	21.07.~23.12.	10	공사중
		광암교 재가설공사	청양	운곡	1식	2,100	22.12.~22.01.		발주준비중
		저곡지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	금산	제원	1식	2,935	19.01.~22.03.	70	공사중
계(신규지구)			84개 지구			27,208
신규지구	소계	자 체 사 업	51개 지구			7,940
	자체사업	국지도70호 수향도로 배수로 정비공사	천안	성환	L=0.2km	40	22.01.~22.06.		발주준비중
		국지도57호 기로도로 차선도색공사	천안	입장	L=2.5km	13	22.01.~22.06.		발주준비중
		지방도691호 차선도색공사	천안	성남	L=2.0km	10	22.01.~22.06.		발주준비중
		동해도로 배수로 정비공사	공주	유구	L=0.1km	26	22.01.~22.06.		발주준비중
		안양도로 배수로 정비공사	공주	우성	L=0.1km	22	22.01.~22.06.		발주준비중
		문금도로 사면정비공사	공주	유구	L=0.1km	31	22.01.~22.06.		발주준비중
		가교도로 차선도색공사	공주	사곡	L=0.4km	40	22.01.~22.06.		발주준비중
		달산도로 배수로 정비공사	공주	이인	L=0.2km	100	22.01.~22.06.		발주준비중
		지경도로 배수로 정비공사	논산	상월	L=1.0km	100	22.01.~22.06.		발주준비중
		숙진도로 배수로 정비공사	논산	상월	L=0.2km	20	22.01.~22.06.		발주준비중
		대촌도로 배수로 정비공사	논산	상월	L=1.0km	100	22.01.~22.06.		발주준비중
		지경도로 배수시설 정비공사	논산	상월	L=1.0km	100	22.01.~22.06.		발주준비중
		동산도로 배수로 정비공사	논산	연무	L=0.2km	15	22.01.~22.06.		발주준비중
		목곡도로 배수로 정비공사	논산	가야곡	L=0.2km	15	22.01.~22.06.		발주준비중
		연무도로 차선도색 정비공사	논산	연무	L=0.5km	50	22.01.~22.06.		발주준비중
		구석도로 배수로 정비공사	금산	남이	L=0.2km	20	22.01.~22.06.		발주준비중
		신정도로 배수로 정비공사	금산	남일	L=0.2km	15	22.01.~22.06.		발주준비중
		신천도로 배수로 보수공사	금산	남일	L=0.2km	25	22.01.~22.06.		발주준비중
		역평도로 배수로 정비공사	금산	남이	L=0.5km	50	22.01.~22.06.		발주준비중
		두두도로 배수로 정비공사	금산	군북	L=0.3km	32	22.01.~22.06.		발주준비중
		구석도로 배수로 정비공사	금산	남이	L=0.3km	32	22.01.~22.06.		발주준비중
		구석도로 사면정비공사	금산	남이	1식	60	22.01.~22.06.		발주준비중
		장암도로 차선도색공사	부여	장암	L=0.3km	28	22.01.~22.06.		발주준비중
		정동도로 배수 및 인도정비공사	부여	부여	L=0.1km	5	22.01.~22.06.		발주준비중
		경둔도로 외 1개소 배수로 정비공사	부여	은산	L=0.4km	40	22.01.~22.06.		발주준비중
		삼산도로 배수로 정비공사	부여	외산	L=0.2km	20	22.01.~22.06.		발주준비중
		장항도로 배수로 정비공사	부여	외산	L=0.1km	10	22.01.~22.06.		발주준비중
		양화도로 차선도색공사	부여	양화	L=0.4km	40	22.01.~22.06.		발주준비중
		유도레일 설치공사	부여	은산	1식	3	22.01.~22.06.		발주준비중
		종천도로 배수로 정비공사	서천	종천	1식	40	22.01.~22.06.		발주준비중
		벽오도로 배수로 정비공사	서천	마산	1식	10	22.01.~22.06.		발주준비중
		계동도로 진입로 개선공사	서천	마서	1식	20	22.01.~22.06.		발주준비중
		원수도로 배수로 정비공사	서천	장항	1식	15	22.01.~22.06.		발주준비중
		도둔도로 배수로 정비공사	서천	서면	1식	10	22.01.~22.06.		발주준비중
		안당도로 배수로 정비공사	서천	마산	1식	15	22.01.~22.06.		발주준비중
		원수도로 유턴차로 설치공사	서천	장항	1식	150	22.01.~22.06.		발주준비중
		신원도로 배수로 정비공사	청양	비봉	1식	35	22.01.~22.06.		발주준비중
		금정도로 배수로 정비공사	청양	남양	1식	15	22.01.~22.06.		발주준비중
		대흥도로 차선도색공사	청양	청남	L=2.3㎞	50	22.01.~22.06.		발주준비중
		광금도로 차선도색공사	청양	대치	L=2.0㎞	60	22.01.~22.06.		발주준비중
		화산도로 차선도색공사	청양	장평	L=3.0㎞	80	22.01.~22.06.		발주준비중
		PMS 포장도 보수공사	전노선		1식	3,618	22.01.~22.06.		발주준비중
		제초작업	전노선		1식	700	22.01.~22.12.		발주준비중
		긴급 보수공사	전노선		1식	210	22.01.~22.12.		발주준비중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	22.01.~22.12.		발주준비중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	22.01.~22.12.		발주준비중
		안전시설물 정비사업	전노선		1식	733	22.01.~22.12.		발주준비중
		교량 및 터널 정비사업	전노선		1식	200	22.01.~22.12.		발주준비중
		재해대책 추진 장비임차료	전노선		1식	300	22.01.~22.12.		발주준비중
		재해대책 추진 자재구입	전노선		1식	227	22.01.~22.12.		발주준비중
		비점오염저감시설 운영 유지관리	전노선		1식	60	22.01.~22.12.		발주준비중
	소계	재배정사업	30개 지구			12,421
	재배정사업	오목도로 인도설치공사	천안	성거	1식	50	22.01.~22.09.		발주준비중
		양대도로 인도설치공사	천안	입장	1식	150	22.01.~22.09.		발주준비중
		대산도로 인도설치공사	공주	정안	1식	200	22.01.~22.09.		발주준비중
		유마교 인도설치공사	공주	유구	1식	500	22.01.~22.09.		발주준비중
		양촌도로 인도설치공사	논산	양촌	1식	300	22.01.~22.09.		발주준비중
		복수도로 인도설치공사	금산	복수	1식	200	22.01.~22.09.		발주준비중
		증산도로 인도설치공사	부여	석성	1식	300	22.01.~22.09.		발주준비중
		지611호 인도설치공사(2차)	서천	마서	1식	300	22.01.~22.09.		발주준비중
		인양도로 인도설치공사	청양	인양	1식	200	22.01.~22.09.		발주준비중
		용마리 갓길정비공사(2차)	청양	남양	1식	300	22.01.~22.09.		발주준비중
		도로대장 유지관리	공주지소		1식	20	22.01.~22.06.		발주준비중
		운행방향 유도레인 설치	공주지소		1식	30	22.01.~22.06.		발주준비중
		지방도 안전시설(방호울타리)정비	공주지소		전노선	1,500	22.01.~22.06.		발주준비중
		로드킬 방지시설 설치공사	공주지소		1식	200	22.01.~22.06.		발주준비중
		지방도 표지판 정비	공주지소		1식	100	22.01.~22.06.		발주준비중
		도로표지(LED) 개선사업	공주지소		1식	150	22.01.~22.06.		발주준비중
		급경사지 붕괴위험지역 지정	공주지소		1식	100	22.01.~22.06.		발주준비중
		소음저감시설 설치	공주지소		1식	200	22.01.~22.06.		발주준비중
		명품도로 조성 추진	서천	마서	1식	400	22.01∼22.12.		발주준비중
		차선 시인성 개선사업	공주지소		1식	200	22.01.~22.06.		발주준비중
		도로유지보수(포장도 정비)	공주지소		1식	1,500	22.01.~22.06.		발주준비중
		서북 성거도로 교차로 개선공사	천안	성거	1식	300	22.01.~22.07.		발주준비중
		덕학도로 교차로 개선공사	공주	의당	1식	250	22.01.~22.12.		발주준비중
		중장삼거리 교차로 개선공사	공주	중장	1식	350	22.01.~23.07.		발주준비중
		유산 회전교차로 개선공사	서천	한산	1식	250	22.01∼22.12.		발주준비중
		대치 탄정도로 교차로 개선공사	청양	대치	1식	50	22.01∼22.12.		발주준비중
		덕지도로 위험도로 구조개선공사	공주	탄천	1식	571	22.01.~22.12.		발주준비중
		하황도로 외 1개소 구조개선 공사	부여	장암	1식	350	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도 교량안전진단	공주지소		1식	1,850	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도 교량 유지관리	공주지소		1식	1,550	22.01.~22.12.		발주준비중
	소계	위 임 국 도	3개 지구			6,847
	위임국도	도로안전 및 환경개선	전노선		1식	3,953	22.01~22.12		발주준비중
		국도유지운영	전노선		1식	1,363	22.01~22.12		발주준비중
		도로유지보수	전노선		1식	1,531	22.01~22.12		발주준비중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

<홍성지소>                                      (단위 : 백만원, 2022. 01. 01. 기준)

사업명			위 치		사업량	사업비	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			82개 지구			38,228
계(계속지구)			17개 지구			6,205
계속지구	소계	자체 사업	3개 지구			109
	자체사업	국지도70호 서원지구 법면보강공사	아산	염치	1식	88	21.10.~22.01.	90	공사중
		지방도609,624호 도로구역 결정(변경) 고시용역	아산,홍성		1식	5	21.05.~22.02.	80	용역중
		홍성,예산지역 보행자용 방호울타리 설치공사	홍성,예산		1식	16	21.12.~22.03.	10	공사중
	소계	재배정 사업	11개 지구			5,031
	재배정사업	지방도607호 황교도로 선형개량공사	보령	웅천	L=0.24km	476	21.10~22.08.	35	공사중
		지방도617호 도화담교 재가설공사 실시설계용역	보령	미산	1식	24	21.03.~22.03.	90	용역중
		지방도617호 도화담교 재가설공사	보령	미산	1개소	2,707	21.12.~23.06.		발주준비중
		국지도70호 서원지구 법면보강공사	아산	염치	1식	80	21.10.~22.01.	90	공사중
		지방도615호 교로도로 인도설치공사	당진	성문	L=0.53km	70	21.11.~22.11.	80	공사중
		지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	414	20.12.~23.02.	40	공사중
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.84km	668	21.05~23.04.	15	공사중
		지방도634호 황촌도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.36km	155	21.04.~22.04.	50	공사중
		안개상습구간 개선공사	서산,홍성,예산,태안		1식	303	21.11.~22.03.	30	공사중
		22년 도로유지보수공사 실시설계용역	전노선		1식	114	21.12.~22.02.	10	용역중
		22년 인도설치공사 실시설계용역	전노선		1식	20	21.12.~22.03.	10	용역중
	소계	위 임 국 도	3개 지구			1,065
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	447	22.01.~22.12.		공사중
		도로유지보수	전노선		1식	167	22.01.~22.12.		공사중
		위험도로개선	전노선		1식	451	22.01.~22.12.		공사중
계(신규지구)			65개 지구			32,023
신규지구	소계	자 체 사 업	31개 지구			7,867
	자체사업	보령지역 포장도 보수공사	보령		1식	740	22.01.~22.06.		용역중
		보령지역 도로 유지보수 단가계약	보령		1식	30	22.01.~22.12.		용역중
		아산지역 포장도 보수공사	아산		1식	670	22.01.~22.06.		용역중
		지방도616호 동화도로 배수시설 정비공사	아산	송악	L=0.30km	50	22.01.~22.06.		용역중
		아산지역 도로 유지보수 단가계약	아산		1식	50	22.01.~22.12.		용역중
		서산지역 포장도 보수공사	서산		1식	610	22.01.~22.06.		용역중
		지방도634호 덕송도로 배수시설 정비공사	서산	팔봉	L=0.30km	30	22.01.~22.06.		용역중
		지방도649호 통로박스 보안등 설치공사	서산	부석	1식	100	22.01.~22.06.		용역중
		서산지역 도로 유지보수 단가계약	서산		1식	30	22.01.~22.12.		용역중
		당진지역 포장도 보수공사	당진		1식	675	22.01.~22.06.		용역중
		지방도615호 통정도로 배수시설 정비공사	당진	통정	L=0.45km	45	22.01.~22.06.		용역중
		당진지역 도로 유지보수 단가계약	당진		1식	50	22.01.~22.12.		용역중
		홍성지역 포장도 보수공사	홍성		1식	710	22.01.~22.06.		용역중
		국지도96호 대평도로 배수시설 정비공사	홍성	광천	L=0.30km	30	22.01.~22.06.		용역중
		홍성지역 도로 유지보수 단가계약	홍성		1식	30	22.01.~22.12.		용역중
		예산지역 포장도 보수공사	예산		1식	690	22.01.~22.06.		용역중
		지방도609호 봉림도로 배수시설 정비공사	예산	봉산	L=0.40km	40	22.01.~22.06.		용역중
		지방도619호 마교도로 배수시설 정비공사	예산	봉산	L=0.10km	10	22.01.~22.06.		용역중
		예산지역 도로 유지보수 단가계약	예산		1식	30	22.01.~22.12.		용역중
		태안지역 포장도 보수공사	태안		1식	705	22.01.~22.06.		용역중
		국지도96호 용신도로 배수시설 정비공사	태안	근흥	L=0.35km	35	22.01.~22.06.		용역중
		태안지역 도로 유지보수 단가계약	태안		1식	30	22.01.~22.12.		용역중
		지방도 풀깎기	전노선		1식	500	22.01.~22.12.		발주준비중
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	22.01.~22.12.		발주준비중
		도로유지보수에 따른 폐기물 처리	전노선		1식	30	22.01.~22.12.		발주준비중
		도로시설물 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	700	22.01.~22.12.		발주준비중
		설해 및 수해대책 장비 임차료	전노선		1식	300	22.01.~22.12.		발주준비중
		설해 및 수해대비 자재구입	전노선		1식	227	22.01.~22.12.		발주준비중
		터널 및 교량 전기요금	전노선		1식	200	22.01.~22.12.		발주준비중
		터널 및 교량 정비사업	전노선		1식	100	22.01.~22.12.		발주준비중
		비점오염저감시설 유지관리	전노선		1식	120	22.01.~22.12.		발주준비중
	소계	재배정사업	31개 지구			18,046
	재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	22.01.~22.12.		발주준비중
		운행방향 유도레인 설치	전노선		1식	30	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	전노선		1식	1,000	22.01.~22.12.		발주준비중
		동물찻길사고 방지시설 설치	전노선		1식	200	22.01.~22.12.		발주준비중
		도로 표지판 정비사업	전노선		1식	100	22.01.~22.12.		발주준비중
		도로 표지판(LED) 개선사업	서산,당진		1식	150	22.01.~22.12.		발주준비중
		야생조류 투명방음벽 충돌 저감 대책	서산	인지	1식	100	22.01.~22.12.		발주준비중
		아산지역 전진기지(제설창고) 구축사업	아산	염치	1식	150	22.01.~22.12.		발주준비중
		보령지역 지방도 포장도 보수공사	보령	남포	L=4.0km	500	22.01.~22.12.		발주준비중
		아산지역 지방도 포장도 보수공사	아산	탕정	L=4.0km	500	22.01.~22.12.		발주준비중
		홍성지역 지방도 포장도 보수공사	홍성	서부	L=8.0km	1,000	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도606호 수부도로 인도설치공사	보령	웅천	L=0.30km	300	22.01.~22.12.		용역중
		지방도624호 해암도로 인도설치공사	아산	인주	L=0.30km	300	22.01.~22.12.		용역중
		지방도634호 양길도로 인도설치공사	서산	팔봉	L=0.30km	300	22.01.~22.12.		용역중
		지방도647호 용장도로 인도설치공사	서산	운산	L=0.20km	200	22.01.~22.12.		용역중
		지방도649호 고대도로 갓길정비공사	당진	고대	L=0.30km	300	22.01.~22.12.		용역중
		지방도619호 천태도로 인도설치공사	홍성	장곡	L=0.30km	300	22.01.~22.12.		용역중
		지방도634호 방갈도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.20km	200	22.01.~22.12.		용역중
		지방도607호 월전도로 회전교차로 설치공사	보령	남포	1식	420	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도624호 염성도로 교차로 개선공사	아산	염치	1식	400	22.01.~22.12.		발주준비중
		국지도96호 버드랜드 교차로 개선공사	서산	부석	1식	70	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도618호 갈산도로 교차로 개선공사	서산	운산	1식	200	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도647호 오학도로 교차로 개선공사	서산	해미	1식	200	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도616호 도막사거리 교차로 개선공사	홍성	금마	1식	100	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도610호 영보지구 위험도로 개량공사	보령	오천	L=0.50km	300	22.01.~22.12.		발주준비중
		국지도96호 상송지구 위험도로 개량공사	홍성	장곡	L=0.70km	300	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도603호 관리도로 위험도로 구조개선공사	태안	이원	L=0.87km	3,808	22.01.~22.12.		발주준비중
		지방도603호 포지도로 위험도로 구조개선공사	태안	이원	L=0.84km	4,048	22.01.~22.12.		발주준비중
		중대교 외 6개소 보수보강공사	전노선		7개소	750	22.01.~22.12.		발주준비중
		내포지하차도 보수보강공사	홍성	홍북	1식	800	22.01.~22.12.		발주준비중
		교량 및 터널 안전진단 및 점검	전노선		1식	1,000	22.01.~22.12.		발주준비중
	소계	위 임 국 도	3개 지구			6,110
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	4,377	22.01.~22.12.		발주준비중
		도로유지보수	전노선		1식	703	22.01.~22.12.		발주준비중
		위험도로개선	전노선		1식	1,030	22.01.~22.12.		발주준비중

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음

□ 2021년도 간주예산 편성 결과

【1】공주지소(1건, 800,000천원)

❍「도로법」제15조 및 제31조에 따라 지방도 상 교량에 대하여 내구성‧안전성 저하로 인한 중대결함 예방으로 안전사고 방지

❍ 2021년 제3회 추가경정예산 성립 이후 「행정안전부」로부터 기금 교부결정 확정됨에 따라 간주예산 편성

(단위 : 천원)

간주예산 사업	예산액 (A)	기정 예산액(B)	간주처리 예산액(A-B)	산출기초
계	800,000	-	800,000
동성교 등 3개교 보수보강공사	800,000	-	800,000	‧ 동성교 : 300,000 ‧ 규암교 : 250,000 ‧ 독정교 : 250,000

□ 간부명단

(2022. 01. 01.기준)

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
종합건설 사업소	소장	지방기술서기관	최동석	2021.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	공 석
	도로건설과장	지방시설사무관	이창로	2021.01.01.
	공공건축과장	지방시설사무관	김재균	2020.07.01.
	하천개발과장	지방시설사무관	공 석
공주지소	지소장	지방시설사무관	김정흠	2021.07.01.
홍성지소	지소장	지방시설사무관	임형균	2021.07.01.