2022년도 정기분 충청남도 공유재산 관리계획안

의 안	제1256호	제출년월일 : 2021. 8. 20. 제 출 자 : 충청남도지사
번 호

1．제안이유

❍ 「(가칭)충남여성가족플라자 건립」, 「충청남도 노동안전문화회관   건립」일반회계 신규 제출안 2건, 「공주 정안119안전센터 청사   이전신축」, 「서천119안전센터 청사 이전신축」 소방특별회계   신규 제출안 2건, 총 4건의 공유재산 관리계획에 대하여,

❍ 「공유재산 및 물품 관리법」제10조 및 「충청남도 공유재산 관리   조례」제12조의 규정에 의거 충청남도의회 의결을 얻어 시행하기   위한 것임.

2．관리계획 내역

□ 일반회계

(단위 : 필지, 동, ㎡, 백만원)

연번	회계별	안 건 명	구분	재 산 현 황				비고
				종류	수량	면적	기준가액
		합 계			4	17,041	48,400
1	일반회계	(가칭)충남여성가족플라자 건립	취득	토지	1필지	6,600	3,660	신규
				건물	1동	7,650	38,740
2	일반회계	충청남도 노동안전문화회관 건립	취득	토지	1필지	991	1,000	신규
				건물	1동	1,800	5,000

□ 특별회계

(단위 : 필지, 동, ㎡, 백만원)

연번	회계별	안 건 명	구분	재 산 현 황				비고
				종류	수량	면적	기준가액
		합 계			6	8,669	10,725
1	소방 특별회계	공주 정안119안전센터 청사 이전신축	취득	토지	3필지	3,435	981	신규
				건물	1동	1,100	3,870
2	소방 특별회계	서천119안전센터 청사 이전신축	취득	토지	1필지	3,034	2,154	신규
				건물	1동	1,100	3,720

3．주요 세부내용

□ (가칭)충남여성가족플라자 건립

가. 추진배경 및 필요성

□ 여성·가족 정책 환경 여건 변화

○ 성평등을 위한 다양한 정책을 추진하고 있으나, 실질적 변화 미흡

※ 충남도 지역성평등지수 8년 연속 최하위(Level 4)

○ N번방 등 디지털을 활용한 신종 여성폭력 발생

○ 코로나19 확산으로 인한 경력단절여성 고용시장 불안

○ 한부모, 1인 가구, 다문화가족 등 가족변화에 따른 정책 지원 요구

○ 다양한 가족과 삶의 형태를 포용하는 사회환경 조성 필요

□ 플라자 건립 필요성

○ (연구기능) 급변하는 여성·가족·사회 환경에 대응한 다양한 정책 개발 요구에 부응

○ (교육기능) 일·가정 양립, 여성 취·창업 지원 등 여성의 사회진출 기회 확대

○ (교류기능) 여성단체, 풀뿌리 여성조직에 대한 교류 활성화 및 체계적 지원·육성

○ (공유기능) 소통·나눔, 참여·공유가 가능한 거점 공간 마련

다양한 여성·가족 기능을 집중·발현할 종합플랫폼인 ｢충남여성가족

플라자｣ 건립으로, 한 공간에서 원스톱 서비스 제공 필요

※ 17개 광역자치단체 중 15개 시도(세종,충남 제외)에서 여성가족 종합기관 기 건립 운영 중

(세종여성플라자 2021년 하반기 개관 예정으로, 충남도만 미운영)

나. 그동안 추진경위

○ 2019. 2. 국비 지원(생활SOC) 건의  * 타 시도와의 형평에 어긋나 지원 불가

○ 2019. 6. 건립 기본계획 연구용역 추진

○ 2020. 3. 건립 기본계획 수립(RB5 구역)

○ 2020. 6. ｢균형발전특별법｣ 국회 통과로 건립부지 변경(RB5 → RM8)

○ 2020. 8. 건립 기본계획 및 타당성 분석 연구용역 재추진

○ 2020.12. 건립 기본계획 재수립(RM8구역)

○ 2021. 2. 충청남도 공유재산심의위원회 원안 가결

○ 2021. 4.~6. 타 시도 플라자 운영형태 및 프로그램 등 벤치마킹(전남,충북,경북)

○ 2021. 6. 플라자 상징성 확보 및 운영 활성화방안 마련을 위한 전문가 간담회 개최

다. 사업 개요

○ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

○ 위    치 : 예산군 삽교읍 목리 888-1번지 일부(내포신도시 내 복5)

○ 사업규모 : 부지 6,600㎡, 연면적 7,650㎡(지하1층~지상4층)

○ 주요내용 : 정책 기획, 권익 증진 및 역량개발, 성평등 문화 확산 등 다양한 여성·가족 기능을 집중·발현할 종합플랫폼 건립

라. 총 사업비 : 42,400백만원(부지매입 3,660, 건축비 등 38,740)

◇ 총  사업비 : 42,400백만원(도비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	비 고
계	42,400	6,140	9,350	17,590	9,320
국비	-	-	-	-	-
도비	42,400	6,140	9,350	17,590	9,320
민자	-	-	-	-	-

마. 향후 추진일정

○ 2022년 부지 매입 및 실시설계 추진을 목표로 사전 행정절차 이행

- 2021. 8. 2022년 본예산 편성요구(→예산담당관)

- 2021. 9. 충청남도 공유재산관리계획 승인(→도의회)

- 2021. 9. 공공건축 사업계획 사전검토 신청(→충남공공디자인센터)

- 2021.10. 공공건축위원회 심의 요구(→건축도시과)

○ 건축 착공(2023년) 및 완공(2025년)

사. 기대효과

○ 여성·가족 정책 연구에서부터 정책시행 및 효과성 평가까지 한 공간에서 상호 연계되어 시너지 효과 발생

○ 여성의 경제활동 참가율 제고로, 노동인구 감소문제 해결 및 충남도 잠재성장률 상승

○ 소규모 여성조직의 네트워크 활성화 및 연대의 장 마련을 통한 양성평등 문화 확산

○ 공유를 통한 사회적 가치 창출 및 문화 향유 기회 확대

□ 충청남도 노동안전문화회관 건립

가. 추진배경

○ 충남의 지속적인 산재 예방을 위한 노력에도 불구, 우리 道 사망만인율*은 여전히 높은 편이며, 안전불감증은 지속

* ’19년 기준 사고‧질병 사망만인율은 강원(6.15), 경북(1.99), 충남(1.69) 順 (사고 58명, 질병 69명)

□ 우리 도 산재사고 사망자 : ’18년 62명 ⇢ ’19년 67명 ⇢ ’20년 53명 ⇢ ’21.3월말 17명

○ 충청남도 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례 제정(’20.9.15.)

- 산업재해 예방계획 수립, 노동안전보건센터 설치 운영 등을 규정

○ 산업재해로부터 안전한 노동환경을 구축하고 체계화된 산업재해 예방과 산재사망사고 감축을 위해 노동안전문화회관 건립 필요

※ 노동안전문화회관의 민간위탁 등을 위한 노동단체 사무실 포함

나. 그동안 추진경위

○ 2021. 5. 충청남도 노동안전문화회관 건립 변경계획 수립

○ 2021. 5. 공공건축가 추천요청(2021. 5. 31. 이주타 공공건축가 지정)

○ 충남경제진흥원과의 업무협의 → 건립부지 확정(테니스장 부지)

○ 2021. 8. 「충청남도 공유재산심의회」 원안가결

다. 사업 개요

○ (사업기간) 2022년 ~ 2023년

○ (위    치) 아산시 염치읍 송곡리 244-19번지(충남경제진흥원 내)

○ (규    모) 부지면적 991㎡, 연면적 1,800㎡(지하1층, 지상3층)

※ 토지매입은 지분매입 방식(지구단위계획지역으로 토지분할금지, 지분율 991/15,659)

○ (소요예산) 60억원(토지매입 10억, 공사비 45억, 부대비용 5억)

○ (주요시설) 노동안전보건센터, 산업안전 교육‧체험시설 등

- (노동단체 사무실, 1~2층) 본부 및 산별노조, 사무실, 회의실 등

- (노동안전문화 시설, 3층) 노동안전보건센터, 산업안전 교육시설 등

라. 총사업비 : 6,000백만원

◇ 사업비 : 6,000백만원(도비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	비 고
계	6,000	3,000	3,000	-
국비	-	-	-	-
도비	6,000	3,000	3,000	-
민자	-	-	-	-

마. 향후 추진일정

○ 공유재산 관리계획 승인(’21. 9.)

○ 2022년 본예산(30억) 확보 추진

○ 토지매입 확정 : 충청남도 경제진흥원 토지매각 절차 이행 등

사. 기대효과

○ 산업재해로부터 안전한 노동환경을 구축하고 체계화된 산업재해 예방을 위한 산업안전교육홍보, 실태조사 및 정책연구, 안전체험교육장 운영 및 노동안전문화 확산을 통한 노동자의 건강권 보호 기반 마련 등 산업재해 감소에 기여

○ 노동단체의 안정적 사무실 제공을 통한 노동존중사회 구현 기반 구축 및 노정 협력관계 강화에 기여

□ 공주 정안119안전센터 청사 이전신축

가. 추진배경

○ 1992년 건축된 정안119안전센터의 청사는 2020년 신설 시 공주시 소유의 의용소방대 청사를 활용(무상사용) 안전센터를 개청하여 현재까지 운영 중에 있는 것으로,  ※ 2020년 지역대에서 119안전센터로 승격

○ 부족 현장인력 충원 및 장비증가 등으로 사무실 출동대기실, 소방차고 등이 기준에도 미치지 못할정도로 협소하고, 또한 부지면적의 협소로 현장활동 대원의 훈련 공간이 없어 청사 및 부지의 확장 등 개선이 시급한 실정임.  ※ 소방인력 변화 : 9명(2020년) ⤑ 22명(2021년), 144.4% 증가

○ 특히, 현 청사 및 부지의 여건 상 건폐·용적률의 제한으로 현 부지 내에 증축을 통한 부족 공간 해소 및 훈련장 확보가 불가능하여 이전 신축이 불가피한 상황임.

○ 따라서, 인근 지역으로의 이전 신축을 통해 부족 공간 해소 및 필수시설 확보 등 근무여건을 개선하고자 함.

나. 사업 개요

○ 기간 : 2022년 ∼ 2025년(`22. 부지매입, `23. 설계, `24. 착공, `25. 준공)

○ 위치 : 공주시 정안면 광정리 50-2외 2필지 / 3,435㎡(1,040坪)

○ 규모 : 건축 연면적 1,100㎡, 지상 3층

❮현 청사 현황 ❯

- 부  지 : 398㎡(공주시 소유)

- 건축물 : 건축 연면적 179㎡, 지상 2층 / 1992. 준공

- 인력/차량 : 22명 / 3대(소방차 2, 구급차 1)

○ 주요내용 : 소방차고, 출동대기실, 사무실, 체력단련실, 소방장비창고 및 개인장비보관실 등 신축

다. 총사업비 : 4,851백만원(부지매입 981, 건축비 등 3,870)

❮연도별 사업비 현황❯

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	비 고
계	4,851	981	174	284	3,412
국비
도비	4,851	981	174	284	3,412	소방특별회계
민자

라. 향후 추진일정

○ 충청남도 공유재산 관리계획 안건 상정 : 2021. 9월

○ 이전 신축부지 매입(3필지 3,435㎡)     : 2022. 상반기

○ 공공청사 건축기획                    : 2023. 2월 ~ 7월

○ 설계공모, 기본 및 실시설계 용역      : 2023. 8월 ~ 2024. 5월

○ 토목 및 건축 공사                    : 2024. 6월 ~ 2025. 5월

마. 사업목적(기대효과)

○ 정안119안전센터는 사무실, 차고 등 열악한 기본 업무공간과 감염관리실, 체력단련실, 훈련장 등 필수시설 확보가 시급한 노후□협소한 청사임.

○ 이에, 청사 이전신축을 통하여 119대원 근무여건 개선과 현장 대응력을 강화하고자 함

□ 서천119안전센터 청사 이전신축

가. 추진배경

○ 2017년부터 추진한 서천군 군사(신청사)지구 도시개발사업의 공공청사용지에 서천119안전센터 이전사업이 포함되어 있으며,

○ 현 서천119안전센터 청사는 서천군 소유이며 현장 부족인력 충원 및 장비증가 등으로 사무실 및 출동대기실, 소방차고 등이 기준에 미치지 못하는 등 청사 및 부지의 확장 등 개선이 시급한 실정임.

※ 소방인력 변화 : 12명(2001년) ⤑ 29명(2021년), 141.6% 증가

○ 특히, 현 청사 및 부지의 여건 상 건폐·용적률의 제한으로 현 부지 내에 증축을 통한 사무공간 및 훈련장 확보가 불가하며,

○ 시내 중심가에 위치하여 진·출입로 협소와 불법 주·정차로 인하여 신속한 출동에 어려움이 있어 이전신축이 불가피한 상황임.

○ 따라서, 청사용지가 확보된 군사지구 도시개발사업 부지로 청사를 이전 신축하여 부족한 업무공간 확보와 필수시설 설치로 근무 여건을 개선하고자 함.

나. 사업 개요

○ 기  간 : 2022년 ∼ 2025년

※ `22.~`24 부지매입 3년분할, `23. 건축기획, `24. 설계, `25. 착공 및 준공

○ 위  치 : 서천군 서천읍 군사리 51-5번지 일원(택지개발지구 내) / 3,034㎡

○ 규  모 : 건축 연면적 1,100㎡, 지상 3층

❮현 청사 현황 ❯

- 부  지 : 903㎡(서천군 소유)

- 건축물 : 건축 연면적 678㎡, 지상 3층 / 2001. 준공

- 인력/차량 : 29명 / 5대(소방차 4, 구급차 1)

○ 주요내용 : 소방차고, 출동대기실, 사무실, 체력단련실, 소방장비창고 및 개인장비보관실 등 신축

다. 총사업비 : 5,874백만원(부지매입 2,154, 건축비 등 3,720)

❮연도별 사업비 현황❯

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	비 고
계	5,874	718	742	1,002	3,412
국비
도비	5,874	718	742	1,002	3,412	소방특별회계
민자

라. 향후 추진일정

○ 충청남도 공유재산 관리계획 안건 상정 : 2021. 9월

○ 이전 신축부지 매입(3,034㎡ 3년 분할 매입)  : 2022. ~ 2024.상반기

○ 공공청사 건축기획                    : 2023. 2월 ~ 7월

○ 설계공모, 기본 및 실시설계 용역      : 2024. 2월 ~ 11월

○ 토목 및 건축 공사                    : 2025. 1월 ~ 12월

마. 사업목적(기대효과)

○ 서천119안전센터는 사무실, 차고 등 열악한 기본 업무공간과 감염관리실, 체력단련실, 훈련장 등 필수시설 확보가 시급한 노후□협소한 청사임.

○ 이에, 청사 이전신축을 통하여 119대원 근무여건 개선과 현장 대응력을 강화하고자 함.

《붙임》 1. 2022년도 공유재산 관리계획(안) 총괄표 1부.

2. 취득대상 재산목록 1부.

3. 취득재산 세부목록 1부.

4. 비용 추계서 등 1부.

5. 위치도 및 현황 사진 1부.  끝.

붙임1		2022년도 공유재산 관리계획(안)

□ 총괄표

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분			합 계			일 반 회 계			특 별 회 계			비고
			건수 (동,필지)	면적	금 액	건수 (동,필지)	면적	금 액	건수 (동,필지)	면적	금 액
취득	계	토지	4 (6)	14,060	7,795	2 (2)	7,591	4,660	2 (4)	6,469	3,135
		건물	4 (4)	11,650	51,330	2 (2)	9,450	43,740	2 (2)	2,200	7,590
		기타
	1.매입 (신축)	토지	4 (6)	14,060	7,795	2 (2)	7,591	4,660	2 (4)	6,469	3,135
		건물	4 (4)	11,650	51,330	2 (2)	9,450	43,740	2 (2)	2,200	7,590
		기타
	2.교환 으로 취득	토지
		건물
		기타
	3.기타 취득	토지
		건물
		기타
처분	계	토지
		건물
		기타
	4. 매각	토지
		건물
		기타
	5. 양여	토지
		건물
		기타
	6. 교환 으로 처분	토지
		건물
		기타

<일반회계>

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분			당 초			변 경			합 계			비고
			건수 (동,필지)	면적	금 액	건수 (동,필지)	면적	금 액	건수 (동,필지)	면적	금 액
취득	계	토지	2 (2)	7,591	4,660				2 (2)	7,591	4,660
		건물	2 (2)	9,450	43,740				2 (2)	9,450	43,740
		기타
	1.매입 (신축)	토지	2 (2)	7,591	4,660				2 (2)	7,591	4,660
		건물	2 (2)	9,450	43,740				2 (2)	9,450	43,740
		기타
	2.교환 으로 취득	토지
		건물
		기타
	3.기타 취득	토지
		건물
		기타
처분	계	토지
		건물
		기타
	4.매각	토지
		건물
		기타
	5.양여	토지
		건물
		기타
	6.교환 처분	토지
		건물
		기타

<특별회계>

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분			당 초			변 경			합 계			비고
			건수 (동,필지)	면적	금 액	건수 (동,필지)	면적	금 액	건수 (동,필지)	면적	금 액
취득	계	토지	2 (4)	6,469	3,135				2 (4)	6,469	3,135
		건물	2 (2)	2,200	7,590				2 (2)	2,200	7,590
		기타
	1.매입 (신축)	토지	2 (4)	6,469	3,135				2 (4)	6,469	3,135
		건물	2 (2)	2,200	7,590				2 (2)	2,200	7,590
		기타
	2.교환 으로 취득	토지
		건물
		기타
	3.기타 취득	토지
		건물
		기타
처분	계	토지
		건물
		기타
	4.매각	토지
		건물
		기타
	5.양여	토지
		건물
		기타
	6.교환 처분	토지
		건물
		기타

붙임2		취득대상 재산목록

취 득 대 상  재 산 목 록

회계명 : 일반회계

(단위: ㎡, 백만원)

일련 번호	구분	재산의 표시	수 량 (면적)	취득예정 가액	취득시기	취득사유 및 방법	소관부서	비고
계	토지		2필지 (7,591㎡)	4,660
	건물		2동 (9,450㎡)	43,740
	기타
1	토지	예산군 삽교읍 목리 888-1 일부 (복지시설용지 5)	1필지 (6,600㎡)	3,660	2022년	매입	여성가족정책관
		아산시 염치읍 송곡리 244-19 (충남경제진흥원 내)	1필지 (991㎡)	1,000	2022년	매입	경 제 실 (일자리노동정책과)
2	건물	예산군 삽교읍 목리 888-1 일부 (복지시설용지 5)	1동 (7,650) (지하1층, 지상4층)	38,740	2022년 ~ 2025년	충남여성가족플라자 신축	여성가족정책관
		아산시 염치읍 송곡리 244-19 (충남경제진흥원 내)	1동 (연면적1,800) (지하1층, 지상3층)	5,000	2022년 ~ 2023년	노동안전문화회관 신축	경 제 실 (일자리노동정책과)
3	기타

회계명 : 특별회계

(단위: ㎡, 백만원)

일련 번호	구분	재산의 표시	수 량 (면적)	취득예정 가액	취득시기	취득사유 및 방법	소관부서	비고
계	토지		4필지 (6,469㎡)	3,135
	건물		2동 (2,200㎡)	7,590
	기타
1	토지	공주시 정안면 광정리 50-2 외 2필지	3필지 (3,435㎡)	981	2022년	매입	소방본부 (소방행정과)
		서천군 서천읍 택지개발지구내	1필지 (3,034㎡)	2,154	2022년	매입	소방본부 (소방행정과)
2	건물	공주시 정안면 광정리 50-2 외 2필지	1동 (1,100㎡)	3,870	2025년	정안119안전 센터 청사 이전신축	소방본부 (소방행정과)
		서천군 서천읍 택지개발지구내	1동 (1,100㎡)	3,720	2025년	서천119안전 센터 청사 이전신축	소방본부 (소방행정과)
3	기타

붙임3		취득대상 상세 재산목록

□ (가칭)충남여성가족플라자 건립

(단위 : ㎡, 원)

구분	소재지	지번	지목	면적	조성원가 (원)	재산가액 (백만원)	토지이용계획 (용도지역)
계				14,250		42,400
토지	예산군 삽교읍 목리	888-1 (일부)	대	6,600	554,578	3,660	지구단위계획구역 (준주거지역)
건물	〃	〃	1동	7,650	-	38,740

□ 충청남도 노동안전문화회관 건립

(단위 : ㎡, 백만원)

구분	소 재 지	지번	지목	면 적	공시지가	재산가액	토지이용계획 (용도지역)
계				2,791		6,000
토지	충남 아산시 염치읍	244-19	대	991	-	1,000	준주거지역
건물	〃	〃	1동	1,800	-	5,000

□ 공주 정안119안전센터 청사 이전신축

(단위 : ㎡, 백만원)

구분	소 재 지	지번	지목	면 적	공시지가	재산가액 (탁상감정)	토지이용계획 (용도지역)
계				4,535		4,851
토지	공주시 정안면 광정리	50-2	답	1,373	-	392	계획관리지역
	〃	52-1	답	533	-	152
	〃	52-2	답	1,529	-	437
건물	〃	50-2외	1동	1,100	-	3,870

□ 서천119안전센터 청사 이전신축

(단위 : ㎡, 백만원)

구분	소 재 지	지번	지목	면 적	공시지가	재산가액 (탁상감정)	토지이용계획 (용도지역)
계				4,134		5,874
토지	서천군 서천읍 군사리 (택지개발지구내)	51-5 일원	대지	3,034	-	2,154	제2종주거지역 (공공청사용지)
건물	〃	〃	1동	1,100	-	3,720

붙임4		비용추계서 등

< 비 용 추 계 서 >

1. 비용 발생요인 및 관련 조문

❍ (취득)   ➊(가칭)충남여성가족플라자 건립, ❷충청남도 노동안전문화회관 건립, ❸공주 정안119안전센터 청사 이전신축, ❹서천119안전센터 청사 이전신축

❍「공유재산 및 물품관리법」제10조 및 같은법 시행령 제7조

2. 비용 추계결과

가. 추계의 전제

❍ 1건당 기준가격이 20억원 이상 이거나 토지 6,000㎡ 이상인 재산의 취득

➊ (가칭)충남여성가족플라자 건립(취득)

- 정책 기획, 권익 증진 및 역량개발, 성평등 문화 확산 등 다양한 여성·가족 기능을 집중·발현할 종합플랫폼 건립

➋ 충청남도 노동안전문화회관 건립(취득)

- 산업재해로부터 안전한 노동환경 구축 및 산업안전 교육‧체험 등을 통한 산재사망자고 감축을 위한 문화회관 건립

➌ 공주 정안119안전센터 청사 이전신축(취득)

- 1992년 의용소방대 운영을 위해 건축된 청사로 이전신축을 통해 부족 공간 해소 및 필수시설 확보 등 근무여건 개선을 위해 필요

➍ 서천119안전센터 청사 이전신축(취득)

- 2001년 안전센터 개청 당시 건축된 청사로 이전신축을 통해 부족 공간 해소 및 필수시설 확보 등 근무여건 개선을 위해 필요

나. 추계 결과 및 재원조달방안

➊  (가칭)충남여성가족플라자 건립(4년간, 42,400백만원)

- 부지매입비 : 3,660백만원(도비100%) / 일반회계

- 건축비 등 : 38,740백만원(도비100%) / 일반회계

➋ 충청남도 노동안전문화회관 건립(2년간, 6,000백만원)

- 부지매입비: 1,000백만원(도비100%) / 일반회계

- 건축비 등 : 5,000백만원(도비100%) / 일반회계

❸ 공주 정안119안전센터 청사 이전신축(4년간 4,851백만원)

- 부지매입비: 981백만원(도비100%) / 소방특별회계

- 건축비 등 : 3,870백만원(도비100%) / 소방특별회계

❹ 서천119안전센터 청사 이전신축(4년간 5,874백만원)

- 부지매입비: 2,154백만원(도비100%) / 소방특별회계

- 건축비 등 : 3,720백만원(도비100%) / 소방특별회계

3. 연도별 비용 추계표 및 재원조달 계획서 : 붙임

작 성 자	자치행정국 세정과장 김성관
연 락 처	041-635-2340

[붙임]

< 연도별 비용 추계표 및 재원조달 계획 >

(단위 : 백만원)

구 분		1차년도 (2022년)	2차년도 (2023년)	3차년도 (2024년)	4차년도 (2025년)	5차년도 (2026년)	계
세 출		10,839	13,266	18,876	16,144	-	59,125
(가칭)충남여성가족 플라자 건립		6,140	9,350	17,590	9,320	-	42,400
충청남도 노동안전 문화회관 건립		3,000	3,000	-	-	-	6,000
공주 정안119안전센터 이전신축		981	174	284	3,412	-	4,851
서천119안전센터 이전신축		718	742	1,002	3,412	--	5,874
재원 조달		10,839	13,266	18,876	16,144		59,125
의존재원	소 계						0
	보 조 금						0
	지방교부세
자체수입	소 계	10,839	13,266	18,876	16,144	-	59,125
	지 방 세	10,839	13,266	18,876	16,144	-	59,125
	세외수입
지 방 채
기 금
공 기 업 특별회계
기 타 (시비 등)							0

붙임5		위치도 및 현황사진

1. (가칭)충남여성가족플라자 건립

▪ 위 치	예산군 삽교읍 목리 888-1번지 일부(내포신도시 내 복5)
▪ 조감도(안)

□ (가칭)충남여성가족플라자 시설별 배치계획(안)

층	기능	세부 공간	비고	면적
4층	정책 연구	원장실	1인	70
		기획조정실	4인	60
		연구팀	9인	130
		교육사업팀	4인	60
		행정팀	7인	100
		성별영향평가센터	3인	50
		휴게실	공용	30
		업무용 회의실	15인, 3실(가변형)	90
		자료실		100
		관리팀 사무실	8인	80
		관리팀 창고		30
		공용면적	화장실, 엘리베이터, 계단, 복도 등	480
		소 계		1,280
3층	광역 기능	아이돌봄광역지원센터		170
		다문화거점센터		100
		1366 콜센터	긴급피난처 16.5㎡포함	270
		충남광역새일센터		100
		열린식당		300
		중회의실	80㎡, 2실	160
		소회의실	50㎡, 2실	100
		화상회의실	강의실 기능 가능	60
		공용면적	화장실, 엘리베이터, 계단, 복도 등	600
		소 계		1,860
2층	여성 활동 지원	대강당	350석 규모	500
		대강당 홀	홀 및 로비공간	100
		여성단체 사무실	50㎡, 2개 단체	100
		인큐베이팅 공간	50㎡, 5실(여성 소모임 등 입주)	250
		공유오피스	50㎡, 3실	150
		스튜디오	영상 편집 및 방송 등 가능 시설	60
		강의실	60㎡, 3실	180
		공용면적	화장실, 엘리베이터, 계단, 복도 등	760
		소 계		2,100
1층	공유 및 돌봄	매점		40
		열린카페	개방형 공간	100
		공유부엌	요리 교육 및 식사 가능	80
		대회의실	다목적 홀	200
		여성주제 전시관		160
		여성 아카이브 공간		120
		로비 및 마주침 공간	개방형 공간	700
		어린이 돌봄공간	내방객용	160
		수유/휴게실		50
		공용면적	화장실, 엘리베이터, 계단, 복도 등	800
		소 계		2,410
총계				7,650

2. 충청남도 노동안전문화회관 건립

▪ 위 치	아산시 염치읍 송곡리 244-19번지 일원
▪ 현장사진		충청남도 경제진흥원 내

□ 충청남도 노동안전문화회관 주요시설(안)

❍ 건물규모(계획): 부지 991㎡ / 건축연면적: 1,800㎡ / 지하1층, 지상 3층

구 분	면적(㎡)	주 용도	세부내역
합계	1,800
지상(1)	561	사무실	∘ 노동단체 사무실 (본부사무실, 산별노조 사무실)
지상(2)	561	사무실	∘ 노동단체 사무실 (사무실, 노동법률원, 회의실, 교육장등)
지상(3)	561	사무실	∘ 노동안전보건센터, AR/VR 체험시설, 회의실, 산업안전지킴이 사무실 등
지하(1)	117	부대시설	∘ 기계실, 창고 등

❍ 도시관리계획 결정(도보)

3. 공주 정안119안전센터 청사 이전신축

▪ 위 치	: 공주시 정안면 광정리 50-2번지 외 2필지
▪ 항공사진

4. 서천119안전센터 청사 이전신축

▪ 위 치	: 서천군 서천읍 택지개발지구 내
▪ 토지이용계획