		제326회 도의회 임시회 2021. 1. 21. ~ 2. 4.

- 2021년 -

주요 업무 계획 보고

	종합건설사업소

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2021 업무여건과 운영방향 Ⅲ. 2021 주요업무 추진계획 Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2020년도 행정사무감사결과 처리상황 □ 제11대 도정질문, 5분발언 등 추진상황 Ⅴ. 참고사항 □ 각종 위원회 및 기관․단체 현황 □ 주요 사업별 예산확보 현황 □ 간 부 명 단

Ⅰ. 기  본  현  황

□ 기구 및 기능

【1】기 구 : 4과 2지소 23팀

								소 장
행정관리과				도로건설과				공공건축과						하천개발과					공주지소				홍성지소
서무팀				도로1팀				대형건축팀						지역개발팀					서무팀				서무팀
계약팀				도로2팀				건축사업팀						하천1팀					보수1팀				보수1팀
보상1팀								건축지원팀						하천2팀					보수2팀				보수2팀
보상2팀								시험팀											구조물 관리팀				구조물 관리팀
																			단속팀				단속팀

【2】정․현원 현황

부서․지소별		계	일 반 직(정원/현원)
			4급	5급	6급	7급	8급	9급	운영직
합 계		114/109	1/1	6/6	23/23	45/29	24/19	9/25	6/6
본소		61/60	1/1	4/4	13/13	27/19	13/9	3/14	-
	행정관리과	18/19	1/1	1/1	4/4	8/7	4/1	0/5	-
	도로건설과	12/12	-	1/1	2/2	4/3	3/3	2/3	-
	공공건축과	21/17	-	1/1	4/4	13/7	2/2	1/3	-
	하천개발과	10/12	-	1/1	3/3	4/2	2/3	0/3	-
공주지소		27/25	-	1/1	5/5	9/6	5/5	5/6	2/2
홍성지소		26/24	-	1/1	5/5	7/4	8/5	1/5	4/4

※ 공무직(66명) : 도로보수원 49, 사무보조 3, 과적단속요원 14

【3】주요 기능

	- 행정관리과
	❍조직, 예산, 청사관리 및 직원후생복지 ❍각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매, 보상업무
	- 도로건설과
	❍지방도 사업 집행계획 수립 및 조정 ❍국가지원지방도 및 지방도 확‧포장사업 시행
	- 공공건축과
	❍공공 건축물의 신축 및 보수사업 ❍건설공사 자재 및 현장 품질검사 시험
	- 하천개발과
	❍지방하천 정비사업 시행 및 집행계획 수립 ❍지역개발 기반시설사업 시행
	- 공주∙홍성지소
	❍지방도∙위임국도 유지관리 및 보수사업 시행 ❍재해대책(풍∙수해) 수립 시행, 과적차량 단속

□ 2021년도 예산규모

세입 세출
		∙ [세 입 예 산] 1,920백만원 - 수수료 100, 과태료 210, 지난년도 수입 210, 소방안전교부세 1,400 ∙ [세 출 예 산] 30,805백만원 - 사업예산 18,914, 행정운영경비 11,891

❍ 재배정 예산 사업 : 394,314백만원

(단위 : 백만원)

도로 확･포장	공공건축	하천정비	지역개발	도로유지 관리
96,565	89,571	112,468	15,491	80,219

Ⅱ. 2021년도 업무여건과 운영방향

	업 무 여 건
◈ 충남 건설경기 활성화 및 도민 중심 행정 요구 - 도내 건설업체 계약 및 자재구매를 통한 지역경제 자생력 강화 - 지역 균형발전 및 도민 편의를 위한 미래지향적 도로망 확충 ◈ 더 안전하고 친환경적인 건설행정 수행 - 자연 재난 대비 도민의 안전과 재산보호 구축 - 도민 눈높이에 맞는 자연친화적 고품격 도로·하천 환경 조성 기대

운 영 방 향

청렴하고 투명한 건설공사로 살기 좋은 충남건설 구현

◈ 지역경제 특성을 반영·연계한 미래지향적 건설행정

-「지역경제 우선」지역기업 공사 계약 및 손실 보상 편의 제고

- 도내 균형발전을 선도하는 광역도로교통망 구축

◈ “현장에서 답을 찾는” 실천적 건설공사 행정 추진

- 건의·애로사항 청취 →도민이 체감할 수 있는 해결방안 강구

- 맞춤형 민원보상서비스 추진으로 도민 민원서비스 질을 향상

- 안전하고 체계적인 도로·하천정비사업 향상을 통한 도민 편의증진

- 도민 중심의 편리하고 안전한 랜드마크 공공건축물 건립

Ⅲ. 2021년 주요업무 추진계획

□ 지역 경제를 우선하는 건설부분 계약 추진

지역건설업체 참여 및 지역 생산자재 공급 우선 지원

- 지역업체 우선하는 계약업무, 투명한 하도급문화 유도, 임금체불 방지 등

【1】지역업체에 도움이 되는 계약업무 수행

❍ 건설공사 지역의무공동도급(49%)으로 지역건설 경기 부양

❍ 입찰공고 ․ 계약체결 시 지역업체 하도급 체결 권장 문구 명시

- 지역업체와의 하도급계약(60%이상) 체결 적극 권고

❍ 지역업체 생산자재 우선 구매 추진

- 도내업체 가점 부여 등 자체 물품선정 평가 기준 적용

- 지역업체 생산제품 및 여성·장애인기업 생산제품 우선 구매 확대

【2】투명한 하도급 문화 정착 유도

❍ 하도급대금 직접 지불 적극 권고 및 지급보증제 실시 등

❍ 현장 실태조사 점검으로 건전한 하도급 문화 정착 유도 (연 2회)

【3】신속하고 체불 없는 공사로 지역경제 활성화

❍ 전자입찰 및 전자계약을 통해 기업체의 경비절약 실현

❍ 대금(선금, 기성금, 준공금) 지급 청구 시 3일 내 지급

❍ 적극적인 임금체불 방지대책 마련

- 전월 노무비 지급실적 확인 후 당월 노무비 지급

❍ 회계업무 처리기한 단축(코로나19 대응)에 따른 적극 행정(‘21. 6한)

□ 합리적이고 투명한 보상업무 추진으로 도민재산권 보호

공익사업에 편입되는 토지 및 지장물 등의 합리적이고 투명한 손실      보상으로 민원발생 사전방지 및 협의와 소통으로 행정 신뢰성 제고

[보상계획:  28지구 / 126,348백만원]

(단위 : 백만원)

지 구 수	보상 대상(A)		기보상 실적(B)		비율 (%)	2021년도 보상계획(A-B)		보상 완료 시기
	건수	금액	건수	금액		건수	금액
28지구	14,503	126,348	12,680	120,739	95	1,823	5,609	21.12.31.

【1】지속적인 이해·설득 및 찾아가는 보상협의로 도민의 편의 제공

❍ 주민 보상설명회 개최

- 보상추진 절차 설명 및 사전상담으로 보상에 대한 이해도 제고

- 토지소유자의 감정평가업자 주민 추천 및 보상협의회 설치운영

❍ 보상 물건 조사, 보상액 산정을 위한 감정평가 시 주민 입회 독려

❍ 직접 사업현장을 찾아가는 보상협의로 도민의 행정편의 극대화

- 협의기간 중 매주 1회이상 보상 지구 현장 방문하여 주민보상 협의실시

【2】손실보상대상 물건의 정확한 현지조사로 민원발생 사전방지

❍ 현지조사 시 공간정보(항공영상, 드론 촬영) 및 GNSS 장비 이용

- 드론을 활용한 각종 공익사업지구 직접 촬영 등 적극 활용(항공영상 확보)

❍ 토지 및 지장물 등 보상 물건의 기본조사 철저로 정확한 민원 처리

➡ 보상 전반에 대한 기초자료 확보로 보상의 공정성 및 정확성 확보

【3】신속한 수용 절차로 공사기간 단축

❍ 누수 없는 투명한 행정절차 이행으로 토지수용 기간 단축 등

- 신속한 수용재결 신청으로 공사 간접비 소송 예방 및 공기 단축

※ 협의 불성립 또는 불능 토지 등은 재결에 의한 공탁 및 수용

□ 지역발전을 선도하는 도로교통 인프라 구축

원활한 교통인프라 구축으로 지역 간 균형발전 도모 및 삶의 질 향상

쾌적하고 안전한 도로환경 구축 및 이용자 중심 도로건설

[도로 사업 : 35지구 / 96,565백만원]

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	35	96,565	2	3,800	24	86,894	9	5,871
국지도	7	42,686	-	-	4	40,328	3	2,358
지방도	21	43,100	-	-	17	41,100	4	2,000
기 타	7	10,779	2	3,800	3	5,466	2	1,513

⇒ 공사중(9), 공사정지(4), 보상중(5), 설계중(11), 타당성조사(4), 설계예정(2)

❍ 지역경제 활성화를 위한 적극적인 건설사업 추진

- 주요사업비 965억원 중 상반기 70%(675억), 연내95%(916억) 집행을 목표로 추진, 고용창출 1,273여명 기여

※ 건설분야 취업유발계수 : 13.9명/10억원(산업연관표 ’14년/한국은행 ’16. 11월 발간)

❍ 체계적인 사업관리를 통한 효율적인 예산집행

- 현장별 시공계획 사전점검을 통한 선택과 집중형 예산 투자

❍ 지역주민의 만족도 향상을 목표로 이용자 중심의 도로건설

- 고객중심의 안전하고 편리한 교통서비스 제공

- 원활한 교통환경 제공 및 사고예방차원의 맞춤형 사업추진

□ 고품질 도로건설 실현을 위한 관리체계 강화

청렴하고 전문적인 건설행정 서비스 구현으로 고품질 도로건설 실현

지속적인 교육 등 역량강화로 건설사업 관리·감독

【1】견실시공 및 도로건설의 완성도 향상을 위한 행정서비스 구축

❍ 지역 주민의견 적극수렴을 위한 주민설명회 추진

- 적극적인 주민참여를 통해 지역주민과 소통하는 건설사업 추진

- 작은 민원도 경청하여 신뢰받는 행정서비스 제공

❍ 고품질 ․ 고효율의 공법 선정 및 시공을 위한 전문가 자문 실시

- 분야별 외부 전문가 자문으로 현지여건에 부합하는 설계 및 시공의 완성도 향상 (’20년 기술자문위원회 7회, 외부전문가 40명 참석)

※ 충청남도 종합건설사업소 4기 기술자문위원 인력풀 : 총 56명

- 당연직 7, 도로 9, 교통 5, 토질 9, 구조 9, 하천 6, 건축 4, 기타 7

❍ 분기별 공사관계자 회의 개최로 의견교류 활성화 및 공정관리 등 강화

- 매 분기, 발주처, 시공사, 감리단 상호교류 활성화로 애로사항
청취 및 상호 협력체계 구축

- 청렴협약식 체결로 청렴의식 고취 및 투명한 건설행정 실현

- 코로나19 바이러스 고려 온나라 영상회의시스템을 이용한 비대면 공사관계자 회의 개최 예정

【2】공사관계자의 전문성 향상을 위한 업무연찬 추진

❍ 토목시공기술연구회 운영을 통해 공사감독관의 전문성 향상

- 신기술·신공법 적용 현장 견학 등 연 2~3회 학술동아리 추진

❍ 공사관계자 직무 역량강화 교육 실시 및 워크숍 개최(연 2회)

- 기술력과 안전관리 지식 제고를 위하여 직무관련 교육 실시 및 워크숍 개최로 공사관계자 역량강화 및 화합의 장 마련

□ 충남을 대표하는 품격 있는 공공건축물 건립

품격 있는 디자인 적용에 따른 공공건축물 가치 향상 도모

[공공건축 사업 : 12개소 / 89,571백만원]              (단위 : 백만원)

총 괄		계속사업		준공사업
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
12	89,571	7	80,339	5	9,232

【1】건물 자체가 랜드마크가 되는 공공건축물 건립

❍ 충남국제컨벤션센터, 도립미술관 건립 등 공공건축 디지털 설계공모를 통하여 충남을 대표하는 품격있는 지역 랜드마크 조성

- 혁신도시 지정에 걸맞는 충남만의 독창적 건축디자인 설계로 우수한 공공건축물 건립

【2】공정하고 투명한 설계공모 심사위원 구성 ‧ 운영

❍ 심사위원의 3배수로 예비심사위원을 구성하여 추첨을 통한 설계  공모 심사위원 선정 및 운영

- 심사위원은 활동지역 출신 및 현 재직학교 등을 종합고려 구성, 심사과정 SNS 생중계

【3】공공건축물 대형화에 따른 전문성 강화

❍ 공공건축의 대형화 및 전문화에 대응하고자 분야별 전문 지식을 갖춘    대형공사팀* 신설하여 성공적인 공공건축사업 추진(’21. 1월)

* 소방복합시설, 충남국제컨벤션센터, 충남스포츠센터 건립 등 대형건축공사 증가

【4】체계화된 공공건축 공정관리 시스템 마련

❍ 기획‧설계‧시공 등 공사 全 과정의 매뉴얼과 공공건축가 활용 방안 등에 관한 지침 등을 만들어 효율적인 공공건축사업 체계화 추진

□ 철저한 품질관리로 안전한 건설공사 추진

「건설기술 진흥법」에 의한 품질관리계획 및 시험계획 수립 현장의       품질시험 대행을 통한 도내 건설현장 품질향상 기여

【1】건설공사 품질 향상을 위한 주도적 품질시험 실시

❍ 시험대상 : 3개 분야

1) 총 공사비 5억원 이상 토목공사

2) 2억원이상 전문공사

3) 연면적 660㎡이상 건축공사

※ 근거 : 건설기술진흥법 제55조 및 동법시행령 제89조

❍ 시험종목 : 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등 총20분야 104종목

- 충청남도 건설공사 품질시험 종목 및 수수료 공고(2월)

❍ 추진목표 : 400건 / 1,700종목(누적) (‘20년도 실적 : 377건 / 1,607종목)

- 설계서에 명시된 품질과 규격에 맞도록 단계별 품질시험을 추진하여 합리적·경제적·내구적 구조물 완성

⇨ 철저한 품질시험으로 건설공사 원가절감 및 신뢰성 확보

【2】건설공사 현장 품질·안전점검을 통한 안전사고 제로화

❍ 품질·안전관리단 구성 및 상시운영으로 고품질 건설공사 추진

- 종합건설사업소장을 단장으로 2개반 운영(건축, 토목)

❍ 품질·안전관리단 운영을 위한 점검계획 수립 및 시행(1월)

❍ 정기점검(년 4회) 실시 (해빙기, 우기, 동절기 등 계절적 요인에 따라 실시)

- 총공사비 10억 이상, 공정률 10% 이상의 건설현장 점검

- 건설 현장의 품질확보 및 안전사고 제로화를 위한 시공 및 품질·안전관리 실태 점검

❍ 준공사업장 하자 발생 여부 및 위험성 조사를 위한 수시점검

⇨ 고질적 중대 지적사항 및 재지적 사항은 행정조치 시행*

* 건설기술진흥법 제88조에 따라 2년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금

□ 안전하고 친환경적인 하천정비 추진

자연재해에 대비한 견실하고 안전한 하천정비사업 추진

친환경적 하천 정비 및 경관개선으로 아름다운 하천 조성

[하천 사업 : 37지구 / 112,468백만원]                  (단위 : 백만원)

총 괄		준공사업		계속사업		신규사업
지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
37	112,468	6	13,216	26	95,252	5	4,000

※ 재해복구사업(금곡천, 약봉천, 온양천) 포함

【1】신속한 사업 추진으로 예산 조기 집행 및 재정집행률 향상

❍ (공사지구) 신속한 공사 추진으로 예산 조기 집행으로 재정집행률 향상

❍ (설계지구) 진행중인 설계지구는 신속한 마무리 및 공사 조기 발주, 신규 설계지구는 조기 발주 추진

【2】친환경적인 하천사업 및 재해복구사업 추진

❍ 기후변화에 따른 자연재해 대비 견실하고 안전한 하천정비 추진

❍ 경관과 조화되는 친환경 자재사용 및 하천정비로 생태공간 조성

❍ 자연재해로 훼손된 하천을 복구하여 추가피해 방지 및 주민 안전 확보

【3】신뢰받는 건설 행정 구현 및 안전사고 예방 노력

❍ 하천사업 설계단계부터 주민참여 확대로 도민 신뢰도 향상

❍ 기술자문위원회를 통한 투명하고 효율적인 자재 및 공법 선정

❍ 안전사고 예방을 위한 점검 및 교육 강화로 사고 발생률 ZERO화

□ 내포 신도시 및 태안기업도시 연결도로 개설

내포 도시첨단산업단지 및 신도시 활성화를 위한 인프라 구축

태안기업도시와 서산웰빙특구 연계기능 강화로 지역경제 활성화

[ 지역개발사업 : 2지구 / 15,491백만원]

(단위 : 백만원)

구 분	사업량 (km)	사 업 비				비고
		합 계	기시행	2021년	장 차
계	4.51	89,812	57,152	15,491	17,169
내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사	3.90	53,166	42,824	5,491	4,851
태안기업도시 연결도로 개설공사	0.61	36,646	14,328	10,000	12,318

[1] 내포 신도시 활성화를 위한 기반시설 확충

❍ 도시첨단산업단지 진입도로 개설로 교통체증 해소 및 교통량 분산

❍ 내포 도시첨단산업단지 및 내포 신도시 활성화 기틀 마련

* 공사착공(’18. 3. 공정률 73%) → 준공(’22. 2. 예정)

⇨ ‘21년 하반기 조기 준공을 위해 역점 추진

[2] 태안 기업도시 연계기능 강화로 지역경제 활성화

❍ 서산웰빙특구 및 태안기업도시 연결도로 개설로 서해안 거점지역 육성

❍ 서해안 관광산업 및 지역경제 활성화로 지역 균형발전 기여

* 공사발주(’19. 11.), 공사 착공(’20. 2. ) → 준공(’23. 2. 예정)

□ 편리하고 안전한 도로 이용을 위한 체계적 도로관리

적기 도로보수 체계 확립으로 도로이용 불편사항 해소

재해(설해, 수해 등) 취약구간 중점 관리로 원활한 교통흐름 유지

운행제한 위반차량 단속으로 도로시설물 파손 예방

【1】도로 유지·보수사업

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		계속지구		신규지구
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	242	80,219	44	21,843	198	58,376
자체사업	110	18,502	12	1,799	98	16,703
재배정사업	103	40,662	21	13,353	82	27,309
균특사업	5	5,135	5	5,135
위임국도	24	15,920	6	1,556	18	14,364

❍ 금년도 계획된 유지․보수 사업의 조기발주 및 철저한 시공관리

- 위험도로선형개량, 포장보수, 도로표지판 정비, 안전시설 등

❍ 교량, 터널 등 구조물의 철저한 안전관리로 교통사고 예방

【2】자연재해대책 수립 및 시행

❍ 겨울철(‘20. 11. 15. ~ ’21. 3. 15.)

- 제설장비․인력 관리 철저 및 제설자재 확보, 비상근무체제 유지

- 설해취약구간 중점관리와 신속한 제설·제빙으로 도민 불편 해소

❍ 여름철(‘21. 5. 15. ~ ’21. 10. 15.)

- 급경사지, 산사태 우려지역 등 재해 취약시설․지역 수시점검

- 재해응급조치 장비, 인력, 물자 확보 및 유관기관 협조체제 유지

【3】철저한 지방도로 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성

❍ 도로 순찰 강화 및 시설물에 대한 안전점검 실시

- 노  면  보  수 : 노면 평탄성 유지(소파보수 등) 및 차선도색 등

- 도로안전시설 : 파손부위 보수, 비뚤어진 곳 및 전도된 곳 바로잡기 등

❍ 운행제한 위반차량단속을 병행한 사전 도로 파손 예방 등

운행제한 위반차량 강력 단속

도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속실시

유관기관 간 운행제한 위반차량 합동단속 실시

대형공사장 등 과적 근원지 과적예방을 위한 사전계도 실시

【1】도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속 실시

❍ 주요 과적발생 근원지(대형공사장 등), 위험교량 노선 이동단속

- 도내 지방도, 국지도, 위임국도 62개 노선 수시 이동단속

❍ 과적단속 효율성 제고를 위한 고정·이동단속 병행 실시

- 고정검문소 병행 운영으로 과적심리 근절

※ 단속현황(2018~2020)

구 분	검 차 대 수			적 발 대 수			비 고
	2020년	2019년	2018년	2020년	2019년	2018년
계	11,279	11,977	12,064	430	472	610
고정식	1,223	1,585	1,462	8	3	8
이동식	10,056	10,392	10,602	422	469	602

【2】유관기관 간 합동단속 실시

❍ 시·군, 논산국토관리사무소, 경찰서 등 유관기관 간 합동단속

❍ 단속기관 간 단속업무 공유 및 공조단속

※ 2020년 합동단속 실적 / 검차대수 : 573대, 적발대수 : 28대

【3】대형공사장 등 방문을 통한 과적예방 사전계도

❍ 과적 근원지, 대형 공사장 등 방문을 통한 과적예방 사전계도        - 대형 화물차량 운전자 과적예방 홍보물 배포

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2020년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
	7	-	-	-
시정요구	-	-	-	-
처리요구	2	1	1	-
제안사항	5	-	5	-

< 완료사항 >

① 보상절차 이행 시 철저한 확인 필요(처리요구사항)

- ‘연산천 지방하천 정비사업’추진 중 기 보상완료된 철갑상어 양어장건에 대하여 철갑상어는 노상의 환경이나 러시아와 같은 저온의 국가에서도 노상양육하는 경우가 흔한 것으로 확인됨

- 추후 보상절차 이행 시 감정평가 결과를 참고하되 담당공무원의 철저한 확인 및 검토로 업무가 원만히 진행될 수 있도록 적극 노력하겠음

< 추진중인 사항 >

① 미납 과태료에 대한 적극적 조치 필요(처리요구사항)

❍ 과태료 체납자 재산조회 및 압류조치

- 재산조회 : 차량, 예금, 토지 등 / 월 1회

- 압류조치 : 차량 및 건설기계 / 수시

- 징수활동 강화 : 문자, 전화, 방문을 통한 납부독려 / 수시

※ 고액 체납자(체납금액 100만원 이상) 주소지 방문 징수추진

❍ 체납자 차량, 예금, 토지 등 재산압류를 통한 재산권 제약으로 체납 과태료 징수·과적인식 개선·과적심리 근절 도모

② 지역경제 활성화를 위한 지역업체 참여 활성화 방안 필요(제안사항)

- 대형공사 입찰 공고 시 지역업체와의 하도급 체결 및 지역 건설장비 사용 권장을 명시하고,

- 자체 발주하는 물품·용역·공사 계약 시 지역제한 등 관내 업체와 우선 계약을 적극 검토하겠음.

③ 교통사고 사망자를 줄이기 위한 포트홀 관리 철저(제안사항)

- 지속적인 도로순찰을 하고 있으나 도로보수원 인원부족 등 사유로 즉각 조치가 어려운 실정으로 향후 도로보수원 인원을 충원(2021년 상반기 채용공고 예정)하고

- 포트홀 발생 사전 방지를 위해 아스팔트 포장 시 철저한 품질관리로 포트홀 발생을 최소화하겠음.

④ 소관부처가 다른 하천사업 추진 시 중간 역할 필요(제안사항)

- 소관부처에 따른 사업목적이 달라 하천사업 추진 시 다양한 주민의견 반영하기 어려움

- 도 하천과와 협조하여 주민의견 적극 반영될수 있도록 노력하겠음.

⑤ 안전하고 아름다운 도로행정 추구(제안사항)

- 안면도 관광지 연결도로 건설사업, 어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 등 서해안 및 금강의 자연경관을 연계하여 공사를 추진하겠음

- 설계중인 도로건설사업 14건에 대하여 주민설명회 개최 및 환경영향평가를 실시하여 주민요구사항 및 지역특성을 설계에 반영하겠음

⑥ 도로유지관리 철저(제안사항)

- 정기점검(2회/1년), 정밀점검(1회/2년), 안전진단·성능평가(1회/5년) 등철저한 안전점검으로 교량의 상태별 안전여부를 진단하고 대형 안전사고예방을 위해 연차별 보수보강 계획수립 및 예산을 확보하겠음

□ 제11대 도정질문, 5분발언 및 MOU체결 추진상황

【2-4】	MOU 체결 추진상황

< 총  괄 >

(2018.7월 ~ 2020.12.31.)
협약명	대상	협약일	협약내용	비고 (만료 등)
계	1건
운행제한차량 단속 상호협업	1건	2019. 5. 24.	과적차량 단속공조 등

< 추진중인 사항 >

① 운행제한차량 단속 상호협업을 위한 업무협약

❍ 협약기관 : 공주지소 / 대전지방국토관리청 논산국토관리사무소

❍ 그동안 추진상황

- 협약체결 : 2019. 5. 24.(금)  ※ 논산국토관리사무소 대회의실

- 합동단속 : 12회(검차 573대, 적발 28대)

- 인적교류 : 3회(1분기당 단속원 2명 상호교류)

※ 코로나-19 감염병 확산에 따른 집합금지 명령에 따른 인적교류 보류(‘20. 10월 ~ 현재)

Ⅴ. 참 고 사 항

□  각종 위원회 및 기관‧단체 현황

【1】충청남도종합건설사업소 기술자문위원회

❍ 종합건설사업소에서 추진하는 건설공사에 대한 설계 및 시공 검토, 형식 ․ 공법 ․ 자재 선정 등에 대한 기술적 제언 및 자문을 구하기 위함.

- 도로, 교통, 토질, 구조 등 11개 분야 56명으로 구성(당연직 7, 외부 49)

□ 주요 사업별 예산확보 현황

【1】분야별 사업추진 내역

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		328	308.632	394,314
도 로	계	35	156.18	96,565	도로건설과
	국 지 도	7	64.63	42,686
	지 방 도	21	82.66	43,100
	기타도로	7	8.89	10,779
공공건축		12	-	89,571	공공건축과
지방하천정비		37	147.942	112,468	하천개발과
지역개발		2	4.51	15,491
도로유지관리		144	-	46,134	공주지소
		98	-	34,085	홍성지소

【2】도로 확포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2021.01.01. 기준)

총 괄		‘21년 준공지구		계 속 지 구		‘21년 신규지구
◀ 35건 / 96,565백만원 ▶		◀ 2건 / 3,800백만원 ▶		◀ 24건 / 86,894백만원 ▶		◀ 9건 / 5,871백만원 ▶
․국지도 7 / 42,686		․국지도 0 / -		․국지도 4 / 40,328		․국지도 3 / 2,358
․지방도 21 / 43,100		․지방도 0 / -		․지방도 17 / 41,100		․지방도 4 / 2,000
․기 타 7 / 10,779		․기 타 2 / 3,800		․기 타 3 / 5,466		․기 타 2 / 1,513

사 업 명		사업량		사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
				전 체	기시행	2021년	장 차
총 계		35지구 (156.18㎞)		1,482,244	232,110	96,565	1,153,569
국 지 도		7지구 (64.63km)		480,665	123,979	42,686	314,000
계속지구	소 계	4지구 (50.45km)		366,465	123,979	40,328	202,158
	청양～ 신양IC	연장=16.2km 폭=10.0m		52,714	43,012	4,214	5,488	2017.05.29. ∼ 2023.06.25.	55 (공사중)
	이호～양곡	연장=4.85km 폭=10.0m		24,151	20,261	2,857	1,033	2018.09.17. ～ 2023.08.21.	34 (공사중)
	당진～서산	연장=19.1km 폭=17.5m		175,500	59,920	30,614	84,966	2019.04.08. ～ 2027.04.05	1 (정지)	보상
	성환∼입장	연장=10.3km 폭=17.5m		114,100	786	2,643	110,671	2018～2028	대전청 설계중
신규지구	소 계	3지구 (14.18km)		114,200	0	2,358	111,842
	우성∼이인	연장=0.7km 폭=10.0m		35,000	0	786	34,214	2019～2029	대전청 설계중
	장척∼목현	연장=3.67km 폭=17.5m		29,500	0	786	28,714	2019～2029	대전청 설계중
	임천∼강경	연장=9.81km 폭=10.5m		49,700	0	786	48,914	2019～2029	대전청 설계중
지 방 도		21지구 (82.66km)		906,503	65,131	43,100	798,272
계속지구	소 계	17지구 (67.96km)		796,003	64,831	41,100	690,072
	규암～청남	연장=2.29km 폭= 10.0m		27,320	16,452	6,850	4,018	2018.03.19. ～ 2022.09.17.	46 (공사중)
	대술～정안	연장=4.8km 폭= 9.5～11.7m		21,752	10,780	4,000	6,972	2019.07.22. ～ 2023.07.20	24 (공사중)
	어천～공주 (4차)		연장=3.95km 폭= 10.0m	48,900	12,736	5,010	31,154	2020.12.23. ～ 2026.12.21	1 (공사중)
계속지구	오천우회		연장=3.98km 폭= 9.5m	22,449	6,395	4,010	12,044	2016.～2026.	1 (공사중)
	삭선～원북		연장=5.8km 폭= 20.0m	46,514	4,460	3,000	39,054	2017.～2030.	보상중
	기지시～한진		연장=9.3km 폭= 18.0m	143,171	3,595	1,000	138,576	2017.～2027.	보상중
	무창포IC～ 웅천		연장=1.46km 폭=21.75~23.0m	8,200	1,185	5,020	1,995	2018.～2024.	1 (정지)	보상
	두마～노성		연장=9.25km 폭=10.0m	116,590	2,000	1,000	113,590	2018.～2027.	설계중
	화성～장곡		연장=2.4km 폭=10.0m	12,000	395	3,005	8,600	2018.～2025.	보상중
	구룡～용두		연장=1.3km 폭=10.0m	10,795	375	2,505	7,915	2018.～2025.	보상중
	밀두～대음		연장=3.58km 폭=18.75m	49,170	835	500	47,835	2018.～2025.	설계중
	산동～상덕		연장=7.74km 폭=19.5m	128,659	3,130	1,000	124,529	2018.～2027.	설계중
	왕암도로		연장=1.0km 폭=10.0m	11,500	450	500	10,550	2019.～2022.	설계중
	반계도로		연장=1.25km 폭=10.0~19.2m	9,783	663	0	9,120	2017.～2023.	보상중
	보산원도로		연장=0.5km 폭=9.5m	3,000	100	500	2,400	2017.～2023.	설계중
	서면～비인		연장=4.9km 폭=19.5m	29,100	610	1,200	27,290	2019.～2027.	설계중
	복수～진산		연장=4.46km 폭=19.5m	107,100	670	2,000	104,430	2019.～2029	설계중
신규지구	소 계		4지구 (14.7km)	110,500	300	2,000	108,200
	광시～운곡		연장=5.0km 폭=10.0m	35,300	90	500	34,710	2020.～2030	타당성 조사중
	노화～평촌		연장=3.7km 폭=19.5m	30,000	90	500	29,410	2020.～2030	타당성 조사중
	동해～부곡		연장=5.0km 폭=10.0m	35,200	120	500	34,580	2020.～2030	타당성 조사중
	고암～역재		연장=1.0km 폭=20.0m	10,000	0	500	9,500	2020.～2030	타당성 조사중
기타도로사업			7지구 (8.89km)	95,076	43,000	10,779	41,297
준공지구	소 계		2지구 (4.3km)	46,700	40,047	3,800	2,853
	안면도 관광지 연결도로		연장=2.9km 폭=27.0m	41,200	38,900	2,300	0	2018.03.05. ～ 2021.03.23.	63 (공사중)
	장평지구		연장=1.4km 폭=16.5~17.4m	5,500	1,147	1,500	2,853	2019.12.20. ～ 2021.12.31.	36 (공사중)
계속지구	소 계		3지구 (2.9km)	29,186	2,953	5,466	20,767
	원청사거리		연장=0.89km 폭=3.5～20m	14,075	600	2,700	10,775	2020.07. ～ 2023.07.	1 (정지)	보상
	웅천산단 진입도로		연장=1.01km 폭=19.7m	7,111	1,143	1,766	4,202	2020.06.04. ～ 2023.06.03.	1 (정지)	보상
	정산지구		연장=1.0km 폭=13.0~15.0m	8,000	1,210	1,000	5,790	2020.08.04. ～ 2023.08.03	66 (공사중)
신규지구	소 계		2지구 (1.69km)	19,190	0	1,513	17,677
	합곡지구		연장=0.95km 폭=10.0m	18,000	0	323	17,677	2021.02. ～ 2025.12.	설계 예정
	효제교차로		연장=0.74km 폭=10.0m	1,190	0	1,190	0	2021～2023	설계 예정

【3】공공 건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 1. 1. 현재)

사 업 명		사업량	위치	사업비				사업기간	투자 공정 (진도)	비고
				전체	기시행	2021년	장차
합 계		12개소		363,691	39,806	89,571	234,314
계속사업	소 계	7개소		337,512	25,519	80,339	231,654
	충남국제전시컨벤션센터 건립공사	지하1 지상4층 연면적 51,900㎡	천안시 불당동	160,300	2,607	3,400	154,293	2020.08 ~ 2024.12	-	설 계 준비중
	소방복합시설 조성사업	9개동 연면적 16,994㎡	청양군 비봉면	76,649	8,046	39,376	29,227	2018.10 ~ 2023.12	-	설계중
	충남 스포츠센터 조성사업	지하1 지상2층 연면적 13,344㎡	예산군 삽교읍	47,500	7,760	18,240	21,500	2019.01. ~ 2022.12	-	착 공 준비중
	충남 지식산업센터 건립공사	지하1 지상6층 연면적 12,486㎡	천안시 불당동	29,346	6,719	15,638	6,989	2018.11 ~ 2022.08	-	착 공 준비중
	육아종합지원센터	지하1층,지상3층,연면적 3,306㎡	예산군 삽교읍RB5 구역	13,100	0	1,000	12,100	2020.03. ~ 2022.12.	-	설 계 준비중
	수산종자 연구센터 건립공사	지상3층 연면적 2,024㎡	보령시 웅천읍	6,700	300	2,000	4,400	2020.01. ~ 2022.12.	-	설 계 준비중
	대천항 관공선 통합사무실 건립공사	지상2층 연면적 1,370㎡	보령시 신흑동	3,917	87	685	3,145	2020.01. ~ 2022.12.	-	설 계 준비중
준공사업	소 계	5개소		26,179	14,287	9,232	2,660
	직산119 안전센터 신축공사	지상3층 연면적 980㎡	천안시 서북구 직산읍	2,402	110	2,292	0	2020.12. ~ 2021.10.	5%	공사중
	재래흥겸소 사육사 증축공사(2차)	지상1층 연면적 967㎡	청양군 정산면	998	998	0	0	2020.12. ~ 2021.04.	5%	공사중
	홍성지소 증축및 리모델링	지상1층 연면적 153㎡	홍성군 홍성읍	927	927	0	0	2020.08. ~ 2021.02.	52%	공사중
	충남 공감마루 신축공사	지하1 지상3층 연면적 2,920㎡	내포 업무구역 4블럭	9,452	9,452	0	0	2019.11. ~ 2021.04.	46%	공사중
	내포 자연놀이뜰 조성공사	지하1/ 지상2층 연면적 3,370㎡	내포 신도시 RB5 구역	12,400	2,800	6,940	2,660	,2019.01. ~ 2021.07	47%	공사중

총 괄		계속사업		준공사업
12개소 89,571백만원		7개소 80,339백만원		5개소 9,232백만원

<참  고> ‘21년도 예산 추가 확보 예상 사업

사 업 명		사업량	위치	사업비				사업기간	투자 공정 (진도)	비고
				전체	기시행	2021년	장차
합 계		12개소		209,596	0	45,495	164,101
신규 예 정사업	도립미술관 및 공영주차장	지하2층 지상2층	홍성군 홍북읍	98,700	0	3,000	95,700			’21.5. 의뢰예정
	안면도지방정원 가든센터	지상2층	태안군 안면읍	15,000	0	5,000	10,000			’21.5. 의뢰예정
	장애인힐링센터	지하1층 지상2층	태안군 안면읍	26,929	0	26,929	0			미정
	충남사회적경제 혁신타운	지하1층지상3층	청양군 청양읍	28,000	0	1,900	26,100			미정
	충남 환경교육연수원	미 정	미정	19,000	0	3,000	16,000			미정
	천안의료원 기숙사 증축	지상4층	천안시 동남구	6,000	0	4,500	1,500			’21.3. 의뢰예정
	소방훈련탑 증축공사	지하1층 지상3층	천안시 직산읍	350	0	20	330			’21.3. 의뢰예정
	소방안전체험교실 및 다목적 훈련탑 신축공사	지상4층	공주시 웅진동	500	0	28	472			’21.3. 의뢰예정
	소방안전체험교실 및 다목적 훈련탑 신축공사	지상3층	태안군 태안읍	500	0	500	0			’21.3. 의뢰예정
	금산소방서 청사 증축공사	지하1층 지상4층	금산군 금산읍	7,059	0	210	6,849			’21.2. 의뢰예정
	당진소방서 청사 증축공사	지하1층 지상4층	당진시 채운동	6,858	0	394	6,464			’21.6. 의뢰예정
	청양구기자연구소 증축공사	지상2층	청양군 운곡면	700	0	14	686			’21.3. 의뢰예정

【4】지방하천 정비사업 현황

(2021. 1. 1.)

총 괄		준공지구		계속지구		신규지구
◀ 37건 112,468백만원 ▶		◀ 6건 13,216백만원 ▶		◀ 26건 95,252백만원 ▶		◀ 5건 4,000백만원 ▶

<총  괄>

구 분	지구 수	사업량 (km)	사 업 비(백만원)				비고
			계	기시행	2021년	장차
합 계	37지구	147.942	802,520	198,239	112,468	491,813
지방하천 정비사업	34지구	139.692	734,243	195,216	47,214	491,813	준공 6, 계속 23, 신규 5
지방하천 재해복구	3지구	8.25	68,277	3,023	65,254	-	계속 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
계	34지구			139.692	734,243	195,216	47,214	491,813
준 공 지 구	소계 (6지구)			35.39	157,571	144,355	13,216	0
	성환천	천안	부대 성환	10.52	49,731	47,731	2,000	0	2016.05.10.∼ 2021.01.20.	95	공사중
	마곡천	공주	사곡	3.30	13,705	13,609	96	0	2017.12.12.∼ 2021.04.06.	98	공사중
	연산천	계룡 논산	엄사 연산	6.79	30,368	25,471	4,897	0	2018.03.29.∼ 2022.03.07.	69	공사중
	금 천	부여	옥산 장암	10.1	32,786	32,632	154	0	2016.05.10∼ 2021.01.18.	98	공사중
	도당천	서산	해미 운산	2.73	11,552	9115	2,437	0	2018.07.02.∼ 2021.08.24.	78.3	공사중
	신암천	논산	연산	1.95	19,429	15,797	3,632	0	2018.05.18.∼ 2021.10.20.	35	공사중
계 속 지 구	소계 (23지구)			85.552	469,879	50,861	29,998	389,020
	화산천	서천	기산 화양	4.28	37,820	18,456	2,686	16,678	2018.03.29∼ 2023.05.01	56	공사중
	석남천	서산	예천 석남	2.66	21,216	14,480	3,710	3,026	2017.05.19.∼ 2022.08.29.	51	공사중
	병천천	천안	병천	8.3	22,010	1,710	4,000	16,300	2017.12.25.∼ 202312.31.	-	공사중
	광기천	천안	병천	3.4	25,823	2,030	3,000	20,793	2018.01.03.∼ 202312.31.	-	공사중
	주교천	부여	주교	3.0	24,020	1,055	2,000	20,965	2020.12.07.∼ 2024.03.20.	1.0	공사중
	명천천	서산	성연	1.055	3,047	634	900	1,513	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사 발주
	석림천	서산	석림	0.387	711	169	100	442	2018.01.01.∼ 2022.12.31.	-	공사중
	중산천	공주	금흥	0.72	17,271	870	1,000	15,401	2020.10.06.∼ 2023.03.24.	3.0	공사중
	장승천	청양	청양	3.29	15,961	877	2,702	12,382	2020.12.07.∼ 2023.05.25.	1.0	공사중
	천안천 (장재천)	천안	백석 불당	1.5	23,170	521	1,700	20,949	2019.02.20. 2023.12.31.	-	발주 준비
	신양천	논산	연무	4.3	25,555	646	1,000	23,909	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	와룡천	홍성	갈산 결성	9.56	25,247	1,326	500	23,421	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	도마천	서천	문산	7.3	18,246	774	1,000	16,472	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	용요천	태안	근흥	3.3	40,669	847	1,000	38,822	2019.01.01.∼ 2025.02.28.	-	설계중
	왕대천	계룡	두마	2.7	6,497	295	500	5,702	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	간치천	보령	주산	4.7	23,124	878	1,000	21,246	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	판교천	서천	종천 서천	2.6	14,376	504	500	13,372	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	청지천	서산	장홍 석림	3.4	29,431	905	500	28,026	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	왕암천	논산	가야곡	5.4	24,870	725	500	23,645	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	오봉천	당진	송악 신평	3.0	23,699	765	500	22,434	2020.01.∼ 2024.12.	-	설계중
	칠산천	부여	임천	3.0	25,373	1,093	200	24,080	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	진산천	금산	진산	1.7	7,420	501	200	6,719	2019.01.01.∼ 2023.12.31.	-	설계중
	유등천	금산	복수	6.0	14,323	800	800	12,723	2018.01.∼ 2022.12.	-	설계중지 (하천과)
신규	소계 (5지구)			18.75	106,793	-	4,000	102,793
	둔포천	아산	둔포	4.47	40,222	-	800	39,422	20021.∼ 2025.		신규
	솔리천	서천	장항	1.3	4.997	-	800	4,197	20021.∼ 2025.		신규
	초대천	당신	신평	6.27	37,394	-	800	36,594	20021.∼ 2025.		신규
	양촌천	논산	양천	3.38	15,832	-	800	15,032	20021.∼ 2025.		신규
	판정천	천안	입장	3.33	8,798	-	800	7,998	20021.∼ 2025.		신규

<지방하천 재해복구사업>

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
계	3지구			8.25	68,277	3,023	65,254	-
계속지구	금곡천	아산	배방	1.8	9,045	1,000	8,038	-	2020.11.24∼ 2022.12.31.	-	설계중
	약봉천	아산	송악	2.94	2,1853	1,023	20,845	-	2020.11.24∼ 2022.12.31.	-	설계중
	온양천	아산	송악	3.51	37,379	1,000	36,371	-	2020.11.24∼ 2022.12.31.	-	설계중

【5】지역개발 사업 현황

(2021. 1. 1.)

총 괄		준공지구		계속지구		신규지구
◀ 2건 15,491백만원 ▶		◀ - ▶		◀ 2건 15,491백만원 ▶		◀ - ▶

연번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				공사기간	진도 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차
합 계		2지구		4.51	89,812	57,152	15,491	17,169
계속지구	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	홍성 홍성	홍북 홍성	연장=3.90 (폭=20.0m)	53,166	42,824	5,491	4,851	2018.03.02.～ 2022.02.08.	73.0	공사중
	태안기업도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.61 (폭=25.0m)	36,646	14,328	10,000	12,318	2020.02.28.∼2023.02.11.	20.0	공사중

【6】도로 유지관리사업 현황

총 괄		계속지구		신규지구
◀ 232지구 80,892백만원 ▶		◀ 41지구 22,212백만원 ▶		◀ 191지구 58,680백만원 ▶
․자체사업 117 / 18,502		․자체사업 12 / 1,799		․자체사업 105 / 16,703
․재배정사업 91 / 46,470		․재배정사업 23 / 18,857		․재배정사업 68 / 27,613
․균특사업 0 / 0		․균특사업 0 / 0		․균특사업 0 / 0
․위임국도 24 / 15,920		․위임국도 6 / 1,556		․위임국도 18 / 14,364

<공주․홍성지소>                                        (단위: 백만원, 2021. 1. 1. 현재)

사업 구분	총계		계속지구						신규지구
			합계		공주		홍성		합계		공주		홍성
계	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	232	80,892	41	22,212	21	19,615	20	2,597	191	58,680	112	26,765	79	31,915
자체사업	117	18502	12	1,799	7	498	5	1,301	105	16,703	63	7,727	42	8,976
재배정사업	91	46470	23	18,857	12	17,877	11	980	68	27,613	35	13,643	33	13,970
균특사업	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0			-	-
위임국도	24	15920	6	1,556	2	1,240	4	316	18	14,364	14	5,395	4	8,969

<공주지소>                                         (단위 : 백만원, 2021. 1. 1.현재)

사업명			위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			133개 지구			46,134
계(계속지구)			21개 지구			19,615
계속지구	소계	자 체 사 업	7개 지구			498
	자체사업	병암도로 안전시설정비공사	논산	가야곡	1식	20	20.12.~21.01.
		샛고개터널(상) 외 3개소 정밀안전 점검용역	금산	복수	1식	29	20.12.~21.02.
		지방도799호선 십자사거리 회전교차로 설치공사 실시설계용역	부여	석성	1식	8	20.12.~21.02.
		[서천]랑평리 외 2개소 도로정비공사	서천	종천	1식	17	20.12.~21.01.
		삼가교 재가설공사	금산	진산	1식	386	19.12.~21.02.
		공주지소 경관조형물 설치용역	공주지소		1식	18	20.12.~21.02.
		재해대책 추진	공주지소		1식	20	20.11.~21.03.
	소계	재배정 사업	12개 지구			17,877
	재배정사업	KTX공주역 진입지방도 선형개량사업	공주	이인	1식	2,150	19.01.~21.12.
		광금도로 선형개량공사	청양	대치	1식	1,566	19.12.~22.10.
		광덕도로 선형개량공사	천안	광덕	1식	1,009	21.01.~21.12.
		지방도 교량 내진성능보강	논산	양촌	1식	452	20.12.~21.12.
		국지도68호 황산대교 내진성능보강 (성립전)	논산	강경	1식	452	20.10.~21.12.
		지방도 7.28~8.11 수해복구 사업	공주지소		5개소	1,701	20.10.~21.06.
		우곤도로 선형개량공사	논산	성동	1식	1,838	17.06.~22.02.
		주항도로 선형개량공사	서천	서	1식	428	18.08.~21.06.
		양전도로 선형개량공사	금산	금성	1식	524	18.05.~21.09.
		석막도로 선형개량공사	금산	진산	1식	1,794	20.12.~23.11.
		천을도로 선형개량공사	부여	군북	1식	914	20.01.~23.12.
		저곡지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	금산	제원	1식	5,049	19.01.~21.06.
	소계	위 임 국 도	2개 지구			1,240
	위임국도	신천사거리 접속도로 이설공사	금산		1식	540	19.01~21.12	30
		장평사거리 회전교차로 설치공사	청양		1식	700	20.01~21.12	15
계(신규지구)			112개 지구			26,765
신규지구	소계	자 체 사 업	63개 지구			7,727
	자체사업	국지도70호 율금도로 배수로시설 정비공사	천안	성환	L=300m	50	‘21.01∼06
		국지도23호 성거도로 배수시설 정비공사	천안	성거	L=450m	70	‘21.01∼06
		국지도57호 오곡도로 배수로정비공사	천안	북	L=500m	80	‘21.01∼06
		지방도691호 천정도로 배수로정비공사	천안	목천	L=450m	90	‘21.01∼06
		지방도691호 대정도로 배수로정비공사	천안	성남	L=300m	60	‘21.01∼06
		지방도629호 매당도로 배수로정비공사	천안	광덕	L=300m	50	‘21.01∼06
		지방도604호 유룡도로 배수시설정비공사	공주	사곡	L=500m	100	‘21.01∼06
		지방도604호 운암도로 배수시설정비공사	공주	사곡	L=500m	100	‘21.01∼06
		지방도651호 대학도로 배수로 정비공사	공주	탄천	L=1,500m	150	‘21.01∼06
		국지도68호 사정도로 배수로정비	논산	벌곡	L=450m	50	‘21.01∼06
		국지도68호 백석도로 배수로 정비공사	논산	연산	L=400m	50	‘21.01∼06
		지방도643호 석종도로 배수로정비	논산	상월	L=50m	20	‘21.01∼06
		국지도68호 두월도로 배수로정비공사	논산	연산	L=150m	30	‘21.01∼06
		지방도697호 양촌도로 포장도보수공사	논산	양촌	L=1,300m	130	‘21.01∼06
		국지도68호 강경도로 차선도색 정비공사	논산	강경,연무	1식	70	‘21.01∼06
		지방도601호 서대도로 배수로 정비공사	금산	추부	L=500m	100	‘21.01∼04
		지방도601호 평촌도로 배수로 정비공사	금산	부리	L=300m	80	‘21.01∼04
		국지도68호 묵산도로 배수로 정비공사	금산	진산	L=350m	70	‘21.01∼04
		지방도635 역평도로 배수로 정비공사	금산	남이	L=500m	100	‘21.01∼04
		지방도723호 팔충도로 배수로 정비공사	부여	충화	L=500m	100	‘21.01∼06
		지방도606호 장항도로 배수로 정비공사	부여	외산	L=400m	100	‘21.01∼06
		지방도723호 내성도로 배수로 정비공사	부여	양화	L=300m	80	‘21.01∼06
		지방도611호 상황도로 배수로 정비공사	부여	장암	L=240m	70	‘21.01∼06
		지방도613호 한산도로 배수시설정비	서천	한산	L=1,900m	200	‘21.01∼06
		지방도611호 문장도로 배수시설정비	서천	ansatks	L=450m	60	‘21.01∼06
		국지도68호 원수도로 배수시설정비	서천	장항	L=150m	30	‘21.01∼06
		지방도613호 안당도로 배수시설정비	서천	마산	L=200m	20	‘21.01∼06
		지방도613호 벽오도로 배수시설정비	서천	마산	L=200m	40	‘21.01∼06
		국지도96호 중묵도로 배수시설정비	청양	비봉	L=400m	80	‘21.01∼06
		지방도610호 화강도로 배수시설정비	청양	화성	L=300m	60	‘21.01∼06
		지방도619호 농암도로 포장보수공사	청양	화성	L=1,000m	100	‘21.01∼06
		지방도610호 왕진도로 포장보수공사	청양	화성	L=1,200m	110	‘21.01∼06
		지장도로 포장도보수공사	천안	광덕	1식	150	‘21.01∼06
		보성도로 포장도보수공사	천안	풍세	1식	100	‘21.01∼06
		용원도로 포장도보수공사	천안	성남	1식	50	‘21.01∼06
		저리도로 포장도보수공사	천안	성거	1식	150	‘21.01∼06
		효계도로 포장도보수공사	천안	입장	1식	50	‘21.01∼06
		만수도로 포장도보수공사	공주	이인	1식	150	‘21.01∼06
		대산도로 포장도보수공사	공주	정안	1식	200	‘21.01∼06
		신대도로 포장도보수공사	금산	복수	1식	100	‘21.01∼06
		지량도로 포장도보수공사	금산	복수	1식	200	‘21.01∼06
		동산도로 포장도보수공사	논산	연무	1식	70	‘21.01∼06
		산직도로 포장도보수공사	논산	양촌	1식	150	‘21.01∼06
		이사도로 포장도보수공사	논산	광석	1식	130	‘21.01∼06
		증산도로 포장도보수공사	부여	석성	1식	100	‘21.01∼06
		정동도로 포장도보수공사	부여	부여	1식	50	‘21.01∼06
		상천도로 포장도보수공사	부여	홍산	1식	100	‘21.01∼06
		수원도로 포장도보수공사	부여	양화	1식	50	‘21.01∼06
		마대도로 포장도보수공사	서천	판교	1식	100	‘21.01∼06
		동산도로 포장도보수공사	서천	한산	1식	50	‘21.01∼06
		지원도로 포장도보수공사	서천	문산	1식	50	‘21.01∼06
		송림도로 포장도보수공사	서천	장항	1식	100	‘21.01∼06
		농소도로 포장도보수공사	청양	대치	1식	80	‘21.01∼06
		신왕도로 포장도보수공사	청양	남양	1식	80	‘21.01∼06
		인양도로 포장도보수공사	청양	청남	1식	60	‘21.01∼06
		장곡도로 포장도보수공사	청양	대치	1식	80	‘21.01∼06
		제초작업	전노선		1식	600	‘21.01∼12
		긴급 보수공사	전노선		1식	500	‘21.01∼12
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	‘21.01∼12
		안전시설물 정비사업	전노선		1식	700	‘21.01∼12
		교량 및 터널 정비사업	전노선		1식	200	‘21.01∼12
		재해대책 추진 장비임차료	전노선		1식	300	‘21.01∼12
		재해대책 추진 자재구입	전노선		1식	227	‘21.01∼12
	소계	재배정사업	35개 지구			13,643
	재배정사업	지방도 교량안전진단	공주지소		1식	1,127	‘21.01∼12
		도로대장 유지관리	공주지소		1식	20	‘21.01∼06.
		지방도변 마을주민 보호구역	공주지소		1식	240	‘21.01∼06.
		운행방향 유도레인 설치	공주지소		1식	30	‘21.01∼06.
		터널방재시설 설치(곡두터널)	천안	광덕	1식	200	‘21.01∼12
		지방도 안전시설(방호울타리)정비	공주지소		L=4,000m	1,000	‘21.01∼12
		로드킬 방지시설 설치공사	공주지소		L=1,850m	150	‘21.01∼06.
		606호 용마도로 갓길정비공사	청양	님양	L=2,300m	500	‘21.01∼22.12
		유구도로 안전시설 설치사업	공주	유구	1식	100	‘21.01∼06.
		지방도 인도설치공사	공주지소		5개소	1,413	‘21.01∼06.
		지방도 표지판 정비	공주지소		1식	100	‘21.01∼06.
		도로표지(LED) 개선사업	공주지소		1식	50	‘21.01∼12
		횡단보도 바닥 매립형 유도등 설치사업	공주지소		1식	50	‘21.01∼12
		611호 장항~서천 명품도로 개설사업	서천	장항,서천	1식	500	‘21.01∼12
		지방도611호 마서~계동 배수로정비	서천	마서	L=500m	130	‘21.01∼06.
		지방도629호 용경도로 교차로 개선공사	천안	광덕	L=220m	340	‘21.01∼12
		국지도96호 용천도로 교차로 개선공사	청양	비봉	L=300m	350	‘21.01∼12
		지방도611호 서천(군사)오거리 교차로 개선공사	서천	서천	L=600m	400	‘21.01∼12
		지방도799호 십자사거리 회전교차로 설치공사	부여	석성	L=200m	300	‘21.01∼12
		계룡 중장지구 회전교차로 설치공사	공주	계룡	1식	50	‘21.01∼12
		지방도606호 남양사거리 교차로 개선공사	청양	남양	1식	360	‘21.01∼12
		마서계동도로 선형개량공사	서천	마서	1식	300	‘21.01∼12
		서천 필당고개 선형개량공사	서천	마산	1식	100	‘21.01∼12
		둔덕도로 위험도로 정비공사	서천	서천	1식	100	‘21.01∼12
		지방도617호 상좌리 선형개량공사	서천	판교	1식	100	‘21.01∼12
		탄천 덕지도로 선형개량공사	공주	탄천	1식	100	‘21.01∼12
		신풍 봉갑지구 선형개량공사	공주	신풍	1식	150	‘21.01∼12
		현내도로 선형개량공사	부여	석성	1식	700	‘21.01∼12
		종천도로 선형개량공사	서천	종천	1식	100	‘21.01∼12
		지방도606호 남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사	청양	남양	1식	500	‘21.01∼12
		청양 비봉 중묵도로 위험구간 개선공사	청양	비봉	1식	100	‘21.01∼12
		국지도57호 기로도로 위험구간 개선공사	천안	입장	1식	300	‘21.01∼12
		지방도 교량 유지관리	공주지소		13개소	2,433	‘21.01∼12
		내진보강공사	공주지소		2개소	450	‘21.01∼12
		노성도로 선형개량공사	논산	노성	1식	800	‘21.01∼12
	소계	위 임 국 도	14개 지구			5,395
	위임국도	교량 안전점검용역	전노선		1식	610	21.01~21.12
		실시설계용역	전노선		1식	199	21.01~21.12
		교량 및 터널 보수	전노선		1식	2,174	21.01~21.12
		보행자 통행시설	전노선		1식	282	21.01~21.12
		사고 잦은 곳	전노선		1식	400	21.01~21.12
		횡단보도 조명시설	전노선		1식	30	21.01~21.12
		기타 안전시설 정비	전노선		1식	505	21.01~21.12
		금정교차로 개선 설계	전노선		1식	30	21.01~22.12
		절토사면 안전점검용역	전노선		1식	167	21.01~21.12
		차선도색	전노선		1식	400	21.01~21.12
		소구조물 정비	전노선		1식	150	21.01~21.12
		도로손괴 원상복구	전노선		1식	3	21.01~21.12
		배수시설 개선	전노선		1식	380	21.01~21.12
		재해복구	전노선		1식	80	21.01~21.12

<홍성지소>                                         (단위 : 백만원, 2021. 1. 1.현재)

사업명			위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
			시･군	읍･면
총 계			99개 지구			34,512
계(계속지구)			20개 지구			2,597
계속지구	소계	자 체 사 업	5개 지구			1,301
	자체사업	청사유지관리(리모델링)	홍성지소		1개소	520	20.10∼21.04	60	공사중
		신창교 재가설공사	서산	해미	1개소	478	20.08~21.08	30	공사중
		용현교 재가설공사	서산	운산	1개소	136	20.08~21.08	40	공사중
		삼송교 재가설공사	서산	해미	1개소	164	19.11∼20.12	80	특교세
		2021년 홍성, 아산지역 실시설계용역	홍성, 아산		1식	3	20.12.~21.02	30	용역중
	소계	재배정 사업	11개 지구			980
	재배정사업	지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	19	19.11~22.12		공사중
		국지도 96호 용신도로 선형개량공사	태안	근흥	L=0.50km	7	20.08~21.12		용역중
		지방도610호 영보리 선형개량공사	보령	오천	L=0.48km	352	20.09~21.09		공사중
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	86	20.04~21.04	60	공사중
		삼송교 재가설공사	서산	해미	1개소	96	19.11∼20.12	80	정지중
		지방도 교량유지관리(선인교)	아산	선장	1개소	31	20.06~20.10	90	정지중
		지방도645호 도산도로 재해복구 공사	아산	도고	1개소	198	20.12~21.06	-	공사중
		지방도602호 계정리 재해복구(사면보강) 사업	예산	응봉	1개소	90	21.01~21.12	-	공사중
		국지도70호 칠성암삼거리 회전교차로 설치공사	예산	신양	1개소	36	20.07~21.04	95	공사중
		지609호 운월도로 선형개량공사 실시설계용역	홍성	홍동	1식	52	20.08~21.02	80	용역중
									용역중
								30
							20.12~21.02
						13
					3식
			보령, 당진, 태안
		2021년 홍성지소 인도설치공사 실시설계용역
	소계	위 임 국 도	4개 지구			316
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	50	20.01~21.12	50	공사중
		도로유지보수	전노선		1식	120	20.01~21.12	50	공사중
		도로병목지점개선	전노선		1식	10	20.01~21.12	50	공사중
		위험도로개선	전노선		1식	136	20.01~21.12	50	공사중
계(신규지구)			79개 지구			31,915
신규지구	소계	자 체 사 업	42개 지구			8,976
	자체사업	지방도645호 화산도로 포장도 보수공사	예산	대술	L=2.0km	250	21.01∼06
		지방도618호 신원도로 포장도 보수공사	예산	오가	L=2.0km	250	21.01∼06
		지방도619호 신가도로 포장도 보수공사	예산	삽교	L=1.0km	100	21.01∼06
		예산군 광시면, 봉산면 배수로 정비공사	예산	광시,봉산	L=1.0km	150	21.01∼06
		지방도624호 염치교차로 개선공사	아산	염치	1개소	200	21.03~21.06
		지방도 624호 금성초등학교 교차로 개선공사	아산	인주	1개소	200	21.03~21.06
		지방도 623호 수철도로 외 2개소 배수로 정비 공사	아산	배방	1개소	100	21.03~21.06
		지방도 645,616호 농은 ~ 화천도로 포장공사	아산	송악	L=2.5km	250	21.03~21.06
		국지도 96호 정죽도로 포장도 보수공사	태안	근흥	L=1.0km	150	21.01~21.12
		지방도603호 청산도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=3.0km	300	21.01~21.12
		지방도634호 반계도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=2.0km	200	21.01~21.12
		지방도603호 반계도로 소구조물 정비공사	태안	원북	1개소	50	21.01~21.12
		지방도603호 내리도로 배수시설 정비공사	태안	이원	1개소	50	21.01~21.12
		지방도634호 고남도로 배수로정비	서산	성연	1개소	30	21.01~21.12
		지방도634호 고남도로 포장도 보수공사	서산	성연	L=2.0km	200	21.01~21.12
		지방도609호 원평도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=1.2km	120	21.01~21.12
		지방도647호 태봉도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=2.0km	200	21.01~21.12
		지방도647호 삼송도로 포장도 보수공사	서산	해미	L=2.0km	200	21.01~21.12
		지방도606호 수부도로 포장도 보수공사	보령	웅천	L=2.5km	250	21.01~21.12
		지방도610호 장현도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.5km	150	21.01~21.12
		지방도610호 성연도로 포장도 보수공사	보령	청소	L=2.0km	200	21.01~21.12
		지방도610호 황룡도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.5km	150	21.01~21.12
		국지도96호 도산~소암리 포장도 보수공사	홍성	광천	L=4.0km	400	21.01∼06
		지방도616호 덕정~죽림 포장도 보수공사	홍성	금마	L=2.0km	200	21.01∼06
		국지도96호 성호도로 포장도 보수공사	홍성	결성	L=1.5km	150	21.01∼06
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	274	20.04∼21.04	60	특교세
		지방도615호 광천도로 배수시설 개선공사	당진	순성	1개소	200	21.01∼21.12
		지방도619호 면천도로 포장도 보수공사	당진	면천	L=2.0km	200	21.01∼21.12
		지방도647호 신시도로 포장도 보수공사	당진	정미	L=1.5km	150	21.01∼21.12
							21.01∼21.12
						100
					L=1.0km
				우강
			당진
		국지도70호 송산도로 포장도 보수공사
		지방도622호 중흥도로 포장도 보수공사	당진	송악	L=1.0km	100	21.01∼21.12
		터널 및 교량관리	전노선	1식		150	21.01∼21.12
		지방도 교량유지관리	중대교,용연교,해창교,둔당교,마교교		1식	626	21.01∼21.12		특교세
		비점오염저감시설 운영 유지관리	55개소		1식	120	21.01∼21.12
		안전시설 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	700	21.01∼12
		긴급도로보수공사	전노선		1식	150	21.01∼12
		지방도 제설 및 제초용역	전노선		1식	500	21.01∼12
		도로유지보수 자재구입	전노선		1식	350	21.01∼12
		도로유지보수 폐기물처리	전노선		1식	50	21.01∼12
		재해대책추진	전노선		1식	527	21.01∼12
		터널 및 교량관리(전기요금)	전노선		1식	200	21.01∼12
		도로 유지보수(인건비, 운영비, 직무수행경비, 부대비)	전노선		1식	79	21.01∼12
	소계	재배정사업	33개 지구			13,970
	재배정사업	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	20.01∼12
		지방도 표지판정비	전노선		1식	100	20.01∼12
		도로표지(LED) 개선사업	서산, 당진		1식	50	21.01∼12
		지방도변 마을주민 보호구역 정비사업	보령, 예산		2개소	160	21.01∼12
		운행방향 유도레인 설치	아산, 당진, 홍성		1식	30	21.01∼21.12
		터널 방재시설 설치	봉산터널		1식	200	21.01∼21.12
		지방도 안전시설(방호울타리) 정비	서산, 당진, 홍성		1식	1,000	21.01∼21.12
		로드킬 방지 시설	홍성, 예산		1식	100	21.01∼12
		횡단보도 바닥 매립형 유도등 설치	전노선		5개소	50	21.01∼12
		야생조류 투명 방음벽 충돌 저감 대책 추진	서산	부석	L=4km	100	21.01∼12
		국지도70호 문양도로 포장도 보수공사	서산	음암	L=5.0km	500	21.01~22.12
		지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	1,500	21.01~22.12		위험 도로
		지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.84km	1,249	21.01~22.12		위험 도로
		국지도 96호 용신도로 선형개량공사	태안	근흥	L=0.50km	500	21.01~21.12
		지방도603호 내리도로 인도설치공사	태안	이원	L=0.15km	150	21.01~21.12
		지방도634호 황촌도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.30km	150	21.01~21.12
		지방도610호 교성도로 인도설치공사	보령	오천	L=0.20km	165	21.01~21.12
		지방도606호 수부도로 인도설치공사	보령	웅천	L=0.35km	450	21.01~21.12
		지방도607호 황교도로 선형개량공사	보령	웅천	L=0.30km	450	21.01~21.12
		지방도616호 도막사거리 회전교차로 설치사업	홍성	금마	1식	800	21.01~22.12.		교통과
		국지도96호 대평도로 인도설치공사	홍성	광천	L=0.2km	198	21.01∼21.06
		지방도609호 운월도로 선형개량공사	홍성	홍동	L=0.4km	625	21.01~22.12.
		서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	670	20.04∼21.04	60	공사중
		지방도 교량유지관리	삼월1교 등 15개교		15개소	1,397	21.01∼21.12
		지방도 교량안전진단	전노선		16개소	743	21.01∼21.12		터널2 지하차도1포함
		도화담리 개선공사 실시설계용역	보령	미산	1개소	125	21.01∼21.12
		당진지역 포장도 보수공사	당진		1식	1,000	21.01∼21.12
		지방도647호 장고항도로 인도설치공사	당진	석문	L=0.2km	200	21.01∼21.12
		지방도615호 성북도로 인도설치공사	당진	순성	L=0.1km	100	21.01∼21.12
		아산지역 포장도 보수공사	아산		L=4.0km	300	21.01∼21.06
		지방도619호 신대리 배수로 정비공사	예산	광시	L=0.1km	70	21.01∼21.06
		지방도616호 장복도로 재해복구 공사	예산	대술	L=0.1km	706	21.01∼21.06
		지방도645호 도산도로 재해복구 공사	아산	도고	1개소	112	20.12~21.06	-	공사중
	소계	위 임 국 도	4개 지구			8,969
	위임국도	도로안전및환경개선	전노선		1식	5,767	21.01~21.12
		도로유지보수	전노선		1식	697	21.01~21.12
		도로병목지점개선	전노선		1식	505	21.01~21.12
		위험도로개선	전노선		1식	2,000	21.01~21.12

□ 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
종합건설사업소	소 장	지방기술서기관	최동석	2021.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	최평근	2020.07.01.
	도로건설과장	지방시설사무관	이창로	2021.01.01.
	공공건축과장	지방시설사무관	김재균	2020.07.01.
	하천개발과장	지방시설사무관	이재원	2020.07.01.
공주지소	지 소 장	지방시설사무관	전상근	2020.02.24.
홍성지소	지 소 장	지방시설사무관	원종성	2020.07.01.